2015. 1

	목포시 환경보전계획(2014～2018년) 2014년 정비본

	목 포 시
	(환경관리과)

	【 목 차 】
1. 계획범위 3 2. 분야별 환경보전 목표 및 기본방향 3 3. 그간 추진성과 및 반성 6 ○ 지표별 달성도 평가표 11 4. 사업비 투자현황 12 ※ 분야별 추진실적 및 향후 추진계획 【01】대기환경 분야 13 【02】수질환경 분야 15 【03】폐기물관리 분야 19 【04】연안환경 분야 23 【05】상수도 분야 25 【06】소음․진동․악취․실내공기질․유해화학물질 분야 27 【07】토양환경 분야 28 【08】자연환경 분야 29 【09】산림자원 분야 33 【10】기후변화 분야 35

목포시 환경보전계획(2014～2018년)

- 2014년 정비본  -

「환경정책기본법」제19조 및「목포시환경정책기본조례」제6조에 따라 환경보전시책을 종합적이고 체계적으로 추진하기 위하여 5년마다 계획을 수립하고 매년 재정비 추진

1

계 획 범 위

가. 공간적 범위 : 목포시 전역

나. 계획기간 : 2014～2018년(5개년)

다. 계획내용 : 현황분석, 여건변화와 전망, 환경보전 기본구상,

부문별 환경보전계획 및 투자계획

2

분야별 환경보전 목표 및 기본방향

가. 환경보전 분야 : 10개 부문 - 66개 사업(시책 16, 투자 50)

① 대기환경

② 수질환경

③ 폐기물관리

④ 연안환경

⑤ 상수도

⑥ 소음․진동․악취․실내공기질․유해화학물질

⑦ 토양환경

⑧ 자연환경

⑨ 산림자원

⑩ 기후변화

나. 분야별 목표 및 기본방향

부 문 별		목표 및 기본방향
대기환경		▣ 맑은 하늘의 청정도시 실현 • 대기환경종합관리시스템 구축 • 맑고 깨끗한 대기질 요구 • 대기환경 정보처리시스템 확대
수질환경		▣ 생명이 숨쉬는 하천 만들기 • 도시 수변 이용 확대 • 하수의 고도처리를 통한 수환경 보전 • 하수의 재이용 방안 확대
폐기물관리		▣ 그린에너지 충만한 도시 환경 조성 • 깨끗한 시가지 형성 • 폐기물의 에너지화 추진 • 음식물 폐기물 처리방법 개선
연안환경		▣ 목포형 해양환경 조성 • 육상기인 오염 개선 • 해역기인 오염 개선
상수도		▣ 맑은 물을 만드는 상수도 • 상수도 정책의 선진화 체계 구축 • 상수도 관리 기능 강화

부 문 별		목표 및 기본방향
소음․진동 악취․실내공기질․유해화학물 분야		▣ 안전하고 평온한 생활환경 조성 • 생활환경 소음 및 교통소음 관리 강화 • 유해화학물질 사고 신속 대응
토양환경		▣ 녹색사회 실현을 위한 건강한 토양환경기반 조성 • 토양오염 관리 강화 • 지하수오염 관리 강화
자연환경		▣ 지속가능하고 활력있는 자연생태 보전 • 국내 고유종 보호와 생물다양성 보전관리 강화 • 도시근린공원간의 연계성 보강 • 여가 및 레크레이션 거점과 공원․녹지체계의 연계
산림자원		▣ 지속가능한 녹색산림으로의 전환 • 환경 자연자원의 통합관리로 생태적 효율 증진
기후변화		▣ 녹색환경과 경제, 사회의 조화 • 탄소중립도시 추진 • 그린네트워크 조성

3

그간 추진성과 및 반성

《 총    평 》

지구환경 문제인 기후변화에 능동적으로 대응하기 위해 녹색생활  실천가인 그린리더 143명을 육성하였고, 11,000세대가 탄소포인트제에 가입하는 등 온실가스 저감을 위한 환경시책을 전개 함.

국립호남권생물자원관 건립, 북항 도심(맹꽁이)생태복원사업 추진, 도심 생태공간 조성 등 자연환경․산림자원부문에서의 체계적 개발․이용․보전․복원을 통해 도시의 활력과 여유를 동시에 느낄 수 있는 생태적 환경조성에 우수한 사업성과를 거양함.

외부적인 요인에 따라 영향을 받는 영산강 및 목포연안의 수질은 환경기초시설 확충 및 수질오염총량관리제 운영 등의 개선노력에도 불구하고 단기간 내 수질개선은 기대가 어려움.

▣ 대기환경

○ 인터넷 이용의 보편화에 따라 대기오염측정망의 정보를 에어코리아(www.airkoira.or.kr)에서 실시간 제공하고 있으며, 미세먼지(PM-10)에 대한 예보 문자서비스 제공하는 등 시민 알권리 충족.

⇨‘15년부터 미세먼지 예보 문자서비스에 PM-2.5 까지 포함 필요.

○ 대기오염물질 배출사업장의 지속적인 관리와 시내버스 천연가스 보급화가 완료되어 노후된 천연가스시내버스를 대체 보급하는 사업을 지속 추진.

⇨ 2018년까지 노후된 천연가스시내버스 대체보급 달성 목표치를 55대에서 79대로 상향 조정함.(차량 10년기준 반영)

▣ 수질환경

○ 2004년부터 영산강 수질오염총량관리제도를 시행하고 영산강수계의 하수도 보급률이 크게 향상되고 있어 향후 수질개선이 기대

○ 우리시의 하수관련 시설 정비 및 소하천 수질개선 사업 등이 영산강권역 외 지역에서 대부분 이루어지고 있으며, 현재의 영산강 하구 수질은 영산강 수계에 속한 시･군의 지속적인 수질개선사업 추진에도 불구하고 만족할 수준의 수질개선 성과 기대가 어려움

⇨ 2015년부터 시행되는 제3단계 수질오염총량시행계획이 환경부에서 확정될 경우 우리시 환경보전계획에 시책사업으로 포함.

▣ 폐기물관리

○ BTL공사 이후 하수슬러지 발생량 증가에 따른 하수슬러지 재활용량 증가요인과 재활용품 분리배출로 매립량은 감소하여 재활용률은 증가함.

○ 폐기물 재활용처리 체계 확립 및 시민들의 재활용품 분리배출 의식 향상으로 1인당 생활폐기물 발생량이 2013년(1.07kg/일) 대비 2014년(0.63kg/일) 발생량이 감소 추세임.

⇨ 그간 근절되지 않는 무단투기 행위에 대하여 보다 강력하게 대응할 필요가 있어 환경보전계획 “[투자2] 무단투기 근절을 위한 시민감시단 운영”계획을 보다 포괄적 내용을 포함한 “[투자2] 생활쓰레기 불법투기 근절대책 시행”으로 변경 추진.

▣ 연안환경

○ 목포항내 부유쓰레기 430톤과 영산강 부유쓰레기 157톤을 수거․처리함.

○ 북항하수처리장 설치운영으로 목포연안 수질 개선이 기대되었으나,  반폐쇄적인 지리적여건과 영산강 담수유입에 따라 영향에 의해 단기간 내 연안환경 수질 개선효과가 미흡함.

⇨ 목포항에 직접적으로 영향을 끼치는 영산강 부유쓰레기 처리대책을 환경보전계획에 “[투자3] 영산강하구언 부유쓰레기 정화사업”을 추가 포함.

▣ 상수도

○ 믿고 마실수 있는 맑은물 공급을 위해 정수장에서부터 수도꼭지까지 수질검사를 확대 실시하고, 수도관 유수율 제고를 위한 누수탐사용역을 매년 지속적으로 시행하여 노후 급․배수관을 정비하고 있음.

⇨ 2014년 상수도 보급률 99.8%이며, 상수도 누수율이 2013년 11.4%에서 2014년 10.6%로 감소되었으나, 가정에서 사용되는 수돗물 이용량이 증가 추세로 시민들의 건전한 물이용 의식을 갖도록   홍보가 필요.

▣ 소음․진동․실내공기질

○ 다중이용시설의 실내공기질 점검과 공사장 등 소음․진동 발생원에 대한 점검을 실시하여 4개소에 대하여 행정처분 및 7,600천을 부과하였음.

○ 소음측정망을 운영한 결과 우리시의 경우 비교적 정온한 환경을 유지하고 있으나 나날이 자동차 등록대수의 증가로 주간소음은 상승될 것으로 예측됨.

⇨ 시민들의 정온한 환경에서의 주거 욕구가 충족 될 수 있도록 지속적인 노력이 필요.

▣ 토양환경

○ 토양오염조사는 국가측정망으로 8개지점 18개 항목을 조사하였고,   우리시 자체측정망으로는 측정항목을 17종에서 22종, 조사 지점은 7개 지점에서 8개 지점으로 확대 실시하여 중금속 및 일반항목에 대해 토양오염 대책 기준치를 초과한 지점은 없음.

⇨ 대양산업단지 조성, 서산․온금지구 재개발, 임성지구 개발 등 토양오염 영향 변동요인을 감안하여 토양오염 자체측정망 조사지점을 매년 1개소씩 확충.

▣ 자연환경

○ 국립호남권생물자원관의 기본설계용역을 완료하여 ‘15년부터 건립부지에 대한 연약지반처리 공사를 착수할 계획이며, 환경부 ’14년 생태계보전협력금 반환 공모사업으로 선정된 북항 도심(맹꽁이)생태복원사업이 목포해양경찰서 앞 매립지에 준공됨에 따라, 전국 멸종위기종 양서파충류 대체서식지 복원 모범사례로 활용될 계획임.

○ 그 외 철도폐선부지 웰빙공원조성 및 용당동 철도부지 쌈지공원 등 도시숲 조성사업과 주요 간선도로변 가로수․수벽조성사업이 추진되었음.

○ 도시공원에 대한 지속적인 정비를 추진하고, 삼학도 복원화 사업부지내 지장물(철로 등)을 철거하는 등 해양문화 관광도시로 발돋움 할 수 있는 녹색 도시재생에 노력하였음.

⇨ [투자12] 생태관광을 위한 철새 탐조대 설치사업은 국립호남권생물자원관 조성과 연계하여 시너지 효과가 발생할 수 있도록 사업시기를 2016년에서 2018년으로 조정

▣ 산림자원

○ 산림의 체계적인 이용 및 관리를 위해 산림휴양․문화공간 개념의 양을산산림욕장을 완공하여 이용중이며, 소나무재선충병 청정지역을 선포하여 관리 하는 등 산림 보전 대책을 추진하였음.

○ 산림감시 초소 관할외 지역인 율도에서 산불(1건)사고가 발생되어 도서지역을 관할하는 유달동에 산불진압용 등짐펌프(10개)를 배치함.

⇨ 산림자원 분야 지표설정 내용중 산림휴양․문화공간(1개소→3개소)확충 목표 달성을 위해 세부계획안으로“입암산 및 유달산 생태숲 조성”사업계획을 환경보전계획에 포함시킴.

▣ 기후변화

○ 2011~2012년간 온실가스 인벤토리(통계) 구축이 완료되고 2015년도에 기후변화적응대책 세부시행계획 수립용역이 추진되는 만큼, 지표별 달성도 평가내용중 기후변화부문의 온실가스 통계 구축(1건) 지표를 기후변화적응대책 세부시행계획 수립(1건)으로 변경 시행

○ 녹색생활실천가인 그린리더를 143명을 육성하여 각 가정을 방문하여 전기절약 건설팅을 실시하였고, 비산업부분의 온실가스 감축을 목표로 가정에서 전기사용량 감축실적에 따라 인센티브를 지급하는 탄소포인트제에 11,000세대가 가입하여 연간 310톤의 이산화탄소 감축 효과를 거양하였음.

⇨ 국가온실가스 감축목표치는 2020년의 온실가스 배출 전망치 대비 30/100이므로, 우리시의 2020년 온실가스 발생 예측량 1,856ktCO2 대비 30/100을 감축될 수 있도록 환경보전계획의 기후변화부문 2018년 온실가스 감축 목표치를 10%→20%상향 조정하였으며, 이에 따른 기후변화적응대책 세부시행계획 수립용역을 2015년에 추진하여 온실가스 감축 달성 목표치를 재설정하겠음.

○ 지속가능한 개발을 실현하기로 위해 지방의제21 추진기구(녹색목포21협의회)를 중심으로 민간주도적인 환경보전 운동 확산 및 친환경적 지역발전 방향을 모색하였음.

⇨ 향후 녹색목포21협의회는 실질적인 지방의제21 실현을 위해 민․관 파트너십을 형성하고 시민과 학생, 지역 환경․사회단체가 환경보전 활동을 연계할 수 있는 사업발굴을 모색하고 우리시에서는 지방의제21 추진 사업비의 현실화 지원이 필요.

▣ 지표별 달성도 평가

구 분			단 위	2013년 기준년도	2018년 목표년도	2014년 실적년도	추진여부
							달성	추진
대기환경	아황산가스(SO2)		ppm	0.006	0.005	0.006		○
	일산화탄소(CO)		ppm	0.4	0.4	0.5		○
	이산화질소(NO2)		ppm	0.013	0.013	0.017		○
	미세먼지(PM10)		㎍/㎥	36	36	42		○
	대기오염 자동측정망		개소	2	3	2		○
	노후된 천연가스버스 교체보급		대	-	79	11		○
수질환경	하수도 보급률		%	97.1	98	97.1		○
	영산호 수질		등급	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ		○
폐기물관리	생 활 폐기물	재활용률	%	48.1	50	48.5		○
		MBT	%	-	40	-		시운영기간
		매립률	%	51.9	30	51.5		○
		1인당발생량	kg/일	1.07	0.85	0.63	○
	사업장 폐기물	재활용률	%	66	75	80	○
		매 립	%	31.5	25	17.6	○
		해양배출	%	2.5	0	2.4		○
연안환경	연안 수질		등급	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ		○
상수도	상수도 보급률		%	99.8	99.9	99.8		○
	1인당 급수량		ℓ/일	361.8	390	365.1		○
	상수도 누수율		%	11.4	10	10.6		○
소음․진동	일반지역(일반주거) 소음도		dB(A)	주간:52	주간:51	53		○
				야간:43	야간:42	44		○
	도로변지역(일반주거) 소음도		dB(A)	주간:61	주간:60	62		○
				야간:52	야간:51	52		○
토양․지하수	토양오염실태조사		개소	7	11	8		○
	토양오염물질종류		종	17	21	22	○
	지하수오염실태조사		개소	5	9	-		‘15년이후
	지하수오염물질종류		종	19	23	-		‘15년이후
자연환경	철새 탐조대 설치		개소	1	2	-		‘18년이후
산림자원	산림재해예방(산불)		건	0	0	1		○
	산림휴양․문화공간		개소	1	3	-		‘15년이후
기후변화	적응대책 세부계획 수립		건		1	-		‘15년추진
	온실가스 감축목표		%	4.5	20	5		○
	탄소포인트제 참여율		%	11	30	11		○

5. 사업비 투자현황

가. 투자계획(변경)

<단위 : 백만원>

구 분		연도별 투자 실적 및 계획						세부사업
		총계	실 적	계 획
			2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	시책	투자
총 계	당초	305,487.3	52,105.1	105,035.3	79,091.3	41,496.8	27,758.8	16	50 (+2)
	변경	295,824.0	37,730.6	69,437.6	120,166.6	45,304.6	23,184.6
국비	당초	153,635.5	19,959.7	65,734.7	40,405.7	20,870.7	6,664.7
	변경	134,748.5	16,606.7	37,724.7	53,228.7	23,600.7	3,587.7
도비	당초	2,067	364	317	421	428	537
	변경	1,149	194	223	251	243	238
시비	당초	138,833.8	29,530.4	35,284.6	33,263.6	20,198.1	20,557.1
	변경	145,374.5	18,868.9	27,790.9	57,894.9	21,460.9	19,358.9
기타	당초	10,951	2,251	3,699	5,001	0	0
	변경	14,552	2,061	3,699	8,792	0	0
대기환경	당초	1,744	288	294	294	434	434	2	3
	변경	2,202	288	334	464	604	512
수질환경	당초	120,559	17,750	65,658	37,151	0	0	0	10
	변경	129,158	12,363	43,475	73,320	0	0
폐기물관리	당초	64,682.3	7,888.3	8,571	10,731	18,621	18,871	8	8
	변경	44,661.0	5,309.8	8,330.8	9,080.8	9,830.8	12,190
연안환경	당초	2,387	467	480	480	480	480	0	3 (+1)
	변경	2,290	437	458	465	465	465
상 수 도	당초	9,270	1,583	1,900	1,929	1,929	1,929	2	3
	변경	8,512	1,483	1,542	1,829	1,829	1,829
소음진동	당초	0	0	0	0	0	0	2	0
	변경	0	0	0	0	0	0
토양환경	당초	36		6	8	10	12	2	1
	변경	34		6	6	10	12
자연환경	당초	101,675	23,266	27,065.5	27,485.5	18,954	4,904	0	12
	변경	98,329	14,375	12,829	33,564	31,077	6,484
산림자원	당초	4,077	699	785	822	863	908	0	4 (+1)
	변경	9,551	3,326	2,232	1,222	1,263	1,508
기후변화	당초	1,057	163.8	275.8	190.8	205.8	220.8	0	6
	변경	1,087	149	231	216	226	266

※ 총 투자계획 : 당초 투자계획 대비 9,663백만원 감소

※ 분야별 투자계획 : 폐기물관리는 18,021백만원 감소, 산림자원는 5,474백만원 증가.

나.  사업별 세부 투자계획

(1)  대기환경 분야

관리번호	사 업 명	주 관	비 고
시책 1	On-line 환경정보 제공	환경관리과	비예산
시책 2	환경오염물질 배출시설 지도․점검 강화	환경관리과	비예산
투자 1	대기오염 자동측정망 확충․운영	환경관리과	예 산
투자 2	실시간 대기질․환경홍보 전광판 설치	환경관리과	예 산
투자 3	천연가스 자동차 보급 확대	환경관리과	예 산

○ 사업내용

○ 투자계획

사업별	구분		연도별 투자 실적 및 계획
			총계	실 적	계 획
				2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
계	총계	당초	1,744	288	294	294	434	434
		변경	2,202	288	334	464	604	512
	국비	당초	742	132	135	135	135	205
		변경	971	132	155	220	220	244
	도비	당초	264	52	53	53	53	53
		변경	331	52	59	78	78	64
	시비	당초	738	104	106	106	246	176
		변경	900	104	120	166	306	204
	기타	당초	0	0	0	0	0	0
		변경	0	0	0	0	0	0
대기오염 자동측정망 확충․운영	소계	당초	260	24	24	24	24	164
		변경	260	24	24	24	24	164
	국비	당초	70	0	0	0	0	70
		변경	70	0	0	0	0	70
	도비	당초	60	12	12	12	12	12
		변경	60	12	12	12	12	12
	시비	당초	130	12	12	12	12	82
		변경	130	12	12	12	12	82
	기타	당초	0	0	0	0	0	0
		변경	0	0	0	0	0	0

<단위 : 백만원>

사업별	구분		연도별 투자 실적 및 계획
			총계	실 적	계 획
				2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
실시간 대기질․ 환경홍보 전광판 설치	소계	당초	140	0	0	0	140	0
		변경	140	0	0	0	140	0
	국비	당초	0	0	0	0	0	0
		변경	0	0	0	0	0	0
	도비	당초	0	0	0	0	0	0
		변경	0	0	0	0	0	0
	시비	당초	140	0	0	0	140	0
		변경	0	0	0	0	0	0
	기타	당초	0	0	0	0	0	0
		변경	0	0	0	0	0	0
노후된 천연가스버스 교체보급	소계	당초	1,344	264	270	270	270	270
		변경	2,080	264	310	626	440	440
	국비	당초	672	132	135	135	135	135
		변경	1,040	132	155	313	220	220
	도비	당초	204	40	41	41	41	41
		변경	313	40	47	94	66	66
	시비	당초	468	92	94	94	94	94
		변경	727	92	108	219	154	154
	기타	당초	0	0	0	0	0	0
		변경	0	0	0	0	0	0

<단위 : 백만원>

(2) 수질환경 분야

관리번호	사 업 명	주 관	비 고
투자 1	하수도정비 기본계획변경	하수과	예 산
투자 2	하수도정비 중점관리지역 정비사업	하수과	예 산
투자 3	소하천 수질개선 사업	하수과	예 산
투자 4	남악신도시 하수처리시설 증설공사	하수과	예 산
투자 5	백련배수펌프장 신설공사	하수과	예 산
투자 6	남해 배수펌프장 개선 복구공사	하수과	예 산
투자 7	북항하수처리시설 고도처리 설치사업	하수과	예 산
투자 8	상동초기우수 처리시설 설치사업	하수과	예 산
투자 9	용해2지구～백련펌프장 하수관거 정비사업	하수과	예 산
투자 10	대양 하수처리분구 연계처리 시설사업	하수과	예 산

○ 사업내용

○ 투자계획

사업별	구분		연도별 투자 실적 및 계획
			총계	실 적	계 획
				2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
계	총계	당초	120,559	17,750	65,658	37,151	-	-
		변경	129,158	12,363	43,475	73,320	-	-
	국비	당초	70,027	7,667	44,204	18,156
		변경	58,782	5,588	29,195	23,999	-	-
	도비	당초	64	64	-	-	-	-
		변경	15	-	-	15	-	-
	시비	당초	39,517	7,768	17,755	13,994	-	-
		변경	55,809	4,714	10,581	40,514	-	-
	기타	당초	10,951	2,251	3,699	5,001	-	-
		변경	14,552	2,061	3,699	8,792	-	-

<단위 : 백만원>

사업별	구분		연도별 투자 실적 및 계획
			총계	실 적	계 획
				2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
하수도정비 기본계획 변경	소계	당초	800	800	0	0
		변경	1,200	0	400	800
	국비	당초
		변경
	도비	당초
		변경
	시비	당초	800	800	0	0
		변경	1,200	0	400	800
	기타	당초
		변경
하수도정비 중점관리지역 정비사업	소계	당초	34,996	702	21,900	12,394
		변경	34,996	702	21,900	12,394
	국비	당초	24,511	500	21,000	3,011
		변경	24,511	500	21,000	3,011
	도비	당초
		변경
	시비	당초	10,485	202	900	9,383
		변경	10,485	202	900	9,383
	기타	당초
		변경
소하천 수질개선 사업	소계	당초	355	355
		변경	385	385
	국비	당초
		변경
	도비	당초
		변경
	시비	당초	355	355
		변경	385	385
	기타	당초
		변경
남악신도시 하수처리시설 증설공사	소계	당초	19,761	4,000	6,574	9,187
		변경	26,161	2,081	6,574	17,506
	국비	당초	8,810	1,749	2,875	4,186
		변경	0	0	0	0
	도비	당초
		변경
	시비	당초	0	0	0	0
		변경	11,609	20	2,875	8,714
	기타	당초	10,951	2,251	3,699	5,001
		변경	14,552	2,061	3,699	8,792

사업별	구분		연도별 투자 실적 및 계획
			총계	실 적	계 획
				2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
백련배수 펌프장 신설공사	소계	당초	23,600	4,000	19,600	0
		변경	23,300	2,500	5,100	15,700
	국비	당초	14,400	2,400	12,000	0
		변경	11,850	2,000	2,000	7,850
	도비	당초
		변경
	시비	당초	9,200	1,600	7,600	0
		변경	11,450	500	3,100	7,850
	기타	당초
		변경
남해 배수 펌프장 개선 복구공사	소계	당초	2,130	2,130
		변경	2,131	2,131
	국비	당초
		변경
	도비	당초
		변경
	시비	당초	2,130	2,130
		변경	2,131	2,131
	기타	당초
		변경
북항하수 처리시설 고도처리 설치 사업	소계	당초	7,421	1,909	5,512	0
		변경	10,109	0	3,091	7,018
	국비	당초	3,642	0	3,642	0
		변경	4,971	0	1,821	3,150
	도비	당초	0	0	0	0
		변경	15	0	0	15
	시비	당초	3,779	1,909	1,870	0
		변경	5,123	0	1,270	3,853
	기타	당초
		변경
상동초기우수 처리시설 설치사업	소계	당초	7,664	2,069	5,595	0
		변경	7,864	2,779	1,877	3,208
	국비	당초	4,465	1,878	2,587	0
		변경	4,465	2,588	1,877	0
	도비	당초
		변경
	시비	당초	3,199	191	3,008	0
		변경	3,399	191	0	3,208
	기타	당초
		변경

사업별	구분		연도별 투자 실적 및 계획
			총계	실 적	계 획
				2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
용해2지구~ 백련펌프장 하수관거 정비사업	소계	당초	19,070	500	3,000	15,570
		변경	18,250	500	3,374	14,376
	국비	당초	13,559	500	2,100	10,959
		변경	12,985	500	2,497	9,988
	도비	당초
		변경
	시비	당초	5,511	0	900	4,611
		변경	5,265	0	877	4,388
	기타	당초
		변경
대양 하수처리 분구 연계처리 시설사업	소계	당초	4,762	1,285	3,477	0
		변경	4,762	1,285	1,159	2,318
	국비	당초	640	640	0	0
		변경	0	0	0	0
	도비	당초	64	64	0	0
		변경	0	0	0	0
	시비	당초	4,058	581	3,477	0
		변경	4,762	1,285	1,159	2,318
	기타	당초
		변경

(3) 폐기물관리 분야

관리번호	사 업 명	주 관	비 고
시책 1	환경개선부담금 부과․징수	환경관리과	비예산
시책 2	1회용품 사용억제 추진	자원순환과	비예산
시책 3	효율적인 재활용품 분리수거 추진	자원순환과	비예산
시책 4	사업장폐기물 관련 사업장 지도․점검 강화	자원순환과	비예산
시책 5	음식물류폐기물 감량의무사업장 지도․점검 강화	자원순환과	비예산
시책 6	종량제 규격봉투 사용률 향상	자원순환과	비예산
시책 7	고물상 환경개선 정비계획	자원순환과	비예산
시책 8	매립가스 발전시설(LFG)운영	환경시설관리 사무소	비예산
투자 1	“청결목포” 이미지 제고를 위한 시가지 청소	자원순환과	예 산
투자 2	생활쓰레기 불법투기 근절대책 시행	자원순환과	예 산
투자 3	대형폐기물배출 인터넷 접수 추진	자원순환과	예 산
투자 4	음식물류폐기물 수수료 종량제 추진	자원순환과	예 산
투자 5	음식물류 폐기물 자원화시설 운영	환경시설관리 사무소	예 산
투자 6	하수슬러지 처리시설사업	환경시설관리 사무소	예 산
투자 7	생활폐기물 전처리시설 사업	환경시설관리 사무소	예 산
투자 8	위생매립장 순환형 정비사업 추진	자원순환과	예 산

○ 사업내용

○ 투자계획

<단위 : 백만원>

사업별	구분		연도별 투자 실적 및 계획
			총계	실 적	계 획
				2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
계	총계	당초	64,682.3	7,888.3	8,571	10,731	18,621	18,871
		변경	44,661	5,309.8	8,330.8	9,080.8	9,830.8	12,190
	국비	당초	10,700	0	0	700	5,000	5,000
		변경	939					939
	도비	당초
		변경
	시비	당초	53,982.3	7,888.3	8,571	10,031	13,621	13,871
		변경	43,722	5,309.8	8,330.8	9,080.8	9,830.8	11,169.8
	기타	당초
		변경
“청결목포” 이미지 제고를 위한 시가지 청소	소계	당초	4,250	850	850	850	850	850
		변경	4,250	850	850	850	850	850
	국비	당초
		변경
	도비	당초
		변경
	시비	당초	4,250	850	850	850	850	850
		변경	4,250	850	850	850	850	850
	기타	당초
		변경
생활쓰레기 불법투기 근절대책 시행	소계	당초	100	20	20	20	20	20
		변경	644	0	161	161	161	161
	국비	당초
		변경
	도비	당초
		변경
	시비	당초	100	20	20	20	20	20
		변경	644	0	161	161	161	161
	기타	당초
		변경

<단위 : 백만원>

사업별	구분		연도별 투자 실적 및 계획
			총계	실 적	계 획
				2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
대형폐기물 배출 인터넷 접수 추진	소계	당초	5	1	1	1	1	1
		변경	5	1	1	1	1
	국비	당초
		변경
	도비	당초
		변경
	시비	당초	5	1	1	1	1	1
		변경	5	1	1	1	1	1
	기타	당초
		변경
음식물류 폐기물 수수료 종량제 추진	소계	당초	1,703.3	3.3	500	1,000	100	100
		변경	94	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8
	국비	당초
		변경
	도비	당초
		변경
	시비	당초	1,703.3	3.3	500	1,000	100	100
		변경	94	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8
	기타	당초
		변경
음식물류 폐기물 자원화시설 운영	소계	당초	4,000	800	800	800	800	800
		변경	4,000	800	800	800	800	800
	국비	당초
		변경
	도비	당초
		변경
	시비	당초	4,000	800	800	800	800	800
		변경	4,000	800	800	800	800	800
	기타	당초
		변경

<단위 : 백만원>

사업별	구분		연도별 투자 실적 및 계획
			총계	실 적	계 획
				2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
하수슬러지 처리시설사업	소계	당초	19,214	3,504	3,650	3,860	4,000	4,200
		변경	17,950	2,820	3,300	3,630	4,000	4,200
	국비	당초
		변경
	도비	당초
		변경
	시비	당초	19,214	3,504	3,650	3,860	4,000	4,200
		변경	17,950	2,820	3,300	3,630	4,000	4,200
	기타	당초
		변경
환경에너지센터 건립 [생활폐기물 전처리시설]	소계	당초	14,010	2,710	2,750	2,800	2,850	2,900
		변경	15,840	820	3,200	3,620	4,000	4,200
	국비	당초
		변경
	도비	당초
		변경
	시비	당초	14,010	2,710	2,750	2,800	2,850	2,900
		변경	15,840	820	3,200	3,620	4,000	4,200
	기타	당초
		변경
위생매립장 순환형 정비사업 추진	소계	당초	21,400			1,400	10,000	10,000
		변경	1,878					1,878
	국비	당초	10,700			700	5,000	5,000
		변경	939					939
	도비	당초
		변경
	시비	당초	10,700			700	5,000	5,000
		변경	939					939
	기타	당초
		변경

(4) 연안환경 분야

관리번호	사 업 명	주 관	비 고
투자 1	깨끗한 목포항 만들기	해양수산과	예 산
투자 2	해안가 쓰레기 정화사업	해양수산과	예 산
투자 3	영산강하구언 부유쓰레기 정화사업	환경관리과	예 산

○ 사업내용

○ 투자계획

<단위 : 백만원>

사업별	구분		연도별 투자 실적 및 계획
			총계	실 적	계 획
				2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
계	총계	당초	2,387	467	480	480	480	480
		변경	2,290	437	458	465	465	465
	국비	당초	875	175	175	175	175	175
		변경	1,085	210	215	220	220	220
	도비	당초	175	35	35	35	35	35
		변경	125	25	25	25	25	25
	시비	당초	1,337	257	270	270	270	270
		변경	1,080	202	218	220	220	220
	기타	당초
		변경
깨끗한 목포항 만들기	소계	당초	687	127	140	140	140	140
		변경	370	70	75	75	75	75
	국비	당초	75	15	15	15	15	15
		변경	75	15	15	15	15	15
	도비	당초	25	5	5	5	5	5
		변경	25	5	5	5	5	5
	시비	당초	587	107	120	120	120	120
		변경	270	50	55	55	55	55
	기타	당초
		변경

사업별	구분		연도별 투자 실적 및 계획
			총계	실 적	계 획
				2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
해안가 쓰레기 정화사업	소계	당초	1,700	340	340	340	340	340
		변경	1,170	210	240	240	240	240
	국비	당초	800	160	160	160	160	160
		변경	485	85	100	100	100	100
	도비	당초	150	30	30	30	30	30
		변경	100	20	20	20	20	20
	시비	당초	750	150	150	150	150	150
		변경	585	105	120	120	120	120
	기타	당초
		변경
영산강하구언부유쓰레기정화사업	소계	당초	0	0	0	0	0	0
		변경	750	157	143	150	150	150
	국비	당초	0	0	0	0	0	0
		변경	525	110	100	105	105	105
	도비	당초
		변경
	시비	당초	0	0	0	0	0	0
		변경	225	47	43	45	45	45
	기타	당초	0
		변경

<단위 : 백만원>

(5) 상수도 분야

○ 사업내용

관리번호	사 업 명	주 관	비 고
시책 1	다량급수 수도전 특별관리 점검	상하수도 행정과	비예산
시책 2	맑은물 공급을 위한 수질관리	수도과	비예산
투자 1	유수율 제고 누수탐사 용역	수도과	예 산
투자 2	노후 급․배수관 정비 및 신설 공사 추진	수도과	예 산
투자 3	맑은물 생산․공급을 위한 정수처리 시설 청소	수도과	예 산

○ 투자계획

사업별	구분		연도별 투자 실적 및 계획
			총계	실 적	계 획
				2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
계	총계	당초	9,270	1,583	1,900	1,929	1,929	1,929
		변경	8,512	1,483	1,542	1,829	1,829	1,829
	국비	당초
		변경
	도비	당초
		변경
	시비	당초	9,270	1,583	1,900	1,929	1,929	1,929
		변경	8,512	1,483	1,542	1,829	1,829	1,829
	기타	당초
		변경
유수율 제고 누수탐사용역	소계	당초	2,000	400	400	400	400	400
		변경	1,500	300	300	300	300	300
	국비	당초
		변경
	도비	당초
		변경
	시비	당초	2,000	400	400	400	400	400
		변경	1,500	300	300	300	300	300
	기타	당초
		변경

<단위 : 백만원>

사업별	구분		연도별 투자 실적 및 계획
			총계	실 적	계 획
				2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
맑은 물 생산 공급을 위한 정수처리시설 청소	소계	당초	87			29	29	29
		변경	87			29	29	29
	국비	당초
		변경
	도비	당초
		변경
	시비	당초	87			29	29	29
		변경	87			29	29	29
	기타	당초
		변경
노후 급․배수관 정비 및 신설 공사 추진	소계	당초	7,183	1,183	1,500	1,500	1,500	1,500
		변경	6,925	1,183	1,242	1,500	1,500	1,500
	국비	당초
		변경
	도비	당초
		변경
	시비	당초	7,183	1,183	1,500	1,500	1,500	1,500
		변경	6,925	1,183	1,242	1,500	1,500	1,500
	기타	당초
		변경

(6) 소음․진동․악취․실내공기질․유해화학물질 분야

관리번호	사 업 명	주 관	비 고
시책 1	실내공기질 강화	환경관리과	비예산
시책 2	발생원별 소음․진동 관리 강화	환경관리과	비예산

○ 사업내용

(7) 토양환경 분야

○ 사업내용

관리번호	사 업 명	주 관	비 고
시책 1	토양오염실태조사 개선 및 모니터링 확대	환경관리과	비예산
시책 2	토양오염원 및 유발시설 관리 강화	환경관리과	비예산
투자 1	지하수오염실태조사 개선 및 모니터링 확대	상하수도행정과	예산

○ 투자계획

<단위 : 백만원>

사업별	구분		연도별 투자 실적 및 계획
			총계	실 적	계 획
				2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
계	총계	당초	36		6	8	10	12
		변경	34		6	6	10	12
	국비	당초
		변경
	도비	당초
		변경
	시비	당초	36		6	8	10	12
		변경	34		6	6	10	12
	기타	당초
		변경
지하수오염실태조사 개선 및 모니터링 확대	소계	당초	36		6	8	10	12
		변경	34		6	6	10	12
	국비	당초
		변경
	도비	당초
		변경
	시비	당초	36		6	8	10	12
		변경	34		6	6	10	12
	기타	당초
		변경

(8) 자연환경 분야

관리번호	사 업 명	주 관	비 고
투자 1	자연생태환경조사 및 생태지도 제작	환경관리과	예 산
투자 2	야생동물 밀렵․밀거래 방지계획 지속	환경관리과	예 산
투자 3	생태계보전협력금 반환사업	환경관리과	예 산
투자 4	국립호남권 생물자원관 건립	환경관리과	예 산
투자 5	도시숲 및 완충녹지 조성	경관사업과	예 산
투자 6	가로경관 조성 및 관리	경관사업과	예 산
투자 7	도시녹화 사후관리	경관사업과	예 산
투자 8	철도폐선부지 웰빙공원조성	도시계획과	예 산
투자 9	근린공원조성사업 추진	공원과	예 산
투자 10	도시공원 유지관리	공원과	예 산
투자 11	삼학도 복원화 사업	원도심사업과	예 산
투자 12	생태관광을 위한 철새 탐조대 설치	환경관리과	예 산

○ 사업내용

○ 투자계획

사업별	구분		연도별 투자 실적 및 계획
			총계	실 적	계 획
				2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
계	총계	당초	101,675	23,266	27,065.5	27,485.5	18,954	4,904
		변경	98,329	14,375	12,829	33,564	31,077	6,484
	국비	당초	69,110	11,610	20,800	20,800	15,100	800
		변경	68,110	9,010	7,050	28,150	22,500	1,400
	도비	당초	905	101	101	201	201	301
		변경	5	1	1	1	1	1
	시비	당초	31,660	11,555	6,164.5	6,484.5	3,653	3,803
		변경	30,214	5,364	5,778	5,413	8,576	5,083
	기타	당초
		변경

<단위 : 백만원>

사업별	구분		연도별 투자 실적 및 계획
			총계	실 적	계 획
				2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
자연생태환경 조사 및 생태 지도 작성	소계	당초	500				300	200
		변경	500				300	200
	국비	당초
		변경
	도비	당초
		변경
	시비	당초	500				300	200
		변경	500				300	200
	기타	당초
		변경
야생동물 밀렵 밀거래 방지 계획 지속	소계	당초	20	4	4	4	4	4
		변경	20	4	4	4	4	4
	국비	당초
		변경
	도비	당초	5	1	1	1	1	1
		변경	5	1	1	1	1	1
	시비	당초	15	3	3	3	3	3
		변경	15	3	3	3	3	3
	기타	당초
		변경
생태계보전 협력금 반환사업	소계	당초	700	700
		변경	650	650
	국비	당초	700	700
		변경	650	650
	도비	당초
		변경
	시비	당초
		변경
	기타	당초
		변경
국립호남권 생물자원관 건립	소계	당초	47,300	3,000	15,000	15,000	14,300
		변경	47,300	3,000	4,400	25,600	14,300
	국비	당초	47,300	3,000	15,000	15,000	14,300
		변경	47,300	3,000	4,400	25,600	14,300
	도비	당초
		변경
	시비	당초
		변경
	기타	당초
		변경

<단위 : 백만원>

사업별	구분		연도별 투자 실적 및 계획
			총계	실 적	계 획
				2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
도시숲 및 완충녹지 조성	소계	당초	10,700	2,700	1,700	1,800	2,200	2,300
		변경	8,225	1,400	1,325	1,600	1,900	2,000
	국비	당초	3,900	1,100	600	600	800	800
		변경	2,950	550	550	550	650	650
	도비	당초	900	100	100	200	200	300
		변경	0	0	0	0	0	0
	시비	당초	5,900	1,500	1,000	1,000	1,200	1,200
		변경	5,275	850	775	1,050	1,250	1,350
	기타	당초
		변경
가로경관 조성 및 관리	소계	당초	1,910	310	400	400	400	400
		변경	1,824	319	305	400	400	400
	국비	당초
		변경
	도비	당초
		변경
	시비	당초	1,910	310	400	400	400	400
		변경	1,824	319	305	400	400	400
	기타	당초
		변경
도시녹화 사후관리	소계	당초	1,220	120	200	250	300	350
		변경	977	82	145	200	250	300
	국비	당초
		변경
	도비	당초
		변경
	시비	당초	1,220	120	200	250	300	350
		변경	977	82	145	200	250	300
	기타	당초
		변경
철도폐선부지 웰빙공원조성	소계	당초	9,020	9,020	0
		변경	8,520	5,510	3,010
	국비	당초	3,810	3,810	0
		변경	3,810	3,810
	도비	당초
		변경
	시비	당초	5,210	5,210	0
		변경	4,710	1,700	3,010
	기타	당초
		변경

<단위 : 백만원>

사업별	구분		연도별 투자 실적 및 계획
			총계	실 적	계 획
				2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
근린공원조성 사업 추진	소계	당초	6,070	1,030	1,260	1,480	1,050	1,250
		변경	4,890	1,030	350	1,010	1,120	1,380
	국비	당초
		변경
	도비	당초
		변경
	시비	당초	6.070	1,030	1,260	1,480	1,050	1,250
		변경	4,890	1,030	350	1,010	1,120	1,380
	기타	당초
		변경
도시공원 유지관리	소계	당초	1,982	382	400	400	400	400
		변경	3,170	380	690	700	700	700
	국비	당초
		변경
	도비	당초
		변경
	시비	당초	1,982	382	400	400	400	400
		변경	3,170	380	690	700	700	700
	기타	당초
		변경
삼학도 복원화 사업	소계	당초	22,203	6,000	8,101.5	8,101.5	0
		변경	20,203	0	2,600	4,000	13,603
	국비	당초	13,400	3,000	5,200	5,200	0
		변경	12,400	0	2,100	2,000	8,300
	도비	당초
		변경
	시비	당초	8,803	3,000	2,901.5	2,901.5	0
		변경	7,803	0	500	2,000	5,303
	기타	당초
		변경
생태관광을 위한 철새 탐조대 설치	소계	당초	50			50
		변경	50			50
	국비	당초
		변경
	도비	당초
		변경
	시비	당초	50			50
		변경	50			50
	기타	당초
		변경

<단위 : 백만원>

(9) 산림자원 분야

관리번호	사 업 명	주 관	비 고
투자 1	산림병해충 방제	공원과	예 산
투자 2	산불방지대책 추진	공원과	예 산
투자 3	산림의 품질향상을 위한 숲 가꾸기	공원과	예 산
투자 4	산림휴양․문화공간 조성	공원과	예 산

○ 사업내용

○ 투자계획

사업별	구분		연도별 투자 실적 및 계획
			총계	실 적	계 획
				2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
계	총계	당초	4,077	699	785	822	863	908
		변경	9,551	3,326	2,232	1,222	1,263	1,508
	국비	당초	1,843	318	358	372	388	407
		변경	4,533	1,614	1,052	572	588	707
	도비	당초	659	112	128	132	139	148
		변경	673	116	138	132	139	148
	시비	당초	1,575	269	299	318	336	353
		변경	4,345	1,596	1,042	518	536	653
	기타	당초
		변경
산림병해충 방제	소계	당초	231	31	50	50	50	50
		변경	247	31	66	50	50	50
	국비	당초	116	16	25	25	25	25
		변경	124	16	33	25	25	25
	도비	당초	32	4	7	7	7	7
		변경	35	4	10	7	7	7
	시비	당초	83	11	18	18	18	18
		변경	88	11	23	18	18	18
	기타	당초
		변경

<단위 : 백만원>

사업별	구분		연도별 투자 실적 및 계획
			총계	실 적	계 획
				2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
산불방지 대책 추진	소계	당초	2,064	338	372	409	450	495
		변경	2,153	365	434	409	450	495
	국비	당초	824	135	149	163	179	198
		변경	823	131	152	163	179	198
	도비	당초	372	61	69	73	80	89
		변경	386	65	79	73	80	89
	시비	당초	868	142	154	173	191	208
		변경	944	169	203	173	191	208
	기타	당초
		변경
산림의 품질향상을 위한 숲 가꾸기	소계	당초	1,782	330	363	363	363	363
		변경	1,751	330	332	363	363	363
	국비	당초	903	167	184	184	184	184
		변경	886	167	167	184	184	184
	도비	당초	255	47	52	52	52	52
		변경	252	47	49	52	52	52
	시비	당초	624	116	127	127	127	127
		변경	613	116	116	127	127	127
	기타	당초
		변경
산림휴양․문화공간 조성(신규)	소계	당초	0	0	0	0	0	0
		변경	5,400	2,600	1,400	400	400	600
	국비	당초	0	0	0	0	0	0
		변경	2,700	1,300	700	200	200	300
	도비	당초
		변경
	시비	당초	0	0	0	0	0	0
		변경	2,700	1,300	700	200	200	300
	기타	당초
		변경

<단위 : 백만원>

(10) 기후변화 분야

○ 사업내용

관리번호	사 업 명	주 관	비 고
투자 1	시민과 함께하는「환경한마당」추진	환경관리과	예 산
투자 2	청소년 환경체험 아카데미 운영	환경관리과	예 산
투자 3	온실가스 감축 목표 수립	환경관리과	예 산
투자 4	그린스타트 네트워크 추진	환경관리과	예 산
투자 5	탄소포인트제 추진	환경관리과	예 산
투자 6	녹색목포21협의회 운영 활성화	환경관리과	예 산

○ 투자계획

사업별	구분		연도별 투자 실적 및 계획
			총계	실 적	계 획
				2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
계	총계	당초	1,057	163.8	275.8	190.8	205.8	220.8
		변경	1,087	149	231	216	226	266
	국비	당초	338.5	57.7	62.7	67.7	72.7	77.7
		변경	329	53	58	68	73	78
	도비	당초
		변경
	시비	당초	718.5	106.1	213.1	123.1	133.1	143.1
		변경	759	96	173	148	153	188
	기타	당초
		변경
시민과 함께하는 「환경한마당」 추진	소계	당초	60	12	12	12	12	12
		변경	60	12	12	12	12	12
	국비	당초
		변경
	도비	당초
		변경
	시비	당초	60	12	12	12	12	12
		변경	60	12	12	12	12	12
	기타	당초
		변경

<단위 : 백만원>

사업별	구분		연도별 투자 실적 및 계획
			총계	실 적	계 획
				2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
청소년 환경체험 아카데미 운영	소계	당초	19	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
		변경	19	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
	국비	당초	13.5	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
		변경	13.5	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
	도비	당초
		변경
	시비	당초	5.5	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
		변경	5.5	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
	기타	당초
		변경
온실가스 감축 목표 수립	소계	당초	100		100
		변경	60		60
	국비	당초
		변경
	도비	당초
		변경
	시비	당초	100		100
		변경	60		60
	기타	당초
		변경
그린스타트 네트워크 추진	소계	당초	150	30	30	30	30	30
		변경	146	30	26	30	30	30
	국비	당초	75	15	15	15	15	15
		변경	73	15	13	15	15	15
	도비	당초
		변경
	시비	당초	75	15	15	15	15	15
		변경	73	15	13	15	15	15
	기타	당초
		변경
탄소포인트제 추진	소계	당초	500	80	90	100	110	120
		변경	484	70	84	100	110	120
	국비	당초	250	40	45	50	55	60
		변경	242	35	42	50	55	60
	도비	당초
		변경
	시비	당초	250	40	45	50	55	60
		변경	242	35	42	50	55	60
	기타	당초
		변경

<단위 : 백만원>

사업별	구분		연도별 투자 실적 및 계획
			총계	실 적	계 획
				2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
녹색목포21 협의회 운영 활성화	소계	당초	228	38	40	45	50	55
		변경	318	33	45	70	70	100
	국비	당초
		변경
	도비	당초
		변경
	시비	당초	228	38	40	45	50	55
		변경	318	33	45	70	70	100
	기타	당초
		변경

<단위 : 백만원>

					분야별 세부사업
					▣ 1. 대기환경 분야

(시책 1) On-line 환경정보 제공

1. 현황 및 필요성

▣ 인터넷 이용의 보편화에 따라 on-line 환경정보의 중요성이 부각되고 있음.

▣ 지역 환경보전을 위하여 노력하고 있는 여러 주체들이 목포시 홈페이지를 통해 자연생태환경 및 생활환경, 환경질 평가정보 서비스 제공.

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014~2018년.

▣ 사업내용 : 환경정보를 on-line으로 제공.

3. 그간 추진실적

▣ 목포시 홈페이지에 환경오염배출업소 행정처분 정보 공개 : 행정처분 즉시.

▣ 환경정보 제공을 위한 대기․소음측정망 운영 : 매년

- 에어코리아(www.airkorea.or.kr)에서 실시간 대기정보 제공

▣ 2014년부터 미세먼지(PM-10)에 대해서 예보 문자서비스 제공

4. 향후 발전방향

▣ 2015년부터는 미세먼지(PM-2.5)에 대해서도 미세먼지 예보 문자서비스를 제공할 계획임.

▣ 정부에서 제공하는 환경정보뿐만 아니라 시민들이 궁금해 할 수 있는 환경정책들을 제공하여 개발시 환경을 보전할 수 있는 방향으로 구축.

(시책 2) 환경오염물질 배출시설 지도․점검 강화

1. 현황 및 필요성

▣ 환경오염물질 배출시설에 대한 지도․점검 「사전예고제」 시행.

▣ 환경관리 취약업소 및 민원발생 사업장 기술지원.

▣ 환경오염 상습 위반사업장 수시점검 강화.

2. 개   요

▣ 기      간 : 2014. 1. ~  계속.

▣ 내      용 : 환경오염물질 배출시설 지도․점검

▣ 점검사업장 : 대기, 폐수, 소음․진동, 비산먼지발생사업장 등

3. 그간 추진실적

▣ 2014년 추진실적

년도	업소수	점검업소	위반업소	행정처분			과태료 등 부과(천원)
				계	조치․개선명령	경고 등
2014년	398	242	29	29	12	17	16,160

4. 향후 추진계획

▣ 환경오염배출사업장에 대한 정기 및 수시 지도․점검 시행

▣ 민원발생 우려업소 및 주거 밀집지역 내 배출업소 관리 강화

(투자 1)  대기오염 자동측정망 확충 ․ 운영

1. 현황 및 필요성

▣ 대기 배출원 증가에 따라 지속적인 오염실태 파악 필요.

▣ 신도심권 대기질을 측정하기 위하여 2013년도에 부흥동주민센터 옥상에  도시대기측정망 1기를 확충하였으나 대양산업단지, 용해지구, 대성지구 조성 등 시가지 확장에 따라 측정망 확충 필요.

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014~2018년.

▣ 사 업 비 : 260백만원(국비 70,  도비 60  시비 130).

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	260	24	24	24	24	164
국 비	70					70
도 비	60	12	12	12	12	12
시 비	130	12	12	12	12	82

▣ 사 업 량 : 용당동 및 부흥동 측정소 위탁관리, 오존경보제 운영.

3. 그간 추진실적

▣ 용당동 및 부흥동측정소 위탁관리 대행 : 한국산업기술시험원, KNJ엔지니어링(주)

• 대기오염 상시측정항목 : SO2, NOx, O3, PM10, PM2.5, CO 등.

▣ 대기오염측정망 1기 설치(2013년) : 부흥동주민센터 옥상.

4. 향후 추진계획

▣ 대기오염자동측정망 상시 관리체계 유지를 위한 위탁대행 추진 : 매년.

▣ 대기오염측정망 : 1기 확충.

(투자 2)  실시간 대기질․ 환경홍보 전광판 설치

1. 현황 및 필요성

▣ 앞으로 다가올 온실가스 의무감축에 대비하여 주민의 대기환경에 대한

인식도 제고.

▣ 도․시정 및 환경 홍보물을 게재하여 시민 생활의식 개선.

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014~2018년.

▣ 사 업 비 : 140백만원(시비 140).

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	140	-	-	-	140	-
시 비	140	-	-	-	140	-

▣ 표출내용 : 실시간 대기질(대기질측정소 연결), 도․시정 환경홍보 문안.

▣ 사 업 량 : Full 칼라 표출, 고광도발광다이오드(LED 3.0m×2.4m 양면) 1식.

3. 그간 추진실적

▣ 대기오염측정망 자료를 실시간 공개(Airkorea http://www.airkorea.or.kr) 하는 온라인사이트가 운영되고 있는 관계로 사업비 미반영.

4. 향후 개선방안

▣ 갈수록 심화되고 있는 미세먼지에 대한 시민들에게 정보제공을 위하여   대기질․환경홍보 현황 전광판 설치 추진.

(투자 3)  노후천연가스 자동차 교체보급

1. 현황 및 필요성

▣ 대기질 개선을 위해 경유사용 차량을 천연가스로 교체 필요.

▣ 2013년까지 청소차 10대, 전세버스 10대, 시내버스 170대에 대하여 천연가스 버스로 교체하였음.

▣ 2005년도에 보급되어 운행되고 있는 노후된 천연가스버스 13대(대형)를 2015년도에 보급할 계획임

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2015 ～ 2018년

▣ 교체대상 : 79대(2005 ～ 2007년식)

•우리시 재정여건을 감안하여 차령 8년～10년이 되는 노후된 시내버스

▣ 사업내용 : 노후된 천연가스시내버스를 신규 천연가스시내버스로 교체 보급

▣ 사 업 비 : 2,080백만원(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	1,802	264	310	440	440	348
국 비	901	132	155	220	220	174
도 비	271	40	47	66	66	52
시 비	630	92	108	154	154	122

3. 그간 추진실적

▣ ‘05∼‘13년까지 보급대수 : 190대(시내버스 170, 통근버스 10, 청소차 10)

• (주)태원여객 84대, (주)유진운수 86대, (유)의성관광 8대, 하나고속관광 2대, 청소차 10대.

▣ 2014년 노후천연가스버스 11대(대형 9대, 중형 2대) 보급

4. 향후 추진계획

▣ 사업량 및 기간 : 2015～2018년 노후천연가스버스

▣ 연도별 사업계획

구 분	소 계	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년 이후
노후 천연가스버스 보급사업	170	11	13	30	20	20	76

(단위 : 대)

					분야별 세부사업
					▣ 2. 수질환경 분야

(투자 1)  하수도정비 기본계획 변경

1. 현황 및 필요성

▣ 도시계획 구역내 시가화 지역의 확대개발, 인구변동, 하수도사업 등 기 수립된 목포시 하수도정비 기본계획 전반에 걸쳐 변경요인이 발생함에 따라 하수행정의 기본방향 변경 설정.

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2016 .12.

▣ 총 사업비 : 1,200백만원(시비)

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	1,200	-	400	800	-	-
시 비	1,200	-	400	800	-	-

▣ 사업내용

• 계획하수량 및 계획수질 산정, 관거계획.

• 공공하수처리시설 계획.

• 하수처리수 재이용 계획.및 하수슬러지 처리·처분계획 수립 등

• 공공하수도 대장(캐드도면), 맨홀 및 관거조서 작성

3. 향후 추진계획

▣ ‘15.  1. : 용역 발주.

▣ ‘15.  2. : 행정절차 이행

▣ ‘16. 12. : 하수도정비 기본계획(변경) 승인요청(환경부) 및 용역 완료 .

(투자 2)  하수도정비 중점관리지역 정비사업

1. 현황 및 필요성

▣ 최근 침수피해가 발생하여 하수도정비 중점관리지역으로 지정한 지역에 하수도시설 확충 등 정비대책 추진하여 하수의 범람.

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2013년 ~ 2021년.

▣ 총 사업비 : 35,016백만원(국비 24,511  시비 10,505).

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	34,996	702	21,900	12,394	-	-
국 비	24,511	500	21,000	3,011	-	-
시 비	10,485	202	900	9,383	-	-

▣ 사 업 량

•  관거정비 L=1.85km(관거신설 898m, 관거개량 950m)

•  빗물펌프장 2개소, 저류시설 1개소

3. 그간 추진실적

▣ ‘13.  2. : 하수도정비 중점관리지역 지정 고시(환경부)

▣ ‘13.  6. ~ 12. : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 추진

▣ ‘14.  5. : 하수도정비 중점관리지역 기본계획 승인(환경부)

▣ ‘14. 10. : 기본 및 실시설계 용역 착수

4. 향후 추진계획

▣ '15.  9. : 행정절차 이행 및 용역완료

▣ ‘15. 10. : 공사 착공

▣ ‘21. 12. : 공사 준공

(투자 3)  소하천 수질개선 사업

1. 현황 및 필요성

▣ 생태하천으로 유입되는 오수를 차단하고, 저질의 퇴적토를 준설하여 악취저감 및 수질개선을 통하여 시민 친수공간 조성 .

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014. 2 ~ 2014. 12.

▣ 사 업 비 : 385백만원(시비)

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	385	385	-	-	-	-
시 비	385	385	-	-	-	-

▣ 사 업 량 : 유지용수 관로매설,하천 주요구간 준설, 수질정화시설 정비, 하천 시설물 유지관리 등

▣ 세부사업내용

(단위 : 백만원)

구 분	사업내용	사 업 량	사업비
수질 관리	삼향천 유지용수관매설 공사	유지용수 관로매설 (L=90m×2열, D=500mm)	150
	수질정화시설 침전오니 준설	1회/년×432톤(습지4개소)	60
	삼향천 말단부 하당빗물펌프장 앞 준설공사	준설 420㎥,폐기물 302톤	30
유지 관리	입암천․삼향천 갈대정비	총 면적 11,000㎡ 갈대베기(1회)	50
	옥암천․초당천 갈대정비	총 구간 3.16km 갈대베기(수로 내)	30
	수질정화시설 지붕 보수	지붕 파손부 100㎡ 수리	20
	소하천 시설물 응급복구	정화시설 1, 펌프시설1, CCTV 7, 유지용수관로 3.8km 관리 등	45

3. 그간 추진실적

▣ ‘14. 1. ~ ‘14. 4. : 유지용수관 매설공사 추진

▣ ‘14. 1. ~ ‘14. 11. : 시설물 연중 상시 점검∙보수 추진

(투자 4)  남악신도시 하수처리시설 증설공사

1. 현황 및 필요성

▣ 남악신도시의 활성화로 유입인구의 지속 증가에 따라 배출되는 하수량도 증가하고 있어 장래 하수처리시설 증설 추진.

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 사업기간 : 2013년 ~ 2016년.

▣ 총 사업비 : 26,547백만원(목포시 11,609(43.736%), 전남개발공사 14,938(56.27%))

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
계	26,161	2,081	6,574	17,506
목 포 시	11,609	20	2,875	8,714
전남개발공사	14,552	2,061	3,699	8,792

▣ 사 업 량 : 시설용량 10,000㎥/일 증설.

3. 그간 추진실적

▣ ‘13.  6. : 기본 및 실시설계 용역 착수

▣ ‘13.  7. : 道 투·융자 심사 조건부 승인

▣ ‘13.  8. : 10,000㎥/일 증설 실무협의 결정

▣ ‘14.  4. : 처리공법 2차평가 및 공법선정 완료

▣ ‘14.  7. : 기본설계 실무협의

▣ ‘14.  9. : VE(경제성평가) 용역 착수

▣ ‘14. 10. : 기본 및 실시설계 최종 보고

4. 향후 추진계획

▣ ‘14. 11. : 행정절차 이행 및 용역 완료

▣ ‘15.  1. : 공사 발주

▣ ’16. 12. : 공사 준공 .

(투자 5)  백련배수펌프장 신설공사

1. 현황 및 필요성

▣ 2013년 말 준공예정인 용해2지구 일원의 원활한 우수처리 및 재해위험지구로 지정된 백련지구의 침수피해 해소를 위해 배수펌프장 신설.

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2012 ～ 2017년.

▣ 총 사업비 : 25,000백만원 [국비(50%) 12,630   시비(50%) 12,370].

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	23,300	2,500	5,100	15,700
국 비	11,850	2,000	2,000	7,850
시 비	11,450	500	3,100	7,850

▣ 사 업 량 : 배수펌프장 신설 Q=2,070㎥/분, 유수지 62,000㎥

3. 그간 추진실적

▣ ‘12. 12. : 기본 및 실시설계 용역 착수.

▣ ‘14.  1. : 소방방재청 사전 설계검토

▣ ‘14.  3. : 전라남도 건설기술심의

▣ ‘14.  5. : 전라남도 공공디자인심의 및 계약심사

▣ ‘14.  6. : 공사 착공

4. 향후 추진계획

▣ ‘15.  9. : 공사 준공

▣ ‘17. 12. : 공사 준공

(투자 6)  남해 배수펌프장  개선 복구공사

1. 현황 및 필요성

▣ 남해배수펌프장의 시설용량의 부족으로 용당동 일대 저지대의 상습  침수피해를 해소코자 배수펌프장 용량증설 및 유수지 준설.

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2012년 ~ 2015년.

▣ 총 사업비 : 13,500백만원(국비55%, 도비 18%, 시비 27%).

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	2,130	2,130	-	-	-	-
시 비	2,130	2,130	-	-	-	-

▣ 사 업 량 : 배수펌프 용량증설 Q=1,950㎥/분, 유수지 준설 11,400㎥.

3. 그간 추진실적

▣ ‘12. 12. : 기본 및 실시설계용역 착수.

▣ ‘13.  4. : 공사 착공.

▣ ‘13. 10. : 유수지 준설 완료(11,400㎥).

▣ ‘13. 12. : 건축공사 완료 및 전기실 이전.

▣ ‘14.  6. : 토목구조물 설치 완료.

4. 향후 추진계획

▣ ‘15.  4. : 공사 준공.

(투자 7)  북항하수처리시설 고도처리 설치사업

1. 현황 및 필요성

▣ 북항 하수종말처리시설의 질소,인등 영양염류를 고도처리하여 방류수 수질기준 준수 및 공공수역 수질오염을 예방.

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2012년 ~ 2017년.

▣ 총 사업비 : 10,601백만원(국비(50%) 5,301, 도비(1%) 53, 시비(49%) 5,247)

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	10,109	-	3,091	7,018
국 비	4,971	-	1,821	3,150
도 비	15	-		15
시 비	5,123	-	1,270	3,853

▣ 사업량 : 고도처리 Q=35,000㎥/일

3. 그간 추진실적

▣ '10.  5. : 지방재정 투․융자 심사 완료 (전라남도).

▣ '10. 11. : 용역과제 사전심의 (적정).

▣ '12.  5. : 기본 및 실시설계용역 착수.

▣ '13.  5. : 처리공법 1차평가 완료.

▣ ‘14.  2. : 처리공법 2차평가 및 공법 완료

▣ ‘14.  6. : 지방건설기술 심의 및 재원협의 요청

▣ ‘14. 10. : 행정절차 이행

▣ '14. 11. : 공공하수처리시설 및 도시계획시설 인가

4. 향후 추진계획

▣ '15.  1. : 공사 착공

▣ '16. 12. : 공사 준공

(투자 8)  상동초기우수 처리시설 설치사업

1. 현황 및 필요성

▣ 오염부하량이 높은 초기우수의 적정처리로 공공수역 수질오염 예방과 버스터미널

앞 저지대 상습침수 문제의 근원적 해소.

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2010년 ~ 2017년.

▣ 총 사업비 : 15,609백만원(국비 10,926  시비 4,683).

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	7,864	2,779	1,877	3,208
국 비	4,465	2,588	1,877	0
시 비	3,399	191	0	3,208

▣ 사업규모: 저류조 V=10,000㎥,차집시설 1식,우수 암거래량 125m.

조경시설물 철거 및 복구(식재 297주등).

3. 그간 추진실적

▣ ‘13. 4 : 공사 착공.

▣ ‘13. 5 : 수목 230주 이식.

▣ ‘13. 6 : 장마철 대비 가배수로 확보, 기존 우수 암거상판 철거.

L=125m 및 준설, 기존 오수관 철거 및 이설.

▣ ‘13.12 : 저류조 기초파일 시공 중.

▣ ‘14.  1 : 기초터파기 및 저류조 설치.

▣ ‘14.  7 : 저류조 상부 콘크리트 타설

▣ ‘14. 10 : 우수암거 공사 발주

4. 향후 추진계획

▣ ‘16.  2 : 차집시설 공사 발주

▣ ‘17. 12 : 전기실 및 공원조성공사 발주 및 총괄 준공

(투자 9)  용해2지구~백련펌프장 하수관거 정비사업

1. 현황 및 필요성

▣ 용해2지구 일원에서 발생하는 하수 및 우수를 신속히 배제하여 우수기에 주택과  농경지 침수를 방지하여 쾌적한 도시환경 조성.

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014년 ~ 2020년.

▣ 총 사업비 : 18550백만원(국비(70%) 12,985, 시비(30%) 5,565)

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014 이전	2015	2016	2017	2018
소 계		500	3,374	14,376	14,376
국 비		500	2,497	9,988	9,988
시 비		-	877	4,388	4,388

▣ 사 업 량 : 2련 우수박스(3.5m × 2.2m), L=1,1580 m.

3. 그간 추진실적

▣ '08. 12. : 하수도정비기본계획 승인(환경부).

▣ '11. 10. : 지방재정투융자 심사(전라남도)

▣ '14.  3. : 기본 및 실시설계 용역 착수

▣ '14.  8 : 기본 및 실시설계 용역 중간 보고

4. 향후 추진계획

▣ ‘14. 11 : 기본 및 실시설계용역 최종 보고

▣ ‘14. 12 : 설계자문 및 도 건설기술심의, 도 계약심사 및 재원협의

▣ ‘15.  2 : 공사 착공

▣ ‘20. 12 : 공사 준공

(투자 10)  대양 하수처리분구 연계처리 시설사업

1. 현황 및 필요성

▣ 하수 미처리구역인 대양하수처리분구의 하수를 북항 하수처리시설에 연계 처리하여 공공수역 수질오염예방과 쾌적한 도시환경 조성.

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2010년 ~ 2017년.

▣ 총 사업비 : 9,681백만원(국비(50%) 4,840, 도비(5%) 483, 시비(45%) 4,358)

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014 이전	2015	2016	2017	2018
소 계	4,762	1285	1,159	2,318	-	-
국 비	640	640	-	-	-	-
도 비	64	64	-	-	-	-
시 비	4,058	581	1,159	2,318	-	-

▣ 사 업 량 : 중계펌프장 2개소, 압송관 5.13km

3. 그간 추진실적

▣ ‘10.  6 : 기본 및 실시설계용역 착수

▣ ‘13.  1 : 행정절차 완료(설계자문, 재원협의, 건설기술심의 등)

▣ ‘13.  3 : 공사 착공

▣ ‘14.  5 : 압송관 부설 5.13km 중 3.5km 완료

▣ ‘14.  6 : 전기공사 1차분 착공

▣ '14.  8 : 이로펌프장 기초파일 및 지하 터파기 완료

4. 향후 추진계획

▣ ‘14. 11 : 압송관로 1.63km 부설 및 토지보상

▣ ’17. 12 : 공사 준공

					분야별 세부사업
					▣ 3. 폐기물관리 분야

(시책 1)  환경개선부담금 부과․징수

1. 현황 및 필요성

▣ 유통․소비 부분을 대상으로 오염원인자 부담원칙(환경개선비용부담법 제9조)에 의해 오염원인자에게 오염물질의 처리비용을 부담하도록 하여 오염저감을 유도하고 환경투자 재원 확보.

- 이중과세 논란으로 인하여 시설물에 대해서는 2015년에 환경개선부담금 부과가 폐지될 예정이고, 자동차에 대해서는 2016년도 환경개선부담금이 폐지될 예정으로 기획재정부에서 추진하고 있음.

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014~2018년.

▣ 사업내용 : 연면적 160㎡이상 건물(주택 제외) 및 경유 자동차.

3. 추진실적 (2010 ~ 2014년)

(단위:백만원)

구 분	부 과	징 수	체 납	징수율(%)
합 계	14,702	12,737	1,965	86.6
2010년	2,951	2,632	319	89
2011년	2,927	2,648	279	90
2012년	2,995	2,669	326	89
2013년	3,033	2,621	412	86
2014년	3,032	2,404	628	79

※ 환경개선부담금의 체납율 증가.

4. 세부추진계획

▣ 부과횟수 : 연 2회(상․하반기).

▣ 납부기간 : 상반기(3월), 하반기(9월).

▣ 징수 목표율 : 부과액에 대한 80%이상 징수.

(시책 2) 1회용품 사용억제 추진

1. 현황 및 필요성

▣ 대상업소 : 1회용품 사용억제 대상시설 11,718개소

• 식품접객업 및 집단급식소, 목욕장업, 대규모점포, 도․소매업 등

▣ 필 요 성 : 폐기물의 발생을 억제하고 재활용을 촉진하는 등 자원을 순환적으로 이용, 환경 보전과 국민경제의 건전한 발전에 이바지하기 위함.

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014～2018년

▣ 사업내용 : 1회용품 대신 장바구니 등 다회용품으로 대체 사용하도록 지속적으로 홍보 및 지도 단속

3. 추진실적

▣ 1회용품 사용억제 및 지도점검 : 식품접객업소 등 475개소

• 위반자 조치 : 2건(과태료 부과 : 180천원)

▣ 1회용품 사용억제 홍보 계획수립 : 연 1회

▣ 유달산 소식지 게재 및 홍보 전단 배부 : 5회, 15,000매

4. 향후 추진계획

▣ 1회용품 사용규제 대상 업소지도ㆍ점검 : 연중

• 위반자 조치 : 현지 시정 또는 300만원 이하 과태료 부과

▣ 1회용품 사용억제 추진에 따른 유관기관 협조체제 구축

• 대   상 : 집단급식소를 운영하는 학교, 관공서 및 요식업조합 등

• 협조사항 : 1회용품 사용 억제

(시책 3) 효율적인 재활용품 분리수거 추진

1. 현황 및 필요성

▣ 특별점검 대상시설 지도․점검

• 대  상 : 89개소(학교, 병원, 역, 터미널 등)

• 내  용 : 재활용 용기비치 및 분리수거 실태 등

▣ 필요성 : 재활용 가능자원의 분리수거 활성화를 통해 재활용률 제고 및     깨끗한 환경보전에 기여

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014～2018년

▣ 사업내용 : 활용 가능한 재활용품에 관한 지속적인 홍보와 지도ㆍ점검으로 분리수거 효율을 높임

▣ 재활용품 품목 : 플라스틱, 스티로폼, 고철, 공병 등 14종

▣ 재활용 가능물품 수거처리 목표량 : 2,200톤

• 플라스틱, 고철, 스티로폼, 공병 등 : 2,000톤

• EPR 품목 : 200톤(필름류 120톤, 폐형광등 60,000개, 폐건전지 5톤)

3. 추진실적

▣ 분리배출 주민홍보 및 지도ㆍ점검 : 188개소

• 유달산소식지5회, 시 홈페이지1회, 학교ㆍ아파트 등 홍보 15회

▣ 시가지 및 공동주택 수거실태 확인점검 : 연중

▣ 재활용 선별장 선별실태 확인점검 : 연중

▣ 재활용 가능물품 수거처리량 : 3,230톤

• 플라스틱, 고철, 스티로폼, 공병 등 : 3,000톤

• EPR 품목 : 230톤(필름류 210톤, 폐형광등 85,750개, 폐건전지 5톤)

4. 향후 추진계획

▣ 재활용품 분리수거 의무 대상시설 지도ㆍ점검 : 연중

• 점검내용 : 재활용 용기비치 및 분리수거 실태 등

(시책 4)  사업장폐기물 배출사업장 지도․점검 강화

1. 현황

구 분	합계	수집운반	재활용	건설	배출계	생활계	카센타	공업사	지정기타	의료
업소수	1,076	24	2	33	38	150	152	47	322	308

2. 추진방침

▣ 사업장폐기물 배출업소의 폐기물 보관 및 처리 적정여부 지도․점검

▣ 폐기물 수집운반업체의 폐기물 수집․운반 적정여부 지도․점검

▣ 민원유발 사업장에 대하여는 해소될 때까지 집중점검

▣ 신고대상 규모미만 사업장은 신고사항 말소 및 종량제봉투 사용 유도

▣ 실적 단속위주의 점검을 지양하고 단순한 행정처리 미이행 또는 즉시 보안 가능한 사항은 현장에서 행정지도를 통해 법규이행 유도

3. 그간 추진실적

▣ 점검실적

구 분	합계	수집운반	재활용	건설	배출계	생활계	카센타	공업사	지정기타	의료
점검실적	620	50	2	100	38	150	45	42	45	148

▣ 단속실적 : 위반사업장 2개소

- 행정처분 : 2개소(영업정지 1, 경고 1)

- 과 태 료 : 1개소(3,000천원)

▣ 생활민원 처리 : 890회

4. 향후 추진계획

○ 환경보전에 위해가 없이 경미한 경우 현장에서 행정지도

○ 고의성, 중대한 위법사항에 대하여는 관계법에 따라 강력한 행정조치

(시책 5) 음식물류폐기물 감량의무사업장 지도 ․ 점검 강화

1. 현황 및 필요성

▣ 음식물류폐기물 발생억제를 위한 다량배출사업장 감량의무 이행여부 확인 필요

▣ 감량의무상업장 현황 (2014년 현황)

계	집단 급식소	음식점	대규모 점포	시 장	호 텔
420	119	287	5	7	2

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 연중

▣ 사업내용 : 감량의무 사업장 지도․점검을 통해 지속적인 관리 유지

3. 그간 추진실적

▣ 음식물류폐기물 다량배출(감량의무)사업장 발생억제를 위한 조례개정 : 2012.10.1

▣ 음식물류폐기물 발생억제 및 감량의무 이행계획신고 수리 : 420개소

4. 향후 추진계획

▣ 음식물류폐기물 감량의무사업장 지속관리를 통한 음식물류폐기물 감량 유도

• 폐기물 처리업체에 위탁 처리하는 사업장 : 2년 1회

• 축산농가 등에 위탁 처리하는 사업장 : 1년 1회

• 2년에 1회 이상 위반사업장 및 민원 유발 사업장 : 반기 1회

(시책 6) 종량제 규격봉투 사용률 향상

1. 현    황

▣ 추진기간 : 연중

▣ 규격봉투 사용률 향상 목표 : 현 사용률 65% ⇒ 목표치 75%

▣ 단속대상 : 종량제 봉투 미사용, 대형폐기물 등 불법투기 행위

▣ 단속방법 : 불법투기 단속반 편성운영 및 시민 홍보활동 전개

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014～2018년

▣ 사업내용 : 지속적인 교육을 통한 재활용 가능 물품 분리 배출 및 불법투기 예방

▣ 종량제규격봉투 사용 우수아파트 선정 표창 등 인센티브 제공

• 최우수 아파트 1개소 : 종량제규격봉투 50ℓ 1,000매 제공

• 우수 아파트 2개소 : 종량제규격봉투 50ℓ 각 500매 제공

3. 그간 추진실적

▣ 2009～2014년 : 분기별 아파트 종량제 봉투 사용률 현황 조사

▣ 종량제 봉투 사용 및 야간배출제 홍보 매월 4회 상가 밀집지역 및

일반 주택 개별 방문 집중홍보, 언론보도, 반상회보 등 홍보

4. 향후 추진계획

▣ 종량제규격봉투 사용 우수아파트 선정 표창 등 인센티브 제공

• 최우수 아파트 1개소 : 종량제규격봉투 50ℓ 1,000매 제공

• 우수 아파트 2개소 : 종량제규격봉투 50ℓ 각 500매 제공

▣ 생활쓰레기 불법투기 근절대책을 시행하여 종량제봉투 사용률 향상

(시책 7) 고물상 환경개선 정비계획

1. 필 요 성

▣ 도시계획 주거 및 상업지역 내에서 영업 중인 고물상으로 인하여 분진, 소음, 악취, 환경 악화 등의 사회적인 문제를 해소하기 위함.

2. 추 진 개 요

▣ 정비기간 : 연중 수시

▣ 대    상 : 관내 고물상 50개소(주거․상업지역 34개소, 공업지역 등 16개소)

▣ 정비내용 : 업주 및 토지소유자 교육, 지도점검 실시

3. 추 진 실 적

▣ 고물상 영업주 간담회 실시(2회)

- 고물상의 수집․운반․보관․처리과정 준수사항 등의 교육

- 고물상 영업자의 영업상 애로사항 청취 및 질의응답

▣ 관내 실태조사 및 행정지도 실시

○ 관내 고물상 실태조사 및 관리카드 작성

- 사업장 위치 및 전경사진, 점검내용, 지시사항 이행기재

○ 조치사항

- 사업장환경정비 12개소

- 행정지도 50개소

○ 행정사항

- 목포시 건축행정과(불법건축물 관리 협조요청)

- 목포시 건강증진과(방역실시 협조요청)

- 목포시 환경관리과(소음, 분진, 악취 등 행정지도 협조요청)

- 목포세무서(사업자등록시 협조요청)4

- 목포소방서(화재예방 안전점검 협조요청, 합동점검 실시)

- 토지소유자(고물상 업종 배제 협조요청)

- 영업자(타업종 전환 협조요청)

4. 추 진 계 획

▣ 고물상 행정지도(시내전 일원)

○ 자율정비기간 부여 및 지도점검 : 연중 수시

(시책 8)  매립가스 발전시설(LFG) 운영

1. 현황 및 필요성

▣ 현황

• 시설위치 : 목포시 대양동 산93-4번지(1,800㎡)

• 매립용량 : 2,897천㎥              • 매립면적 : 2,230천㎥

• 사 업 자 : (주)한화 대표 박재홍    • 가스생산 판매량 : 24백만㎥

※ 생활폐기물의 매립으로 인해 발생되는 매립가스(LFG)를 포집하여 발전  시설을 통해 전기를 생산 판매하는 시설

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2007. 4. 10. ～ 2009. 6. 30.

▣ 사업내용 : 매립가스 생산 발전시설을 통한 전력생산 판매

▣ 사 업 량 : 2MW(1MW * 2기), 가스포집시설 9개소

▣ 사 업 비 : 3,100백만원(전액 민간자본)

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014 이전	2015	2016	2017	2018
소 계	3,100	3,100
기 타	3,100	3,100	사	업	완	료

3. 그간 추진실적

▣ 추진실적

• 2008년 하반기 ~ 2014년 상반기까지 가스포집량 : 24백만㎥

• 2008년 하반기 ~ 2014년 상반기까지 전기생산량 : 3,419만kwh

• 2008년 하반기 ~ 2014년 상반기까지 발전금액 : 4,507,267천원

• 2008년 하반기 ~ 2014년 상반기까지 세외수입 : 287,201천원

4. 향후 추진계획

▣ 운영기간 : 2009년 ~ 2024년(15년간)

• 발전수익의 6.3% 세외수입 증대

▣ 연도별 사업계획

구 분	소 계	2014년까지	2015년	2016년이후
매립가스발전사업 예상수익	400	310	45	45

(단위 : 백만원)

(투자 1) “청결목포”이미지 제고를 위한 시가지 청소

1. 현황 및 필요성

▣ 청소 사각지대의 최소화와 깨끗한 시가지 환경조성으로 미항 목포 이미지 제고 및 쾌적한 명품도시 조성

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2015～2019년

▣ 사 업 비 : 4,250 백만원(시비 4,250)

	(단위 :백만원)
구분	연도별투자계획
	소계	2015	2016	2017	2018	2019
소 계	4,250	850	850	850	850	850
시 비	4,250	850	850	850	850	850

▣ 사업내용 : 월별․계절별 시가지 대청소 및 취약지역 정비

3. 추진실적

▣ 폐기물 『야간 정시 배출제』실시에 따른 주민홍보

• 언론 홍보 7회 및 전단지 10,000부 배부

▣ 축제대비 시가지 청소 및 취약지 집중정비의 달 운영

• 유달산축제(4월), 해양문화축제(8월) 축제대비 전시가지 청소실시

▣ 피서철 다중집합장소 및 도서지역 전담팀 운영(4명)

• 평화광장주변, 유달유원지, 외달도 등 피서철 환경실무원 고정 배치 청결활동실시

▣ 불법투기 지도단속 활성화로 종량제 이행 및 기초질서 확립 : 4개반 10명

• 불법투기 우심지역 20개소에 대해 로드맵을 작성하여 집중단속 연중실시

• 쓰레기 상습 투기 지역에 불법투기 시민감시단을 배치하여 불법투기 방지

4. 향후 추진계획

▣ 대규모 주택단지 조성 및 관리구역 증가에 따라 환경실무원 청소구역 재배치

▣ 노면청소차량 확충 및 시가지 청소에 활용하여 효율적인 청소체계 수립

▣ 쓰레기 불법투기 지도단속 강화 : 연중

(투자 2) 생활쓰레기 불법투기 근절대책 시행

1. 현황 및 필요성

▣ 자원의 소중함을 알리고 재활용률을 높이기 위해 1995년부터 생활쓰레기를   종량제봉투 배출방식으로 전환하였으나, 일부 시민들의 불법투기가 계속되어  환경저해는 물론 시민보건위생에도 막대한 피해가 우려됨에 따라 더욱  강력한 근본대책을 수립 시행코자 함

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2015～2019년

▣ 총 사업비 : 805백만원(시비)

	(단위 :백만원)
구분	연도별투자계획
	소계	2015	2016	2017	2018	2019
소 계	805	161	161	161	161	161
시 비	805	161	161	161	161	161

3. 향후 추진계획

▣ 시민감시관제 운영 : 적재장소 인근 주민 중 희망자 등

▣ 불법투기자 제재 강화 : 적재장소를 2회이상 적발자 집앞으로 변경

▣ 상습 불법투기지역 감시관 고정배치 : 2015년 노인일자리 사업

▣ 재래시장 쓰레기 위탁처리 유도 : 동부시장외 5개소

▣ 불법투기 단속반 편성 운영 : 3개조 12명, 신고센터 운영(자원순환과 ☎270-8502)

▣  CCTV(이동식과 고정식 병행) 추가 설치(5대)

5. 기대효과

▣ 깨끗한 목포가꾸기와 시민의식계몽으로 관광 목포 홍보

(투자 3) 대형폐기물배출 인터넷접수 추진

1. 현황 및 필요성

▣ 대형폐기물 배출신고를 시 홈페이지에 의한 인터넷 신고 확대로 민원인의 불편 해소 및 양질의 서비스제공 등 주민편의를 도모하고자 함

▣ 인터넷 접수처리 체계 확립

• 목포시 홈페이지 접속(www.mokpo.go.kr) ⇒ 대형생활폐기배출신고 항목 클릭 ⇒ 배출신고 대상선정(품목, 수량, 배출장소 및 배출일자 등 기재) ⇒ 수수료 결제 방법선택(신용카드, 계좌결재 등) 후 결재 ⇒ 프린터로 신고필증 인쇄 후 부착 ⇒ 지정장소 및 일시에 배출 ⇒ 수거처리

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014～2018년

▣ 사 업 비 : 5백만원 (시비)

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	5	1	1	1	1	1
국 비
도 비
시 비	5	1	1	1	1	1

3. 그간 추진실적

▣ 사 업 량 : 전산프로그램 1식

• 인터넷 전산시스템 프로그램 구입 및 구축 : 6백만원

▣ 전자 지불서비스 계약(LG데이콤)

▣ 민원처리 홈페이지 구축 및 주민홍보, 주민소식지 게재 : 각 1회

▣ 대형폐기물 배출 인터넷 접수시스템 시 홈페이지 홍보 : 1회

▣ 인터넷 접수시스템 각동주민 센터 홍보의뢰 및 매뉴얼 송부 : 1회

▣ 시험운영 및 개선

▣ 서비스 실시 : 2009.  6.  1.

4. 향후 추진계획

▣ 회선사용료 지급 : 1백만원(매년)

(투자 4) 음식물류폐기물 수수료 종량제 추진

1. 현황 및 필요성

▣ 현황(2012.12월말 기준)

합계	공동주택	단독주택	소형음식점
102,786	55,441	44,211	3,134

▣ 음식물류폐기물 발생량을 원천적으로 저감하기 위해 배출량에 따라 수수료를 부과하는 종량제 시행

2. 추진개요

▣ 시행시기 : 2013. 1. 1. 전면시행

▣ 시행방법 : 스티커 방식(REID카드 이용방식 보류로 사업비 재 조정)

• 공동주택 : 단지별 종량제

• 단독주택․소형음식점 : 세대별 종량제

▣ 배출방법 : 배출할 때마다 수거용기별 스티거 부착하여 배출

▣ 사 업 비 : 94백만원 (시비)

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	94	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8
시 비	94	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8

3. 그간 추진실적

▣ 종량제 시행방법 결정                         : ‘12. 3. 15.

▣ 종량제 수수료 조정안 결정                      : ‘12. 4. 17.

▣ 종량제 수수료 결정안 물가대책위원회 심의 : ‘12. 9. 13

▣ 음식물류폐기물 수집운반 및 재활용촉진을 위한 조례개정 : ‘12.10.2

▣ 음식물류폐기물 감량 시범아파트 지정 운영(40개소) : 14. 4월 ～ 10월

4. 향후 추진계획

▣ 음식물류폐기물 줄이기 운동 추진

- 음식물류폐기물 감량 시범아파트 확대 지정 운영

- 음식물류폐기물 줄이기 캠페인 및 홍보 실시

(투자 5) 음식물류폐기물 자원화시설 운영

1. 현황 및 필요성

▣ 현 황

•  처리용량 : 40톤/일.

•  처리방식 : 호기성 퇴비화.

•  준공일자 : 2006. 2. 21.

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014 ~ 2018년.

▣ 사 업 비 : 4,000백만원(시비)

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	4,000	800	800	800	800	800
시 비	4,000	800	800	800	800	800

▣ 사업내용 : 음식물류폐기물 처리시설 운영 및 유지 보수.

▣ 사 업 량 : 음식물류폐기물 처리 (연간 14,000톤, 일평균 40톤).

유기질퇴비 생산 (연간 : 1,500톤).

3. 그간 추진실적

▣ 자원화시설 직영으로 전환(‘09. 5. 7).

▣ 반입 음식물 처리 : 38톤/일.

▣ 유기질 퇴비 생산 : 5톤/일.

▣ 퇴비 유상 판매액 : 8백만원/년.

4. 향후 추진계획

▣ 음식물자원화시설의 노후시설물을 지속적으로 보수․개선하여 주변마을 악취 민원 예방 및 자원화시설의 안정적인 운영.

(투자6)  하수슬러지 처리시설 사업

1. 현황 및 필요성

▣ 현황

• 시설규모 : 건조 80톤/일

▣ 필요성

• 하수슬러지 해양배출 전면금지에 따라 하수슬러지 육상처리 기반을 확충하여 환경오염방지와 하수슬러지의 자원화, 감량화, 안정화를 달성

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014. ~ 2018년

▣ 사 업 비 : 17,950백만원(시비 17,950)

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	17,950	2,820	3,300	3,630	4,000	4,200
시 비	17,950	2,820	3,300	3,630	4,000	4,200

▣ 사업내용 : 스파징패들건조기(5.4톤/시간×1기)

리본패들건조기(3.5톤/시간×1기) 집진기(176A㎥/min×1기)

▣ 사 업 량 : 하수슬러지 처리(연간 21,900톤, 일평균 60톤)

건조슬러지 생산(연간 3,000톤)	·

3. 그간 추진실적

▣ 추진실적

• ‘10.  5 : 공사착공(턴키사업)

• ‘11. 12 : 하수슬러지처리시설 준공 및 의무운전

• ‘13.  1 : 하수슬러지처리시설 운영 위․수탁 운영 협약

4. 향후 추진계획

▣ 관리대행 업체 재선정 : 2015. 1월

▣ 연도별 사업계획

구 분	소 계	2014년까지	2015년	2016년이후
하수슬러지처리사업	32,415	17,285	3,300	11,830

(단위 : 백만원)

(투자 7)  생활폐기물 전처리시설 사업

1. 현황

▣ 시설규모 : 폐기물처리량 230톤/일, 고형연료(SRF)생산량 115톤/일

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014. ～ 2018년

▣ 사 업 비 : 15,840백만원(시비 15,840)

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	15,840	820	3,200	3,620	4,000	4,200
시 비	15,840	820	3,200	3,620	4,000	4,200

▣ 사업내용 : 트롬멜스크린(17톤/시간×1기), 파쇄기(7.8톤/시간×1기)

레이크선별기(9.6톤/시간×1기, 3.4톤/시간×1기)

건조기(10톤/시간×1기), 성형기(3톤/시간×4기)

▣ 사 업 량 : 생활폐기물 처리(일최대 230톤, 운영 16시간/일)

고형연료 생산(일최대 115톤)

3. 그간 추진실적

▣ 추진실적

• ‘09.  8. : 공사입찰공고

• ‘09. 12. : 실시설계적격자 선정

• ‘10.  5. : 공사착공(턴키사업)

• ‘14.  9. : 시운전(연동 부하 테스트)실시

• ‘14. 12. : 공사준공

4. 향후 추진계획

▣ ‘15.  1. : 의무 위탁운영

▣ ‘15. 12. : 민간 위탁운영자 선정

▣ 연도별 사업계획

구 분	소 계	2014년까지	2015년	2016년이후
생활폐기물전처리사업	58,732	43,712	3,200	11,820

(단위 : 백만원)

(투자 8)  위생매립장 순환형 정비사업 추진

1. 현황 및 필요성

▣ 현황

• 매립장 현황 : 총매립량(2,897,000㎥), 기매립량(2,272,185㎥).

※ 2012년말 기준 매립용량의 약78.4% 매립.

▣ 필요성

• 위생매립장 용량이 만료될 경우, 대체 매립시설 확보가 어려운 현실을 감안하여 현 매립장 순환형 정비사업 타당성 용역으로 지속사용 방안 강구.

2. 위생매립장 순환형 정비사업 개요

▣ 사업기간 : 2018년 ～ 2021년(4년).

▣ 추정사업비 : 33,300백만원(국비 16,650 시비 16,650)

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자계획
		2018	2019	2020	2021
소 계	33,300	1,878	10,474	10,474	10,474
국 비	16,650	939	5,237	5,237	5,237
시 비	16,650	939	5,237	5,237	5,237

▣ 사업내용 : 매립폐기물 굴착 및 선별처리.

- 가연성폐기물 : 전처리시설 투입 SRF 생산.

- 비가연성폐기물 : 매립장 되메움.

- 선별토사 : 복토용 토사로 사용.

3. 그간 추진실적

▣ 타당성 조사 및 기본계획 용역완료 : 2013.6.13 ～ 2014.2.13.

▣ 국고보조사업 사전검토요청서 제출(환경부) : 2014.2.18

▣ 국고보조사업 사전검토요청서 검토결과 통보(재검토, 환경부) : 2014.4.10

※ 향후 약 8년은 매립이 가능한 시설로 판단되며, ‘14년 환경에너지센터(SRF제조) 가동(230톤/일)을 감안할 경우 사용연한 추가연장이 예상되므로 여러 여건을 고려한 동 사업 추진의 필요성․타당성 확보 선행시 국고지원 가능.

4. 향후 추진계획

▣ 최적화실무협의회 운영(신안군과 최적화 협의서 체결) : 2016. 8월

▣ 환경에너지센터 가동운영 결과조사 : 2016. 12월

▣ 2018년도 폐기물처리시설 국고보조사업 재신청(환경부) : 2017. 1월

					분야별 세부사업
					▣ 4. 연안환경 분야

(투자 1)  깨끗한 목포항 만들기

1. 현황 및 필요성

▣ 민ㆍ관ㆍ군 등 바다가족이 동참하는 해안정화활동을 전개하여 바다사랑 실천의지 확산 및 깨끗하고 쾌적한 바다환경을 조성 미항목포 이미지 제고

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014 ~ 2018년

▣ 사 업 비 : 370백만원(국비 75, 도비 25, 시비 270)

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	370	70	75	75	75	75
국 비	75	15	15	15	15	15
도 비	25	5	5	5	5	5
시 비	270	50	55	55	55	55

▣ 사업내용 : 해양환경정비 기동대, 지역공동체일자리사업, 연안환경정비활동,

바다살리기 실천대회 추진 등

▣ 사 업 량 : 해안가 쓰레기 400톤 수거처리

3. 그간 추진실적

▣ ‘14년도 추진실적

• 사업비 : 70백만원(국비 15, 도비 5, 시비 50)

• 해안가쓰레기 수거처리량 : 180톤

4. 향후 추진계획

▣ 연도별 사업계획

(단위 : 백만원)

	소 계	2014	2015	2016	2017	2018
계	370	70	75	75	75	75
해양환경정비 기동대	125	25	25	25	25	25
지역공동체일자리사업	150	30	30	30	30	30
연안환경정비	50	10	10	10	10	10
바다살리기 실천대회	45	5	10	10	10	10

(투자 2)  해안가 쓰레기 정화사업

1. 현황 및 필요성

▣ 체계적이고 신속한 해양쓰레기 수거처리로 깨끗하고 쾌적한 바다환경을 조성하여 해양환경보전 및 수산자원 보호에 기여.

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014 ~ 2018년.

▣ 사 업 비 : 1,170백만원(국비 485, 도비 100 시비 585)

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	1,170	210	240	240	240	240
국 비	485	85	100	100	100	100
도 비	100	20	20	20	20	20
시 비	585	105	120	120	120	120

▣ 사업내용 : 조업중 인양쓰레기 수매사업, 해양쓰레기 수거ㆍ처리사업, 해양쓰레기

선상집하장 설치사업

▣ 사 업 량 : 해양쓰레기 500톤 수거처리

3. 그간 추진실적

▣ ‘14년도 추진실적

• 사업비 : 210백만원(국비 85, 도비 20 시비 105)

• 해안가쓰레기 수거처리량 : 250톤

4. 향후 추진계획

▣ 연도별 사업계획

(단위 : 백만원)

	소 계	2014	2015	2016	2017	2018
계	1,170	210	240	240	240	240
조업중 인양쓰레기 수매사업	660	100	140	140	140	140
해양쓰레기 수거처리사업	200	40	40	40	40	40
해양쓰레기 선상집하장 설치사업	310	70	60	60	60	60

(투자 3)  영산강하구언 부유쓰레기 정화사업

1. 현황 및 필요성

▣ 집중 호우시 영산강 상류에서 일시적으로 다량의 부유쓰레기가 영산강 하구 및 목포항으로 유입되어 수질오염 및 경관을 훼손하므로 상시 처리 시스템 마련

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014 ~ 2018년.

▣ 사 업 비 : 1,170백만원(국비 485, 시비 585)

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	750	157	143	150	150	150
국 비	525	110	100	105	105	105
시 비	225	47	43	45	45	45

▣ 사업내용 : 영산강 부유쓰레기 수거․처리

▣ 수거방식 : 평상시 - 인력수거, 태풍․장마철 피해시 - 중장비 동원

▣ 처리방식 : 폐기물중간처리업체(소각) 위탁 처리

3. 그간 추진실적

▣ 최근 2년간 수거․처리 현황

구분 연도별	사 업 비			수거․ 처리량	비 고
	계	국비	시비
2013년	200	140	60	450톤	일일근로인원 5명
2014년	157	110	47	157톤	일일근로인원 6명

4. 향후 추진계획

▣ ‘15. 02 : 영산강하구언 부유쓰레기 정화사업 추진계획 수립

▣ ‘15. 03 : 착공(일일투입인원 5～10명)

▣ ‘15. 10 : 준공

					분야별 세부사업
					▣ 5. 상수도 분야

(시책 1)  다량급수 수도전 특별관리 점검

1. 현황 및 필요성

▣ 급수전의 감독․관리를 통해 수도전의 누수 예방 관리 필요.

▣ 비정상적인 수도전에 대한 정밀점검 필요.

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014~2018년 (연중).

▣ 사업내용

• 점검기간 : 매월 25일∼익월 6일.

• 점 검 자 : 구역담당 민간검침원, 후견공무원.

• 점검대상 : 총 344개소(가정용 146, 일반용 156, 대중탕용 33, 산업용 9.

▣ 사 업 비 : 비예산사업.

▣ 사업내용 : 월 500톤 이상 다량사용 급수전 관리.

• 조정량 증감률이 높은 업소, 증감률 변화가 없는 수용가.

• 계량기 작동불량 등으로 인한 인정 부과 수용가.

• 빈번한 계량기 교체 수용가.

▣ 사 업 량 : 344개 수도전.

3. 그간 추진실적

▣ 2009 ~ 2014년 : 분기별 300개 이상 다량사용 수도전 정기조사.

▣ 2014년 : 다량급수 수도전에 대한 일제조사 : 4회(3,6,9,12월).

▣ 작동불량 계량기 발견 시 신속한 교체(수도과 의뢰) 및 매몰, 파손 등으로 인정부과한 수용가에게 원상복구 명령 및 계도.

4. 향후 추진계획

▣ 점검반 편성 운영 : 2개반.

▣ 분기별 다량급수전 조사 및 관리, 누수예방 및 수도요금 현실화 반영.

▣ 다량급수 수도전 관리자에 대한 물절약 안내문 등 발송(분기1회).

(시책 2)  맑은물 공급을 위한 수질관리

1. 현황 및 필요성

▣ 맑은 수돗물 공급을 위해 정수장에서 수도꼭지까지 수질관리

▣ 수돗물 신뢰성 향상을 위해 검사결과 공표 및 홍보

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014 ~ 2018년 (연중)

▣ 사업내용 : 먹는 물에 대한 높은 관심은 맑은 수돗물 공급에 있음으로 수돗물 공급 전 과정에 대한 수질관리 필요

3. 그간 추진실적

구 분	점검주기	비 고
정수장 수질검사	일일,주간,월간검사
노후관 및 수도꼭지	월 1회
유리잔류염소	주 1회이상

▣ 정수장에서 수도꼭지까지 수질검사

▣ 수돗물 수질관리 개선을 위한 자구노력

• 수돗물평가위원회 및 민관합동 수질검사 : 4회

• 수돗물 안심 확인제(민원발생시 조사) : 16회

• 수질검사결과 공표 (언론매체 및 자체홍보) : 24회

▣ 지표 달성도 : 상수도보급률 99.8%, 1인당 급수량 365.1ℓ/일

4. 향후 추진계획

▣ 정수장에서 수도꼭지까지 수질검사

• 정 수 장 : 일일검사, 주간검사, 월간검사, 분기검사 실시

• 노 후 관 : 노후수도관 매설지역

• 수도꼭지 : 시민이 사용하는 수도꼭지

• 유리잔류염소 : 관말지역 소독상태 검사

▣ 수돗물 수질관리 개선을 위한 자구노력

• 수돗물평가위원회 개최

• 수돗물 수질인증제 : 다중이용시설 대상 실시

• 옥내급수관 진단서비스 : 녹물출수 등 민원발생시 조사

▣ 수돗물 우수성 시민홍보

• 수질검사결과 공표 : 언론매체 및 자체홍보

(투자 1)  유수율 제고 누수탐사용역

1. 현황 및 필요성

▣ 상수도 급수체계의 효율적인 유지관리와 유수율 제고를 위하여 블록별 급․배수관로 정밀탐사 및 누수요인 분석 등을 위한 누수탐사 용역 추진

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014 ~ 2018년

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	1,500	300	300	300	300	300
시 비	1,500	300	300	300	300	300

▣ 사 업 비 : 1,500백만원(시비)

▣ 사업내용 : 노후 급․배수관 정비 및 신설 공사

▣ 사 업 량 : 목포시 관내 급․배수관 553km, 수용가 조사 33,000전

3. 그간 추진실적

▣ 2010~2014년간 누수탐사 추진현황(37개 구역)

•′10년 : 6개소, ′11년 : 5개소, ′12년 : 7개소,′13년 : 4개소 ′14년 : 9개소

▣ 지표 달성도 : ‘14년도 상수도 누수율 10.6%(2013년 11.4% → 2018년 10%)

4. 향후 추진계획

▣ 용역 착수(매년 10~1월)

▣ 구역고립 및 유량분석, 수압측정(매년 2~5월)

▣ 유수율분석 및 누수수리, 용역준공(매년 6 ~ 10월)

(투자 2)  맑은물 생산 ․ 공급을 위한 정수처리시설 청소

1. 현황 및 필요성

▣ 정수처리시설의 응집․ 침전지 등에 퇴적된 슬러지 제거와 벽면 세척으로 침전효율을 높여 맑은 물 생산 공급

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2016 ~ 2018년

▣ 사 업 비 : 87백만원

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	87			29	29	29
시 비	87			29	29	29

▣ 사업내용 : 정수처리시설에 퇴적된 슬러지 제거와 벽면 세척으로 맑은 물

생산공급

4. 향후 추진계획

구 분	수 량	추 진 실적	비 고
응집․침전지	6지	상․하반기 2회(4월,10월)실시	12
정수지	2지	10월중 1회 실시	2
회수조	2지	10월중 1회 실시	2

▣ 청소대상 정수시설(매년 16지 청소)

(투자 3)  노후 급․배수관 정비 및 신설 공사 추진

1. 현황 및 필요성

▣ 20년 이상 경과된 노후 배수관을 순차적으로 교체

▣ 급수불량 지역에 대하여 배수관 우선 신설

▣ 노후 및 난립 된 급수관을 정비하여 수돗물 손실예방

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014 ~ 2018년

▣ 사 업 비 : 6,925백만원(시비)

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	6,925	1,183	1,242	1,500	1,500	1,500
시 비	6,925	1,183	1,242	1,500	1,500	1,500

▣ 사업내용 : 노후 급․배수관 정비 및 신설 공사

▣ 사 업 량 : D=100~400mm, L= 8.76㎞, D=16~100mm, L= 7.64㎞

3. 그간 추진실적

▣ 2014년 추진실적

• 노후 배수관 교체공사 D=100~400mm, L=1.75㎞

• 급수관 통합정비공사 D=16~100mm, L=1.862㎞

4. 향후 추진계획

▣ 현지조사 및 실시설계(매년 2, 7월)

▣ 도로굴착 조정 심의(매년 3, 8월)

▣ 공사시행(매년 3 ~ 12월)

▣ 연도별 사업계획

(단위 : ㎞)

구 분	소 계	2014	2015	2016	2017	2018
계	16.4	2.1	2.3	4.0	4.0	4.0
노후 배수관 교체공사	8.76	1.06	1.7	2.0	2.0	2.0
급수관 통합정비공사	7.64	1.04	0.6	2.0	2.0	2.0

					분야별 세부사업
					▣ 6. 소음․진동․악취․실내공기질․유해화학물질 분야

(시책 1)  실내공기질 관리 강화

1. 현황 및 필요성

▣ 갈수록 냉난방시설 급증으로 실내에서 생활하는 시간은 많아지고 있으나, 실내오염발생원의 증가, 환기부족 등으로 실내공기오염이 심화되고 있음.

• 새집증후군, 건물증후군 등 신종 환경성 질환에 대한 사회적 관심이 날로 증가됨.

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014~2018년.

▣ 사업내용 : 다중이용시설 등 실내공기질 관리 강화.

3. 추진실적

▣ 다중이용시설 실내공기질 측정 : 124개소(년 1회).

▣ 실내공기질 점검대상 사업장 지도 ․ 점검 : 33개소.

4. 향후 추진계획

▣ 다중이용시설의 실내공기질 관리 강화.

• 실내공기질 대상 사업장 지도 ․ 점검(년 1회)

• 실내공기질 자가측정(년 1회).

▣ 신축 공동주택의 실내공기질 관리 강화.

▣ 다중이용시설 관리대상 확대.

• 실내공기질 취약시설에 대한 진단 및 개선방안 메뉴얼 보급.

▣ 다중이용시설 운영자 대상 실내공기질 관리 교육 실시

(시책 2)  발생원별 소음․진동 관리 강화

1. 현황 및 필요성

▣ 시민들이 조용하고 평온한 환경을 영위할 수 있도록 소음․진동배출업소 적정 관리.

▣ 소음․진동배출사업장에 대한 사전 자체점검 안내.

2. 개 요

▣ 기      간 : 2014.  ~ 2018.

▣ 내      용 : 소음․진동배출업사업장 지도․단속.

▣ 점검사업장 : 한일수산(주) 등 14개 소음진동배출시설 및 특정공사사업장

3. 그간 추진실적

▣ 위반업소 행정처분 및 과태료 부과 현황

년 도	업소수	점검업소	위반업소	행정처분			과태료 등 부과(천원)
				계	조치․개선명령	경고 등
2014년	14	13	4	6	6	-	7,600

4. 향후 추진계획

▣ 소음․진동배출사업장 지도․단속에 따른 사전 자체점검 안내.

▣ 민원발생 대상사업장을 위주로 지도․단속 실시.

					분야별 세부사업
					▣ 7. 토양환경 분야

(시책 1)  토양오염 실태조사 개선 및 모니터링 확대

1. 현황 및 필요성

▣ 토양오염 추세 및 실태 파악 등 자료를 토대로 토양오염 사전예방 및 오염토양의 정화․복원 등의 토양환경보전대책을 수립하기 위해 토양측정망 운영.

• 토양측정망 : 목포시 지역망 8지점(국가측정망), 측정항목 18개 항목

▣ 목포시내 토양에 대한 토양오염 추세 및 실태파악을 통해 토양오염의 사전예방  하기 위해서 토양오염실태조사 확대 필요.

• 토양오염 실태조사 : 7개소(자체측정망), 측정항목 : 17개 항목

▣ 중금속 항목이 증가 추세인 측정지점에 대한 지속적인 모니터링 시스템 구축

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014~2018년.

▣ 사업내용

• 토양측정망 운영 : 지점 8개소, 항목 21종

• 토양오염 실태조사 확대 관리 : 지점 7개 → 11개, 항목 17종 → 22종

3. 그간 추진실적

▣ 토양오염실태조사 실시

- 조사지점 : 8개소(1개지점 추가)  - 조사횟수 : 연1회.

- 선정기준 : 토양오염의 가능성이 높은 지역(토양오염실태조사지침)

- 측정항목 : Cd, Cu, As 외 19개

- 조사결과 : 12월 중순경(전라남도 보건환경연구원)

4. 향후 추진계획

▣ 지역별 지하수 오염 추이와 서산․온금지구 재개발, 대양산업단지 조성, 임성지구 개발 등 토양오염 영향 변동요인 등을 충분히 고려하여 토양오염   실태조사 지점을 2015년부터 1개소씩 확충.

▣ 지속적인 중금속(As, Hg)항목이 증가되는 토양오염 측정지점에 대해서는 토양오염실태조사 중점관리 지점으로 지정 원인 및 대책 강구

(시책 2)  토양오염원 및 유발시설 관리 강화

1. 현황 및 필요성

▣ 토양오염물질을 생산⋅운반⋅저장․취급함으로써 토양을 오염시킬 우려가 있는 시설⋅장치⋅건물 및 장소 등을 토양오염유발시설로 규정.

▣ 토양오염 유발시설 중 주유소 및 석유류 저장시설은 특정토양오염유발시설로 지정하고 설치 전 신고하도록 규정.

▣ 특정토양오염유발시설 중 주유소가 가장 많이 차지하며, 또한 노후화로  인하여 유류의 유출이 있을 것으로 예상되어 전체적인 오염도 검사 필요.

(단위: 개소)

신고업소수	주유소	산업시설			기타 (난방시설 등)
		소계	석유류	유독물
67	53	5	5	-	9

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014~2018년.

▣ 사업내용 : 토양오염원 및 유발시설 관리강화.

3. 그간 추진실적

▣ 2014년 토양오염유발사업장 점검 : 33개소.

- 토양오염검사결과 토양오염우려기준 50%이상 사업장 없음.

4. 향후 추진계획

▣ 설치년수가 15년이상된 주유소에 대하여 집중적으로 관리실태, 토양오염도 검사여부를 점검하여 유류 누출로 인한 토양오염 사전예방.

▣ 토양오염검사 결과 토양오염우려기준에 50%이상시는 현장확인점검 및 토양오염도 검사 병행실시.

(투자 1)  지하수 오염실태조사 개선 및 모니터링 확대

1. 현황 및 필요성

▣ 지하수오염측정망 및 지하수오염실태조사 체계를 구축하여 운영하고 있으나, 지하수오염 현황 및 추이를 파악하는데 한계.

▣ 국가측정망 1개소와 전남측정망 9개소의 지하수측정망이 운영되고 있으나, 지하수오염 현황 및 추이를 파악하는데 한계.

▣ 목포시내 지하수의 오염 추세 및 실태파악을 통해 지하수의 오염을 사전 예방하기 위한 기초자료 확보를 위해 지하수 오염실태조사 확충 필요.

2. 사업개요

▣ 사업기간∶2014 ∼ 2018년

▣ 사업내용∶지하수 오염실태조사지점 확충

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
총 계	34	0	6	6	10	12
시 비	34	0	6	6	10	12

3.  향후 추진계획

▣ 지하수 오염실태조사 지점 선정시 주변환경, 오염물질의 이동특성 및 환경메커니즘 등을 고려한 측정지점 선정 확대

• 지하수오염실태조사 확대 : 지점 5개소 → 9개소, 항목 19종→ 23종

구 분	기존	2014	2015	2016	2017	2018
지하수오염 실태조사 지점	5		1	1	1	1
지하수오염 실태조사 항목	19		1	1	1	1

					분야별 세부사업
					▣ 8. 자연환경 분야

(투자 1)  자연생태환경조사 및 생태지도 제작

1.  현황 및 필요성

▣ 도시 생태공원은 인위적 설계공간에 환경교육을 위한 자연관찰 기능을 부여한 것으로 자연관찰․체험교육을 통해 인간과 자연의 공존․공생.

▣ 도시의 생태적 중요정도에 따라 선택적으로 개발과 보전을 해야 할 지역에 대한 명확한 기준을 제시하고 도시기본․관리․개발계획 수립과 각종 개발사업의 입지선정, 환경성검토 자료로 활용하기 위한 생태지도 제작 필요.

2.  사업개요

▣ 사업기간 : 2017~2018년.

▣ 사 업 비 : 500백만원.

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소계	500	-	-	-	300	200
시비	500	-	-	-	300	200

▣ 사 업 량 : 생태주제도 제작 및 웹GIS 구축.

3. 그간 추진실적

▣ 용역과제 사전 심의 : ’10. 11. 10 - 추진시기 연기.

4.  세부추진계획

▣ 1차년도(2017년) : 환경조사, 생태주제도 제작, 비오톱평가지도 제작.

▣ 2차년도(2018년) : 웹GIS 구축 및 홍보, 관련 조례 개정.

(투자 2)  야생동물 밀렵 ․ 밀거래 방지계획 지속

1. 현황 및 필요성

▣ 독극물이나 올무, 창애 등 불법 엽구에 의한 밀렵․밀거래 행위가 점차 지능화․전문화 되고 있으며, 특히 농한기 겨울철에 야생동물의 밀렵․밀거래행위가 성행할 것으로 예상되어 지속적인 순찰활동이 필요.

▣ 까치 포획을 빌미로 섬 등에서 꿩 오리 등의 밀렵이 예상되어 포획허가시는 수렵인에 대한 교육 및 주민들의 신고체계가 구축하여야 함.

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014 ～ 2018년

▣ 사 업 비 : 20백만원(도비 20%, 시비 80%)

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	20	4	4	4	4	4
도 비	5	1	1	1	1	1
시 비	15	3	3	3	3	3

▣ 사 업 량 : 야생동식물 밀렵․밀거래 단속 및 야생동식물 보호 등.

3. 그간 추진실적

▣ 야생동식물보호원(1명) 고용 배치 : 매년 11월～2월까지.

▣ 야생동식물 밀렵․밀거래 및 불법엽구 수거 집중 단속 및 홍보 : 매년 12월.

▣ 겨울철 야생동물 먹이주기 행사 추진 : 6회(양을산, 남해환경관리과 인근 야산).

4. 향후 추진계획

▣ 도서지역의 농수산물 피해관련 유해야생동물에 대한 근본적인 대책 마련.

▣ 겨울철 및 폭설로 인한 먹이가 부족할 것에 대비하여 1~2월 중에 환경친화적

야생동물 먹이주기 행사 지속 추진.

(투자 3)  생태계보전협력금 반환사업

1. 현황 및 필요성

▣ 자연환경보전법 제46조 규정에 의해 환경영향평가사업 등 대규모 개발사업 시행에 따라 납부하였던 생태계보전협력금으로 도심내 훼손지에 대한 맹꽁이 서식처 복원사업 추진

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014년.

❍ 위    치 : 목포시 산정동 1110-23번지 (잡종지, 국토해양부).

❍ 사업면적 : 약 13,000㎡.

❍ 주요사업 : 환경림 수목식재, 맹꽁이 서식환경 복원, 생태학습공간 등

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
국 비	650	629	11	10

▣ 사 업 비 : 650백만원(국비)

3. 그간 추진실적

▣ ‘14. 02 : 환경부 생태보전협력금 반환사업 공모결과 선정

▣ ‘14. 05~07 : 기본설계 제출 및 환경부 심의

▣ ‘14. 09 : 도시계획시설사업 실시계획 인가고시

▣ ‘14. 10~12 : 공사 착공 및 준공

4. 향후 추진계획

▣ ‘15. 01 : 사후관리 협약체결(목포시 ↔ 사업자)

• ‘15 ~ 16년 : 준공이후 2년간 생태환경 모니터링 및 관리

▣ ‘15. 04 ~ 12 : 체험환경 프로그램 개발 및 운영(2백만원 - 시비)

(투자 4)  국립호남권생물자원관 건립

1. 현황 및 필요성

▣ 도서생물연구, 유전자원 및 천연물에 대한 체계적인 연구․조사․발굴을 지원하기 위한 자원관 건립 지원에 최선의 노력 경주.

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014 ~ 2017년.

▣ 위    치 : 목포시 용해동 971번지(남항 매립지).

▣ 규    모 : 부지 120,000㎡, 건축연면적 10,498㎡

(수장고, 전시실, 식물 전시시설, 연안 및 습지멸종위기생물 전시시설).

▣ 사 업 비 : 47,300백만원(국비)

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017
국 비	47,300	3,000	4,400	25,600	14,300

3. 그간 추진실적

▣ '11. 01 : 국립호남권생물자원관 건립지역 확정(목포 남항매립지)

▣ ‘12. 12 : 진입로 매입 및 지장물 철거(4필지 1,286㎡ 643백만원 매입).

▣ '13. 3 ~ 9 : 타당성 재조사(한국개발연구원, KDI), 건립확정('13. 12월).

▣ ‘14. 4 ~ 8 : 건립 기본계획 수립용역 완료

4. 향후 추진계획

▣ ‘14. 12 ~ ’15. 10 : 기본 및 실시 설계(환경부).

- 기본 및 실시설계에 연약지반 처리 공법을 설계토록 요청 함.

▣ ‘15. 10 ~ ’17. 12 : 본 공사 착공 및 준공

(투자 5)  도시숲 및 완충녹지 조성

1. 현황 및 필요성

▣ 쾌적하고 깨끗한 생활환경을 조성하여 정주기반을 확충해 나감으로써 아름다운 항구 도시 목포 건설과 서남권 충주도시로서 위상제고

▣ 주변 여건과 다양한 시민 욕구에 부합하도록 공간별 특색있는 테마공원 조성

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014 ~ 2018년

▣ 사 업 비 : 8,325백만원(국비 2,950  시비 5,375)

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	8,225	1,400	1,325	1,600	1,900	2,000
국 비	2,950	550	550	550	650	650
시 비	5,275	850	775	1,050	1,250	1,350

3. 그간 추진실적

▣ 도시 숲 조성

• 위    치 : 연산 완충녹지 리모델링, 용당동 철도부지 쌈지공원

영흥고 옆 경관녹지 숲 조성, 연산동 가로변 꽃길 조성

• 사 업 량 : 녹지조성, 편익시설, 바닥포장 등

▣ 완충녹지 및 경관녹지 조성사업

• 위    치 : 상동 1041-2번지 외

• 사 업 량 : 500㎡

▣ 주요 간선도로 가로수 ․ 수벽조성 및 사후관리

• 위    치 : 삼학로 외 9개소

• 사 업 량 : 가로수 및 초화류 식재, 사후관리(병해충방제 및 수형조절) 등

4. 향후 추진계획

▣ 도시숲 소공원 조성

• 녹지조성 15,000㎡, 수목식재, 편익시설 및 포장 등

▣ 가로수 숲길 조성

• 녹색로 등 8개소 가로수 및 수벽 조성

▣ 완충, 경관녹지 조성사업

• 토지보상 12,000㎡, 수목식재, 산책로 및 편익시설 설치 등

▣ 연도별 사업계획

(단위 : 백만원)

구 분	소 계	2014	2015	2016	2017	2018
도시숲 조성	4,200	800	800	800	900	900
가로수 숲길 조성 및 관리	1,700	300	300	300	400	400
완충, 경관녹지 조성사업	2,325	300	225	500	600	700

(투자 6)  가로경관 조성 및 관리

1. 현황 및 필요성

▣ 21세기 지방시대에 부응, 지역발전을 도모하고 지역특성을 살리기 위해 주요 관광유적지와 연계하여 연중 다양한 꽃을 자체 생산하여 차별화된 꽃거리를 조성하여 다시 찾고 싶은 아름다운 해양관광 중심도시로서의 이미지 부각.

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014 ~ 2018년.

▣ 사 업 비 : 1,824백만원(시비).

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	1,824	319	305	400	400	400
시 비	1,824	319	305	400	400	400

▣ 사업내용 : 사계절 시가지 가로화단 조성, 주요 축제 및 행사장, 주요관광지  꽃단장.

3. 그간 추진실적

▣ 꽃 육묘장 운영 : 7,590㎡(하우스시설 10동 3,150㎡).

▣ 사계절 꽃밭조성 : 겨울철에도 꽃을 감상할 수 있는 재배체계 확립.

▣ 시가지 주요지역 및 행사장 꽃단장.

• 교통섬 꽃동산 12개소 3,770㎡, 삼학도공원 테마화단 등 4개소 3,500㎡, 가로등  꽃걸이화분 7개소 450조, 주요관광지 및 중앙분리대 대형화분 배치 6개소 320개.

• 주요축제 및 행사장 꽃조형물 등 꽃장식 : 10회(유달산꽃축제, 시민의 날 등)

▣ 시가지 도심 공한지, 자투리땅에 꽃밭조성으로 도심환경 개선.

4. 향후 추진계획

▣ 꽃식재 면적 확대 조성.

▣ 꽃육묘 시설 현대화로 안정적인 꽃생산.

▣ 연도별 사업계획

(단위 :백만원)

구 분	소 계	2015	2016	2017
꽃육묘 시설 현대화 사업	150	50	50	50

(투자 7)  도시녹화 사후관리

1. 현황 및 필요성

▣ 조형수목, 상록수목 등 수종별 특색에 맞는 공간배치로 도시경관 개선과

시민이용 편익증진 도모

▣ 각종 재난사고로 인한 수목 응급복구 시 기존수목과 유사한 규격 및 수형

기준을 엄격하게 적용

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014 ~ 2018년

▣ 사 업 비 : 977백만원(시비 977)

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	977	82	145	200	250	300
시 비	977	82	145	200	250	300

3. 그간 추진실적

▣ 시가지 주요지역 수목 유지관리

• 위    치 : 완충녹지지역, 주요 간선도로 가로수 및 수벽

• 사 업 량

- 도시녹화 사업장 유지관리 : 십자형 도시숲, 완충녹지, 쌈지공원 등 450ha

- 가로수 및 수벽 관리 : 느티나무 등 18,000주, 광나무 등 34km

- 시설물 유지관리 : 파고라, 공원등, 바닥분수, 운동기구 등 시설물 관리

▣ 도시녹화 사후관리 및 응급복구

• 사 업 량 : 제초작업, 수벽전정, 병해충 방제, 수목수형조절

가로수가지치기, 옥암지구녹지정비, 수목응급복구

4. 향후 추진계획

▣ 수목응급 복구 및 수목정비 작업

사 업 명	사 업 량	사업기간
제초작업, 수벽전정	제초 250,000㎡/수벽 350,000주	년 4회(3~10월)
병해충 방제	37ha(녹지, 수벽, 가로수)	정기(3, 7월), 수시
서설물 복구	편익시설, 바닥분수 등	년 중
옥암지구 녹지정비	녹지 88,000㎡	년 4회

(투자 8)  철도폐선부지 웰빙공원조성

1. 현황 및 필요성

▣ 폐선부지 웰빙화를 통한 쾌적한 도시경관 조성 및 시민휴식공간 제공.

▣ 주변 취약계층 밀집지역 주거환경 개선으로 삶의 질 향상 및 도시재생을 통한 저탄소 녹색도시 건설.

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2007 ~ 2015년.

▣ 사 업 비 : 26,500백만원(국비 10,000 시비 16,500)

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	8,520	5,510	3,010	-	-	-
국 비	3,810	3,810	-	-	-	-
시 비	4,710	1,700	3,010	-	-	-

▣ 사업내용 : 웰빙공원 및 마을안길 조성.

▣ 사 업 량 :  L=6.2km, A=172,637㎡, 마을안길 조성 5개 노선 L=4.1km, B=6~15m.

3. 그간 추진실적

▣ ‘14년 : 석현웰빙공원 조성 완료 L=0.53km,

동목포웰빙공원 마을안길 조성 완료 L=0.41km

▣ 각종 언로보도 및 홍보 : 신문보도 등 32회

4. 향후 추진계획

▣ ‘15. 1월~’15. 6월 : 석현공원 L=0.41km 완료(예정),

마을안길 L=0.61km 완료(예정).

▣ 연도별 사업계획

구 분	소 계	2014년까지	2015년	2016년이후
계	9.4	8.4	1.0	-
웰빙공원조성	5.9	5.5	0.4	-
마을안길조성	3.5	2.9	0.6	-

(단위 : km)

(투자 9)  근린공원조성사업 추진

1. 현황 및 필요성

▣ 생활권내 인구의 증가로 공원조성을 요구하는 시민의 욕구를 충족하고, 보건 및 정서생활, 삶의 질 향상에 기여하기 위하여 여가공간을 확보하고, 효율적인 도시공원 관리를 추진하기 위해 필요.

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014 ~ 2018년

▣ 사 업 비 : 4,890백만원(시비)

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	4,890	1,030	350	1,010	1,120	1,380
시 비	4,890	1,030	350	1,010	1,120	1,380

▣ 사업내용 : 공원조성계획 용역수립.

▣ 사 업 량 : 근린공원 8개소, 어린이공원 및 소공원 12개소, 체육공원 1개소.

3. 그간 추진실적(성과)

▣ 도시공원 토지보상 : 40필지 3,314백만원.

▣ 공원조성계획 용역수립 : 230백만원.

4. 향후 추진계획

▣ 도시공원 토지보상 및 공원조성계획 용역수립.

▣ 연도별 사업계획

(단위 : 백만원)

	소 계	2014	2015	2016	2017	2018
계	4,890	1,030	350	1,010	1,120	1,380
공원조성계획용역수립	490	30	50	110	120	180
토지보상	4,400	1,000	300	900	1,000	1,200

(투자 10)  도시공원 유지관리

1. 현황 및 필요성

▣ 도시공원의 효율적인 관리와 신속한 민원해소를 위하여 도심내 공원의 유지관리를 실시하여 주변 시민들 및 유동인구의 활용도 제고 필요.

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014 ~ 2018년.

▣ 사 업 비 : 3,170백만원.

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	3,170	380	690	700	700	700
도 비
시 비	3,170	380	690	700	700	700

▣ 위    치 : 90개소(어린이공원 63개소,   근린공원 20개소, 체육공원 1,

소공원 3, 공공용지 3)).

▣ 사 업 량 :

• 도시, 근린공원 및 어린이공원 시설 및 전기시설 개보수 : 260백만원.

• 수목사후관리(제초, 수벽전정, 병해충방제, 수형조절) : 100백만원.

• 수목보식(소나무외  5종 76주) : 20백만원.

3. 그간 추진실적(성과)

▣ 용일어린이공원 체육시설 정비

▣ 부영어린이공원 리모델링 정비

4. 향후 추진계획

▣ 시설물 및 수목 유지관리.

• 공원시설물 개보수, 제초, 수벽전정 등 수목사후관리 및 보식.

▣ 연도별 사업계획

(단위 : 백만원)

구 분	소 계	2014	2015	2016	2017	2018
계	3,170	380	690	700	700	700
공원시설및전기시설개보수	2,320	260	560	500	500	500
수목사후관리및보수	850	120	130	200	200	200

(투자 11)  삼학도 복원화 사업

1. 현황 및 필요성

▣  옛 삼학도의 이미지 재현으로 바다와 면한 친수공간을 조성하여 항구도시의 관광자원화 및 시민의 건전한 휴식공간을 제공하기 위함

▣  목포의 상징인 삼학도를 친환경 생태공간으로 조성하여 시민의 휴계공간 및 서남해안권 해양관광 벨트 구축

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2000 ～ 2018년

▣ 총 사업비 : 139,921백만원(국비 48,675 도비 3,594 시비 87,652)

(단위:백만원)

재원별	총사업비	2014	2015	2016	2017	2018이후
계	22,203	2,000	2,600	4,000	12,103	1,500
국 비	13,400	1,000	2,100	2,000	7,550	750
도 비			-	-	-	-
시 비	8,803	1,000	500	2,000	4,553	750

▣ 사업내용 : 삼학도를 복원 친환경 생태공원으로 조성하여 시민의 휴게공간 제공 및 관광객 유치

▣ 사 업 량 : 공원조성 574,850㎡, 호안수로 2.2km, 교량 10개소 등

3. 그간 추진실적

▣ ‘14년 추진실적

• ‘04. 12. : 삼학도 복원화사업 공원조성공사 착수.

• ‘14.  5. : 삼학도 공원내 철도 선로 철거완료(300m)

• ‘14. 10. : 공원 내 지장물 이설(가로수, 가로등)

• ‘14. 12. : 공원 내 도로철거 및 중앙광장 성토

4. 향후 추진계획

▣ ‘15. 1～12 : 토목 6차분(중앙공원조성) 추진 및 일우조선 부지 보상협의

및 부출입광장, 주차장조성

▣ ‘16.～’18년 : 연차별 사업추진(삼학부두 및 해경전용부지 해변광장 조성 등)

(투자 12)  생태관광을 위한 철새 탐조대 설치

1. 현황 및 필요성

▣ 천연기념물인 검은머리물떼새를 비롯한 도요물떼새, 오리, 갈매기, 왜가리, 백로 등 연간 130여종이 찾아드는 남항은 도시와 인접한 곳으로 철새를 탐조하기 좋고, 국립호남권생물자원관이 건립될 계획으로 철새 탐조와 연계된 생태관광자원 확충.

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2017 ~ 2018년.

▣ 위    치 : 남항 및 영산강하구언 등 철새전문가와 협의하여 선정.

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	50	0	0	0	0	50
시 비	50	0	0	0	0	50

▣ 사 업 비 : 50백만원(시비).

▣ 사 업 량 : 탐조용망원경(고정식) 3대, 목재관찰대(지상1층) 30㎡,

갈대류 가림막 100m, 철새 조류도감, 평의자 4개.

3. 그간 추진실적

▣ 2010년 : 남항 철새탐조대 1기 설치.

- 철새탐조 : 목포시청소년수련관 환경체험프로그램과 연계 초․중등부 탐조활동

한국야생동물보호협회 주관 철새탐조 프로그램 운영 중.

4 세부추진계획

▣ ‘17년 : 용역과제 사전 심의 및 타법 저촉여부 검토 등

▣ ‘18년 : 국립호남권생물자원관 건립과 연계하여 철새탐조대 1기 추가 설치

					분야별 세부사업
					▣ 9. 산림자원 분야

(투자 1)  산림병해충 방제

1. 현황 및 필요성

▣ 산림해충으로 인한 산림 피해는 매년 꾸준한 방제실시로 회복되어가고 있으나 병해충으로 인한 돌발적인 피해 발생을 줄이기 위해 계속적인 예찰조사 실시와 다양한 방법의 방제노력 필요.

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014 ~ 2018년.

▣ 사 업 비 : 247백만원(국비 124  도비 35  시비 88).

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	247	31	66	50	50	50
국 비	124	16	33	25	25	25
도 비	35	4	10	7	7	7
시 비	88	11	23	18	18	18

▣ 사업내용 : 소나무 재선충병 예찰, 기타 산림병해충 예찰 및 방제.

▣ 사 업 량 : 20ha.

3. 그간 추진실적(성과)

▣ 민간컨설팅 및 방제 84건, 관광지 생활권주변 방제작업 100ha.

▣ 소나무재선충병 청정지역 선포 및 유지관리.

4. 향후 추진계획

▣ 과학적․생태적 산림병해충 방제 시스템 구축.

▣ 첨단 예찰시스템 구축 및 네트워크화로 병해충 조기발견, 적기방제.

▣ 연도별 사업계획

(단위 : 단)

	소 계	2014	2015	2016	2017	2018
예찰방제단운영	5	1	1	1	1	1

(투자 2)  산불방지대책 추진

1. 현황 및 필요성

▣ 산림감시 초소현황 : 4개소(양을산(2), 지적산, 유방산).

▣ 산불진화장비 현황 : 21종 719점(창고비치).

•  산불전문예방 진화대 및 감시원 40명.

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014 ~ 2018년.

▣ 사 업 비 : 2,153백만원(국비 823 도비 386  시비 944).

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	2,153	365	434	409	450	495
국 비	823	131	152	163	179	198
도 비	386	65	79	73	80	89
시 비	944	169	203	173	191	208

▣ 사업내용 : 산불진화대 운영, 산불감시 및 진화 장비 구입.

▣ 사 업 량 : 진화대   40명 운영, 진화장비  44점 구입 및 교체.

3. 그간 추진실적(성과)

▣ 산불감시 카메라 1조 2대 설치(2013년) 및 2조 4대 운영

▣ 무인방송기기 설치 : 3개소 3점.

4. 향후 추진계획

▣ 산불진화대 및 감시원 40명 운영계획.

•  매년 40명 내외 진화대 운영.

▣ 연도별 사업계획

(단위 : 백만원)

	소 계	2014	2015	2016	2017	2018
산불진화대운영 및 장비구입	2,153	365	434	409	450	495

(투자 3)  산림의 품질향상을 위한 숲 가꾸기

1. 현황 및 필요성

▣ 목포시의 산림은 30년 이하의 어린나무가 전체산림의 70% 이상을 차지하고 있어 천연림의 생장촉진과 임목형질을 향상시켜 가치있는 산림으로 가꾸기 위해 심는 것 보다 가꾸는 것이 중요하기 때문에 산림자원화지원단을 구성하여 숲가꾸기 실시.

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014 ~ 2018년.

▣ 사 업 비 : 1,751백만원(국비 886   도비 252   시비 613).

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	1751	330	332	363	363	363
국 비	886	167	167	184	184	184
도 비	252	47	49	52	52	52
시 비	613	116	116	127	127	127

▣ 사업내용 : 정책숲가꾸기, 공공산림가꾸기, 칡덩굴제거사업 추진.

▣ 사 업 량 : 130ha.

3. 그간 추진실적(성과)

▣ 큰나무가꾸기 : 1,250ha.

▣ 공공산림가꾸기 사업추진 : 600ha.

4. 향후 추진계획

▣ 정책숲가꾸기, 산림바이오매스 수집, 칡덩굴제거사업 지속 추진.

▣ 연도별 사업계획

(단위 : ha)

구 분	소 계	2014	2015	2016	2017	2018
숲가꾸기사업추진	730	130	150	150	150	150

(투자 4)  산림휴양․문화공간 조성(신규)

1. 현황 및 필요성

▣ 산림자원의 체계적인 이용 및 관리를 통해 시민들의 청정한 자연환경에서 숨쉴 수 있는 욕구를 충족시키기 위하여 산림휴양․문화공간을 조성

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014 ~ 2018년.

▣ 사 업 비 : 5,400백만원(국비 2,700 시비 2,700)

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	5,400	2,600	1,400	400	400	600
국 비	2,700	1,300	700	200	200	300
도 비
시 비	2,700	1,300	700	200	200	300

▣ 사업내용 : 2013. 7월      양을산산림욕장 16ha

2014. 12월    입암산 도시산림공원 조성 10ha

2015 ~ 2017  입암산 생태숲 조성사업 4ha

2018 ~        유달산 근린공원 정비사업 130ha

• 생태숲 조성, 수목식재, 야생화원, 숲길 및 등산로 정비, 안전난간, 휀스 설치, 생태숲 체험 교육장, 실내교육장 조성 등

3. 그간 추진실적

▣ 2013 ~ 2014 : 양을산산림욕장 조성(10ha) 완료

• ‘14년도 추진내용 : 입암산 도시산림공원 조성사업 1단계 추진

- 사 업 량 : 수변테라스, 야외무대, 숲생태 체험교구, 숲생태교육장,

등산로 정비 및 안전난간 신설, 왕벚나무 식재

4. 향후 추진계획

▣ 입암산 생태숲 조성사업 기본 및 실시설계 용역 추진 : ‘15. 02월

• 입암산 생태숲 조성 : ‘15. 3월 착공예정

• 유달산 및 도서지역 생태공원조성 : ‘18년까지 조성지역 확정 추진

					분야별 세부사업
					▣ 10. 기후변화 분야

(투자 1)  시민과 함께하는「환경한마당」추진

1. 현황 및 필요성

▣ 우리지역 환경운동의 효율적인 정책과 내실 있는 실천운동 정착을 위해 민․관 협력 파트너쉽 형성.

▣ 민간주도의 환경보전 운동의 확산을 도모하고 친환경적 지역발전 방향 모색과 자연환경의 소중함을 함께 느끼는 한마당 어울림 행사 추진.

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014~2018년.

▣ 사 업 비 : 60백만원(시비)

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소계	60	12	12	12	12	12
시비	60	12	12	12	12	12

▣ 사업내용 : 환경의 날 및 지구의 날 기념식, 환경한마당 행사 병행 추진

3. 그간 추진실적

▣ 환경한마당 행사 : 1회(개 사회·환경단체 참여) - 연인원 1,500명.

• 녹색나눔장터와 연계하여 행사 병행 추진

• 세월호 사고 및 6. 4 지방선거와 관련하여 2014년도 지구의 날 및 환경의 날 행사는 취소

4. 향후 추진계획

▣ 매년 4월, 6월 지구의 날 및 환경의 날을 기념하는 환경한마당 행사는 온실 가스 저감을 위한 행사별 주제설정 및 다양한 체험 프로그램 운영.

• 지구의 날(매년 4. 22일), 세계환경의 날(매년 6. 5일).

▣ 사회･환경단체에서 시민들의 저탄소 생활 실천에 선두적인 견인차 역할을 할 수 있도록 녹색목포21협의회에서 행사 주관 추진.

(투자 2)  청소년 환경체험 아카데미 운영

1. 현황 및 필요성

▣ 미래의 환경주역인 청소년들에게 자연생태 환경을 직접 보고, 만지고 느낄 수 있는 현장 체험학습이 요구됨.

▣ 청소년들이 환경체험학습을 통해 환경보호의 소중함을 느끼고 생태계 주인의식을 갖는 미래의 환경지도자로 육성.

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014~2018년.

▣ 사 업 비 : 19백만원(국비 13.5  시비 5.5)

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소계	19.0	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
국비	13.5	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
시비	5.5	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1

▣ 사업내용 : 환경체험교육 프로그램 운영.

3. 그간 추진실적

▣ ‘13년도 환경체험 아카데미 운영결과 및 평가 자료집 발간.

▣ ‘14년도 환경체험교육 프로그램 위탁 추진 : 목포시청소년수련관.

• 숲과 하나되기(푸른숲 가꾸기, 숲체험), 해양생태체험(수서생물체험, 갯벌체험, 철새관찰), 하수처리과정(기초환경시설 견학), 그린스타트운동(희망나무심기).

4. 향후 추진계획

▣ 맹꽁이 및 두꺼비 등 지역 야생동물 자원을 활용한 생태체험 교육프로그램 강화

(투자 3)  온실가스 감축 목표 수립

1. 현황 및 필요성

▣ 대기중의 온실가스 농도 증가로 인한 지구온난화는 전 세계 이상기후 현상의 주요 원인으로 지목되고 있어 세계 각국은 기후변화의 심각성을 인식하고 1988년 기후변화에 대한 정부 간 협의체를 구성하여 기후변화 문제에 공동으로 대응하고 있음.

▣ 우리나라는 2020년까지 국가온실가스 감축목표를 배출량대비 30%까지 감축하겠다고 발표하여 기후변화대응노력을 홍보하며 실천의지를 대외적으로 표명함.

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014 ~ 2018년.

▣ 사 업 비 : 60백만원(시비)

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	60	-	60	-	-	-
시 비	60	-	60	-	-	-

▣ 사업내용 : 기후변화적응대책 세부시행계획수립 용역 1식

3. 그간 추진실적

▣ 목포시 기후변화대응 기본계획수립(온실가스 통계) : 2011~2012년.

▣ 온실가스 감축량 : 5.0%

▣ 공공기관 온실가스 에너지 목표관리제 추진 : 43개 시설.

4. 향후 추진계획

▣ 공공기관 온실가스 에너지 목표관리제 지속 추진 : 2015년까지 기준배출량대비 20% 감축.

▣ 기후변화적응대책 세부시행계획 수립용역 추진.

• 용역과제 사전심의 이행 및 2015년 예산확보.

▣ 연도별 사업계획

구분 연도	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
공공기관 목표관리제 시행(%감축)	15	20
온실가스 감축 목표(%감축)	5	7	10	15	20	25	30
기후변화적응대책 세부시행계획 수립용역		1

(투자 4)  그린스타트 네트워크 추진

1. 현황 및 필요성

▣ 2020국내온실가스 배출량 및 감축목표를 보면 가정,상업,공공,수송 등 비산업부문 미래배출량(BAU)은 산업부문에 비해 적음에도 불구하고 감축여력은 오히려 더 많음.

▣ 이에따라 국가온실가스 감축목표 달성을 위해 비산업무분에 대한 감축활성화 지원 및 관리가 필요하므로 가정 등 일상생활에서 온실가스 줄이기를 실천하는 녹색생활 실천운동 추진.

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014 ~ 2018년.

▣ 사 업 비 : 150백만원(국비75 시비75).

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	146	30	26	30	30	30
국 비	73	15	13	15	15	15
시 비	73	15	13	15	15	15

▣ 사업내용 : 일상에서 녹색생활실천 및 녹색생활실천운동 추진.

3. 그간 추진실적(성과)

▣ 녹색생활실천 그린리더 143명 양성, 기후변화교육센터 운영, 탄소포인트제 가입운동, 녹색생활 실천 및 에너지절약 캠페인전개 등.

4. 향후 추진계획

▣ 그린리더(녹색생활실천가) 양성 지속.

▣ 기후변화교육센터 운영.

▣ 가정에너지 진단서비스 실시 및 녹색생활실천 캠페인전개 등.

• 가정에너지 진단사(그린리더 중급과정 이상 수료자)가 신청가구를 방문대기전력을 찾아주고 전기안전사용법 및 전기요금을 줄일 수 있는 컨설팅 실시.

(투자 5)  탄소포인트제 추진

1. 현황 및 필요성

▣ 온실가스 감축으로 경제에 미치는 영향을 최소화하기 위해 가정 및 사업건물 등 비산업부분의 온실가스 감축 비중 확대.

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014 ~ 2018년

▣ 사 업 비 : 500백만원(국비 250 시비 250)

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적	투자계획
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	484	70	84	100	110	120
국 비	242	35	42	50	55	60
시 비	242	35	42	50	55	60

▣ 사업내용 : 가정용 전기사용량 감축으로 온실가스 감축실적에 따라 발생하는 포인트에 상응하는 인센티브 제공.

3. 그간 추진실적

▣ 2009~2014년 : 목포시 가입대상 99,500세대의 11%인 11,000세대 탄소포인트제 가입으로 연간 310톤의 이산화탄소 감축 효과.

4. 향후 추진계획

▣ 매년 일정량의 탄소포인트제 가입목표 설정 및 적극홍보로 가입률을 높여 온실가스 감축 효과로 발생되는 인센티브를 지급하여 참여자의 기대충족.

(투자 6)  녹색목포21협의회 운영 활성화

1. 현 황

▣ 설치근거 : ｢목포시 녹색목포21협의회 설치운영 조례｣.

▣ 녹색목포21협의회(‘97. 4. 22) 구성 : 이해송 의장 외 28명.

• 주요기능 : 의제21 실천을 위한 조사･연구･자문･교육･홍보･ 의견수렴 및 그린스타트 네트워크 운영 등.

▣ 추진사업 : 지구의 날 및 환경의 날 행사, 환경 순회교육, 시민자전거축제, 환경현안문제 토론회 개최, 백서발간 등.

2. 사업개요

▣ 사업기간 : 2014 ~ 2018년.

▣ 사 업 비 : 228백만원(시비).

(단위 : 백만원)
구 분	소 계	투자실적
		2014	2015	2016	2017	2018
소 계	318	33	45	70	70	100
시 비	318	33	45	70	70	100

3. 추진실적

▣ ‘14년도 사무국 이전에 따른 사무집기 구입 지원 : 컴퓨터외 6종

▣ 목포시민 자전거 축제 개최, 환경한마당 축제 개최, 삼학도 복원화 관련 발전방향 토론회, 환경 순회교육 실시(손수건 갖고 다니기 운동 등), 철새 탐조견학 등

4 향후 추진계획

▣ 지방의제21 추진기구 사업비 현실화 추진(조례 개정 등)

• ‘15년 상반기 : 위원 정비, 백서 발간

• ‘15년 하반기 : 녹색목포21협의회 운영․설치 조례 개정(사무국장 인건비 현실화 등)

• ‘16년 이후 : 지방의제21 사업 발굴 및 사업비 증액 확보

▣ 목포지역 환경∙사회단체간 사무국장 연대모임 정례화