정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

사회복지과

②담당자

(전화번호)

보건7급 강신영

사회복지과장 김영숙   (061-270-8446)

③정책사업명

목포시보훈회관 건립  (2017-01)

④선정기준

10억원 이상의 예산이 투입

되는 사업

⑤사업기간

2014.08 ~

2017.12

⑥주요내용

□ 사업의 목적

○ 국가유공자 등 보훈대상 3,700여명의 상호 유대와 편익증진 및

운영의 효율성 제고를 위해 보훈회관 신축 건립

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015 ~ 2017

○ 사 업 량 : 연면적 794.10㎡, 지상 4층 (호남동 9-3외 8필지)

○ 총사업비 : 1,700백만원 (국비 500, 시비 1,200백만원)

□ 추진사항

○ 목포시 공유재산심의회 심의                ‘14.  9월

○ 목포시 지방재정 투․융자 심사             ‘14. 10월

○ 지방보훈회관 건립지원 요청 (국가보훈처)    ‘15.  3월

○ 보훈단체 대표 간담회 및 의견수렴          ‘15.  5월

○ 도시관리계획 결정 변경용역 착수           ‘15.  6월

○ 목포시 용역과제 사전심의                    ‘15. 10월

○ 기본 및 실시설계용역 발주                   ‘15. 11월

○ 지방보훈회관 건립지원 요청 (국가보훈처)      ‘16.  6월

○ 건설기술심의                               ‘16. 11월

○ 2017년 지방보훈회관 건립지원(국비2.5억원)확보  ‘16. 12월

○ 공사 계약 및 착공                               ‘17. 1월

□ 추진계획

○ 공사 준공                                  ‘17. 12월

○ 국비 2.5억원 추가 확보                 ‘17. 4 ~ ‘17.11

□ 연차별 투자 계획

재원별	총 사업비	2015년	2016년	2017년	비 고
계	1,700	152	387	1,161	국가보훈처 지방보훈 회관 건립사업 지원 최대 5억원 (총 사업비 30%)
국 비	500		0	500
시 비	1,200	152	287	661

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-01	담당부서 작성자	(자치행정복지국/사회복지과) (강신영 / 061-270-8446)
정 책 명	목포시보훈회관 건립
사업개요	○ 추진배경 - 現 보훈회관이 40년이상된 노후화된 건물로 시설규모가 협소 □8개 보훈단체중 3개단체만 입주, 5개단체 개인 건물이용 유상사용 - 국가유공자 등 보훈대상 3,700여명의 상호 유대와 편익증진 및 운영의 효율성 제고를 위해 보훈회관 신축 건립 ○ 추진기간 : 2014 ~ 2017 ○ 총사업비 : 1,700백만원 (국비 500, 시비 1,200백만원) ○ 사 업 량 : 연면적 794.10㎡, 지상 4층 (호남동 9-3외 8필지)
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘14. 8. . : 목포시 보훈회관 건립계획 확정 - 관련자 : 사회복지과 주영삼, 책임관 김대식, 과장 차연희 ○ ‘14. 9. . : 목포시 공유재산심의회 심의 - 관련자 : 사회복지과 주영삼, 책임관 김대식, 과장 차연희 ○ ‘14. 10. . : 목포시 지방재정 투융자심사 - 관련자 : 사회복지과 이기훈, 책임관 김대식, 과장 차연희 ○ ‘15. 3. . : 지방보훈회관 건립지원 요청(국가보훈처) - 관련자 : 사회복지과 주영삼, 책임관 김대식, 과장 차연희 ○ ‘15. 5. . : 도시관리계획 결정 변경 - 관련자 : 노인장애인과 김광선, 책임관 박용국, 과장 김혜자 ○ ‘15. 5. . : 보훈단체 대표 간담회 및 의견수렴 - 관련자 : 사회복지과 주영삼, 책임관 김대식, 과장 차연희 ○ ‘15. 10. . : 목포시 용역과제 사전심의 - 관련자 : 사회복지과 주영삼, 책임관 김대식, 과장 차연희 ○ ‘15. 11. . : 기본 및 실시설계용역 발주 - 관련자 : 노인장애인과 김광선, 책임관 박용국, 과장 김혜자 ○ ‘16. 3. . : 설계용역 반영요청 (보훈단체 요구사항 협의) - 관련자 : 사회복지과 주영삼, 책임관 김현진, 과장 한순덕 ○ ‘16. 6. : 지방보훈회관 건립지원 요청(국가보훈처) - 관련자 : 사회복지과 주영삼, 책임관 김대식, 과장 차연희 ○ ‘16. 11. : 목포시 건설기술심의 - 관련자 : 사회복지과 강신영, 책임관 김현진, 과장 한순덕 ○ ‘16. 12. : 지방보훈회관 국비지원예산의 50%(2억5천) 확보 - 관련자 : 사회복지과 강신영, 책임관 김현진, 과장 한순덕 ○ ‘17. 1. 19. : 공사착공 - 관련자 : 노인장애인과 조용선, 책임관 주석재, 과장 박경연

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

노인장애인과

②담당자

(전화번호)

시설6급 조용선

노인장애인과장 박경연

(061-270-8866)

③정책사업명

노인회관 / 노인복지관 신축 이전 (2017-02)

④선정기준

10억원 이상의 예산이 투입

되는 사업

⑤사업기간

2015 ~

2017. 12월

⑥주요내용

□ 사업의 목적

○원도심 지역에 목포시노인복지관(노인회관/노인복지관)을 이전하여 지역사회 노인들의 다양한 복지욕구가 체계적이고 복합적으로 제공될 수 있도록 서비스 기능 확대 추진

□ 사업개요

○ 기   간  : 2015～2017(3년)

○ 장   소  : 호남동 9-6번지 외 8필지(중앙주차장 일부)

○ 규   모  : 부지 1,491㎡,  연면적 2,106㎡(지하1층/지상 4층)

○ 사 업 비 : 39억원(용역비, 감리비, 건립비)

□ 추진사항

○ 공유재산관리계획 승인(시의회)         : ‘14. 11. 19

○ 도시관리계획 결정변경 용역           : '15.  2. 5 ~ 7. 4

○ 목포시 지방재정투융자 심사(적정)      : '15.  6. 15.

○ 기본 및 실시설계 용역 발주           : '15. 11. 17.

○ 특별교부세 교부 결정 (3억 교부)       : '15. 12. 31.

○ 목포시 건설기술 심의                 : '16. 11. 11.

○ 공사 계약                            : '17.  1. 13.

○ 공사 착공                            : '17.  1. 19.

□ 추진계획

○ 공사 준공                            : '17.  12. 14.

□ 연차별 투자 계획                         (단위 : 억원)

구분	계		2015		2016		2017
	예산	확보	예산	확보	예산	확보	예산	확보
계	39	39	1.5	1.5	13	13	24.5	24.5
국비	3	3			3	3
도비
시비	36	36	1.5	1.5	10	10	24.5	24.5

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-02	담당부서 작성자	(자치행정복지국/노인장애과) (조용선 / 061-270-8866)
정 책 명	노인회관 / 노인복지관 신축 이전
사업개요	○ 추진배경 - 노후되고 협소한 노인회관/ 노인복지관을 신축 이전하여 원도심 지역 노인들에게 다양한 복지서비스를 제공코자 함. ○ 추진기간 : 2015년～2017년(3년) ○ 총사업비 : 39억원 ○ 사 업 량 : 부지 1,491㎡, 연면적 2,106㎡(지하1층/지상 4층)
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘14. 11. 19 : 공유재산관리계획 승인 - 관련자 : 노인장애인과 실무관 장효례, 책임관 김경만, 과장 김혜자 ○ ‘15. 2. 5 ~ ’15. 7. 4 : 도시관리계획(주차장)결정변경 용역 - 관련자 : 노인장애인과 실무관 김만재, 책임관 박용국, 과장 김혜자 ○ ‘15. 6. 15 : 목포시 지방재정투자 심사 - 관련자 : 노인장애인과 실무관 장효례, 책임관 박용국, 과장 김혜자 ○ ‘15. 11. 17 : 기본 및 실시설계 용역 발주 - 관련자 : 노인장애인과 책임관 김광선, 책임관 박용국, 과장 김혜자 ○ ‘15. 12. 31 : 특별교부세 교부 결정 (3억 교부) - 관련자 : 노인장애인과 책임관 김광선, 책임관 박용국, 과장 김혜자 ○ ‘16. 11. 11 : 목포시 건설기술 심의 - 관련자 : 노인장애인과 책임관 김광선, 책임관 박용국, 과장 박경연 ○ ‘17. 1. 13 : 공사 계약 - 관련자 : 노인장애인과 책임관 김광선, 책임관 박용국, 과장 박경연 ○ ‘17. 1. 19 : 공사 착공 - 관련자 : 노인장애인과 책임관 조용선, 책임관 주석재, 과장 박경연

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	관광과	②담당자 (전화번호)	시설7급 김현곤 관광과장 조건형 (061-270-8216)
③정책사업명	고하도 유원지 조성사업 (2017-03)
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입 되는 사업	⑤사업기간	2008 ~ 2021
⑥주요내용	□ 사업의 목적 ○ 천혜의 자연조건과 이충무공 유적지가 있는 고하도를 친환경적 체류형 국제 관광휴양지로 개발하고자 함. □ 사업개요 ○ 위 치 : 목포시 달동 고하도 일원 ○ 규 모 : 고하도 2,209,345㎡ ○ 사업기간 : 2008년 ～ 2021년 ○ 사 업 비 : 1,128억원(국비 92, 도비 3, 시비 88, 민자 945) □ 추진사항 ○ ‘08. 4 : 도시계획시설(유원지) 조성계획 변경 결정 ○ ‘08. 6 : 공공부문(도로 등 기반시설) 실시계획 인가 고시 ○ ‘08. 8 ~‘15. 3 : 도로개설(L=5.17㎞), 주차장(54면) 조성 ○ ‘16. 5 : 고하도 유원지 조성계획 변경용역 추진 ○ ‘17. 3 : 고하도 유원지 조성계획(궤도 및 주차장 반영) 변경 □ 세부내역 ○ 공공 : 도로, 주차장 ○ 민간 : 충무공연수원, 테마파크, 숙박시설, 케이블카, 마리나, 골프장(9홀), 상업시설 등 □ 추진계획 ○ ’17. 12 : 고하도 유원지 조성계획 변경용역 완료 ○ ’18. 1 : 공공부문 사업추진 및 민간자본 유치

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-03	담당부서 작성자	(관광경제수산국/관광과) (김현곤/061-270-8216)
정 책 명	고하도 유원지 조성사업
사업개요	○ 추진배경 ∙천혜의 자연조건과 이충무공 유적지가 있는 고하도를 친환경적 체류형 국제 관광휴양지로 개발하고자 함. ○ 추진기간 : 2008년 ～ 2021년 ○ 총사업비 : 1,128억원(국비 92, 도비 3, 시비 88, 민자 945) ○ 주요내용 : 유원지 조성 2,209,345㎡
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘16. 3 : 도로개설(L=5.17㎞), 주차장(54면) 조성 ∙관련자 : 관광과 과장 김천환, 책임관 구 준, 실무관 김현곤 ○ ‘16. 5 : 고하도 유원지 조성계획 변경용역 추진 ∙관련자 : 관광과 과장 조건형, 책임관 구 준, 실무관 김현곤 ○ ‘17. 3 : 고하도 유원지 조성계획(궤도 및 주차장 반영) 변경 ∙관련자 : 관광과 과장 조건형, 책임관 김광호, 실무관 김현곤

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	관광과	②담당자 (전화번호)	시설7급 김현곤 관광과장 조건형 (061-270-8216)
③정책사업명	목포 해상케이블카 설치 사업 (2017-04)
④선정기준	주요시정현안	⑤사업기간	2016 ~ 2018
⑥주요내용	□ 사업의 목적 ○ 자연경관이 수려한 유달산과 고하도간 해상케이블카를 설치하여 우리시의 랜드마크적인 관광인프라 구축 □ 사업개요 ○ 위 치 : 유달산 일원 ~ 고하도 일원 ○ 구 간 : 유달산 리라유치원 앞 ↔ 마당바위 밑(관운각 인근) ↔ 고하도 공생재활원 상부 ○ 연 장 : 총 3.23㎞(해상 0.82, 육상 2.41) ○ 시행방법 : 민간자본유치(498억원) ○ 사업기간 : 2016 ~ 2018 □ 추진사항 ○ 2015. 4 ~ 9 : 해상케이블카 타당성 검토 및 기본구상 용역 수행 ○ 2015. 6 : 시민여론조사 시행(시민 74.4% 필요성 공감) ○ 2015. 7 : 공청회 2회 개최 ○ 2015. 10 : 해상케이블카 민간사업자 모집 공고 ○ 2016. 3 : 실시협약 체결 ○ 2016. 5 : 도시관리계획(궤도) 결정 용역 착수 ○ 2017. 2 : 도시관리계획(궤도) 결정 □ 추진계획 ○ 2017. 5 : 해상케이블카 실시계획 인가 ○ 2017. 6 ~ 2018. 4 : 사업 착공 및 준공

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-04	담당부서 작성자	(관광경제수산국/관광과) (김현곤/061-270-8216)
정 책 명	목포 해상케이블카 설치 사업
사업개요	○ 추진배경 ∙자연경관이 수려한 유달산과 고하도간 해상케이블카를 설치하여 우리시의 랜드마크적인 관광인프라 구축 ○ 추진기간 : 2016년 ～ 2018년 ○ 시행방법 : 민간자본유치(498억원) ○ 연 장 : 총 3.23㎞(해상 0.82, 육상 2.41)
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 2015. 4 ~ 9 : 해상케이블카 타당성 검토 및 기본구상 용역 수행 ∙관련자 : 관광과 과장 김천환, 책임관 구 준, 실무관 김현곤 ○ 2015. 6 : 시민여론조사 시행(시민 74.4% 필요성 공감) ∙관련자 : 관광과 과장 김천환, 책임관 구 준, 실무관 김현곤 ○ 2015. 7 : 공청회 2회 개최 ∙관련자 : 관광과 과장 김천환, 책임관 구 준, 실무관 김현곤 ○ 2015. 10 : 해상케이블카 민간사업자 모집 공고 ∙관련자 : 관광과 과장 조건형, 책임관 구 준, 책임관 김광호 ○ 2016. 3 : 실시협약 체결 ∙관련자 : 관광과 과장 조건형, 책임관 구 준, 책임관 김광호 ○ 2016. 5 : 도시관리계획(궤도) 결정 용역 착수 ∙관련자 : 관광과 과장 조건형, 책임관 구 준, 책임관 김광호 ○ 2017. 2 : 도시관리계획(궤도) 결정 ∙관련자 : 관광과 과장 조건형, 책임관 김광호, 실무관 김현곤

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

일자리정책과

②담당자

(전화번호)

공업7급 최용석

일자리정책과장 김상호

(270-3357)

③정책사업명

도시가스공급 보조사업  (2017-05)

④선정기준

10억원이상 예산사업

⑤사업기간

2007.~2020.

⑥주요내용

❐ 목   적 : 주민의 생활환경 개선을 위해 도시가스 공급사업을      추진 함으로써 신･원도심 기회균등 및 경제적 부담감 해소

❐ 근   거 : 도시가스공급 보조금지원 및 관리조례(‘14.12.29 개정)

❐ 지원대상 : 공급관 길이 100미터당 10세대이상 45세대 미만구간

❐ 연도별 확대 지원계획

(단위 : 세대, 억원)

구 분	계	2016년	2017년
공급세대	2,496	1,505	991
지 원 액	30	15	15

※ ‘07 ~ ’16년까지 도시가스 공급실적 : 9,660세대, 87억원

❐ 2017년 추진계획

○ 2017년도 사업추진(46개구간 1,415세대, 15억원)

□ ‘16. 12월~’17. 1월  사업추진에 따른 주민설명회 개최

□ ‘17. 1 ~  7월  공급대상 구간 선정, 지정물 조사 및 설계

□ ‘17. 2 ~ 12월  공사착공 및 준공

❐ 기대효과

○ 시민 연료비 절감으로 편익증진 및 생활 불편 해소

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-05	담당부서 작성자	(기획관리국/일자리정책과) (최용석/270-3357)
정 책 명	도시가스공급 보조사업
사업개요	○ 추진배경 - 도시가스 미공급지역 연료취약계층의 연료사용 환경개선 ○ 추진기간 : 2007. ∼ 2020. ○ 총사업비 : 13,300백만원 ○ 주요내용 - 도시가스공급 추진계획 수립 - 보조사업 구간 신청서 검토 및 동별 주민설명회 개최 - 도시가스공급 보조사업비 교부
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 07.1.22 : 원도심도시가스공급 보조사업 추진 (6개구간 259세대, 200백만원) - 관련자 : 농상과 담당자 최용석, 담당 문명식, 과장 김장흥, 국장 추영동, 부시장 이종범, 시장 정종득 ○ 08.02.18 : 원도심도시가스공급 보조사업 추진 (14개구간 580세대, 500백만원) - 관련자 : 농상과 담당자 최용석, 담당 문명식, 과장 홍철수, 국장 추영동, 부시장 이점관, 시장 정종득 ○ 09.06.01 : 원도심도시가스공급 보조사업 추진 (11개구간 530세대, 1000백만원) - 관련자 : 농상과 담당자 최용석, 담당 문명식, 과장 이현진, 국장 강행백, 부시장 이점관, 시장 정종득 ○ 10.06.01 : 원도심도시가스공급 보조사업 추진 (12개구간 562세대, 600백만원) - 관련자 : 농상과 담당자 최용석, 담당 문명식, 과장 이현진, 국장 강행백, 부시장 이점관, 시장 정종득 ○ 11.02.21 : 원도심도시가스공급 보조사업 추진 (12개구간 562세대, 600백만원) - 관련자 : 농상과 담당자 제갈명, 담당 문명식, 과장 정현채, 국장 김윤식, 부시장 주동식, 시장 정종득 ○ 12.02.03 : 원도심도시가스공급 보조사업 추진 (12개구간 562세대, 600백만원) - 관련자 : 농상과 담당자 제갈명, 담당 문명식, 과장 정현채, 국장 박영호, 부시장 주동식, 시장 정종득 ○ 13.2.29 : 원도심도시가스공급 보조사업 추진 (37개구간 1033세대, 900백만원) - 관련자 : 농상과 담당자 박동구, 담당 김영준, 과장 조부갑, 국장 박영호, 부시장 윤진보, 시장 정종득 ○ 14.2.25 : 원도심도시가스공급 보조사업 추진 (38개구간 1,542세대, 1230백만원) - 관련자 : 농상과 담당자 신성원, 담당 김영준, 과장 조부갑, 국장 김찬익, 부시장 윤진보, 시장 정종득 ○ 15.3.29 : 도시가스공급 보조사업 추진 (54개구간 1,550세대, 1230백만원) - 관련자 : 농업산업과 담당자 신성원, 담당 권승현, 과장 김석우, 국장 김문옥, 부시장 윤진보, 시장 박홍률 ○ 15.10.01 : 도시가스공급 보조사업 수요조사 - 조사기간 : ‘15. 10. 1. ~ 12. 31.(3개월) - 대상지역 : 원도심지역 19개동(신흥,옥암,부흥,부주동 기조사 완료) - 관련자 : 농업산업과 담당자 신성원, 담당 이정순, 과장 김석우, 국장 김문옥, 부시장 이재철, 시장 박홍률 ○ 16.11.18 : 도시가스 공급 3차 계획 수립 - 공급기간 : 2018년 ~2020년 - 공급구간 및 세대 : 84개구간 1,898 세대 - 소요예산 : 30억원 - 관련자 : 농업산업과 담당자 최용석, 담당 이정순, 과장 김석우, 국장 송명완, 부시장 이인곤, 시장 박홍률 ◌ 16.12.07 : 2017년 도시가스공급 보조사업 추진 (40개구간 991세대, 1500백만원) - 관련자 : 농업산업과 담당자 최용석, 담당 이정순, 과장 김석우, 국장 송명완, 부시장 이인곤, 시장 박홍률

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

교통행정과

②담당자

(전화번호)

시설7급 나창영

교통행정과장 김철준

(061-270-8293)

③정책사업명

화물자동차 공영차고지 건립 (2017-06)

④선정기준

10억원 이상의 예산이 투입

되는 사업

⑤사업기간

2015.01.00 ~   2018.12.00

⑥주요내용

□ 사업의 목적

○ 화물물류기지로서의 역할을 수행할 수 있는 화물 공영차고지      확충으로 지역간 균형개발을 도모하고, 불법주정차 민원      해결을 통한 쾌적한 교통 환경 조성

□ 사업개요

○ 위    치 : 대양동 대양일반산업단지 내

○ 사 업 량 : 91,510㎡(27,682평)

600대(주차장, 휴게·정비·관리동 등)

○ 사 업 비 : 360억원(부지매입 244, 공사비 등 116)

- 재   원 : 국비(지특) 252억원(70%), 시비 108억원(30%)

□ 추진사항

○ ‘15.  5. : 중앙 투자심사 승인(행자부)

○ ‘15.  6. : 공유재산심의 완료

○ ‘15. 10. : 중기지방재정 반영

○ ‘15. 12. : 산단업종(개발계획) 변경

○ ‘16.  1. : 부지매입 착수

○ ‘17.  2. : 부지 일부매입

□ 추진계획

○ ‘17. 6. : 사업 추진 방식 결정 및 세부계획 수립

○ ‘17. 7. ~ ‘18. 12. : 기본·실시설계 등 행정절차 이행 및 차고지 조성

□ 연차별 예산 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총 계		2016년 까지		2017년 추진		2018년 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
차고지 건립	차고지	36,000	타당성 용역	11,420	공사	8,572	공사	16,008

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-06	담당부서 작성자	(안전도시건설국/교통행정과) (나창영/061-270-8293)
정 책 명	화물자동차 공영차고지 건립
사업개요	○ 추진배경 - 화물물류기지로서의 역할을 수행할 수 있는 화물 공영차고지확충으로 지역간 균형개발을 도모하고, 불법주정차 민원 해결을 통한 쾌적한 교통 환경 조성 ○ 추진기간 : 2015 ~ 2018 ○ 사 업 비 : 360억원(부지매입 244, 공사비 등 116) - 재 원 : 국비(지특) 252억원(70%), 시비 108억원(30%) ○ 주요내용 : 91,510㎡(27,682평) 600대(주차장, 휴게·정비·관리동 등)
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 2015. 5. 24 : 중앙 투자심사 승인(행자부) - 관련자 : 교통행정과 담당자 나창영, 책임관 백성숙, 과장 박경연 ○ 2015. 6. 9 : 공유재산심의 완료 - 관련자 : 교통행정과 담당자 나창영, 책임관 백성숙, 과장 박경연, 국장 박옥주 ○ 2015. 10. : 중기지방재정 반영 - 관련자 : 교통행정과 담당자 나창영, 책임관 김성호, 과장 박경연 ○ 2015. 12. 30 : 산단업종(개발계획) 변경 - 관련자 : 교통행정과 담당자 나창영, 책임관 김성호, 과장 박경연 ○ 2016. 1. 30 : 부지매입 착수 - 관련자 : 교통행정과 담당자 나창영, 책임관 김성호, 과장 박경연, 국장 윤인영, 부시장 이재철, 시장 박홍률 ○ 2017. 2. 28 : 부지 일부매입 - 관련자 : 교통행정과 담당자 나창영, 책임관 김성호, 과장 박경연, 국장 김찬익, 부시장 이인곤, 시장 박홍률

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

교육체육과

②담당자

(전화번호)

시설7급 유재희

교육체육과장 김종진       (061-270-3677)

③정책사업명

목포야구장 건립 (2017-07)

④선정기준

10억원 이상의 예산이 투입

되는 사업

⑤사업기간

2015.01.01 ~   2017.12.30

⑥주요내용

□ 사업의 목적

○ 대양산단 진입도로 개설에 따른 접근성 향상과 축구센터의

스포츠마케팅 확충시너지 효과

○ 야구동호인의 생활야구 활성화 저변확대

□ 사업개요

○ 위    치 : 대양동 958번지 일원(목포국제축구센터 옆)

○ 규    모 : 조성면적 12,900㎡(야구장 99m×122m)

○ 조성시설 : 야구장(울타리), 덕아웃, 주차장, 기타 부대시설

○ 총사업비 : 4,500백만원(국비 400, 시비 4,100)

□ 추진사항

○ '15. 01.～12. : 공유재산 심의, 투자심사 승인, 도시계획(변경) 용역 등

○ '16. 05. : 도시관리계획(체육시설)변경 결정 및 고시

○ '16. 08. : 도시계획사업(야구장) 실시계획인가 고시

○ '16. 09. : 편입부지 보상열람 공고

○ '16. 12. : 토지매입 및 시공자 선정

○ '17. 01. : 공사 착공

□ 추진계획

○ '17. 상반기 : 예산 미 확보액 추경반영(토지 보상비, 공사비)

○ '17. 12. : 야구장 건립공사 완료

○ '18. 03. : 야구동호회 목포리그 개막식

□ 연차별 예산 투자 계획

구 분	총 계		2016년 추진		2017년 이후
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
공사 및 보상	12,900㎡ (99m×122m)	4,900	공사발주 부지매입	1,600	부지매입 공사완료	2,900

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-07	담당부서 작성자	(교육문화사업단 / 교육체육과) (유재희 / 061-270-3677)
정 책 명	목포야구장 건립
사업개요	○ 추진배경 : 생활야구 활성화 및 지방체육시설 확충 ○ 추진기간 : 2015. 01. 01. ～ 2017. 12. 31. ○ 총사업비 : 4,900백만원(국비 400, 시비4,100) ○ 사 업 량 : 조성면적 12,900㎡(야구장 99m×122m)
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘15.01.01.～15.12.31. : 야구장 조성관련 설계용역 실시 - 관련자 : 스포츠산업과 김일준/이용대, 책임관 최성철, 과장 김용갑 ※ 용역내용 - 4건(용역감독 도시계획과 차태명) - 야구장건립 도시관리계획시설(체육시설)결정 수립 용역 - 야구장건립 도시관리계획시설결정 교통 및 재해성검토 용역 - 야구장건립 도시관리계획시설결정 전략환경영향평가 용역 - 목포시 야구장 조성사업을 위한 기본 및 실시설계용역 ○ ‘15.03.18. : 시의회 공유재산 관리계획 승인 - 관련자 : 스포츠산업과 김일준, 책임관 최성철, 과장 김용갑 ○ ‘15.06.15. : 목포시 지방재정 투자심사 승인 - 관련자 : 스포츠산업과 김일준, 책임관 최성철, 과장 김용갑 ○ ‘15.11.27. : 도시관리계획(체육시설)결정 심의 - 관련자 : 스포츠산업과 이용대, 책임관 김오심, 과장 김용갑 ○ ‘16.01.07. : 지방건설기술심의 - 관련자 : 스포츠산업과 이용대, 책임관 김오심, 과장 김용갑 ○ ‘16.05.26. : 도시관리계획(체육시설)변경 결정 및 고시 - 관련자 : 스포츠산업과 김상문, 책임관 김오심, 과장 김종진 ○ ‘16.08.05. : 도시계획사업(야구장) 실시계획인가 고시 - 관련자 : 스포츠산업과 김상문, 책임관 김오심, 과장 김종진 ○ ‘16.09.28. : 편입부지 보상열람 공고 - 관련자 : 스포츠산업과 김상문, 책임관 김오심, 과장 김종진 ○ ‘17.01.12. : 건립공사 착공 - 관련자 : 스포츠산업과 김상문, 책임관 김오심, 과장 김종진

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	하수과	② 담당자 (연락처)	시설8급 백무황 하수과장 권장주 (270-3537)
③정책사업명	대양이로하수처리분구 연계처리 시설사업 (2017-08)
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2010~2018년
⑥주요내용	○ 추진목적 : 하수 미처리구역인 대양하수처리분구의 하수를 북항 하수처리시설에 연계 처리하여 공공수역 수질오염예방과 쾌적한 도시환경 조성 ○ 위 치 : 목포시 대양동 국도1호선 대체우회도로 일원 ○ 사 업 량 : 중계펌프장 2개소, 압송관 5.1km ○ 사 업 비 : 9,681백만원(국비 4,840, 도비 483, 시비 4,358) ○ 사업기간 : 2010년 ~ 2017년 ○ 주요 추진사항 - 2010. 6. ~ 2014. 4. : 기본 및 실시설계용역 - 2010. 7. : 지방재정투융자 승인(전라남도) - 2011. 11. : 중기지방재정계획 반영 - 2013. 3. : 공사 착공(총괄 및 1차분) - 2013. 6. : 2차분 공사 착공(2014. 8. 준공) - 2013. 8. : 1차분 공사 준공 - 2013. 12. : 3차분 공사 착공 - 2014. 6. : 전기공사 1차분 착공 - 2015. 5. : 압송관로 5.1km중 4.9km 매설 완료 - 2015. 8. : 4차분 공사 착공 - 2016. 4. : 4차분 공사 준공 - 2016. 10. : 이로중계펌프장 시운전 ○ 사업추진계획 - 2017. 1. ~ 2018. 12. : 잔여구간 공사추진 및 완료

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-08	담당부서 작성자	(상하수도사업단/하수과) (백무황/270-3537)
정 책 명	대양이로 하수처리분구 연계처리 시설사업
사업개요	○ 추진배경 - 하수 미처리구역인 대양하수처리분구의 하수를 북항 하수 처리시설에 연계 처리하여 공공수역 수질오염예방과 쾌적한 도시환경 조성 ○ 추진기간 : 2010년 ~ 2018년 ○ 총사업비 : 9,681백만원(국비 4,840, 도비 483, 시비 4,358) ○ 주요내용 - 중계펌프장 2개소, 압송관 5.1km
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 2013. 3. : 공사 착공(총괄 및 1차분) - 관련자 : 시장 정종득, 부시장 주동식, 상하수도사업단장 박소영 하수과장 조용선, 하수담당 황용규 ○ 2013. 8. : 1차분 공사 준공 - 관련자 : 하수과장 손상돈, 하수담당 이상호 ○ 2014. 8. : 2차분 공사 준공 - 관련자 : 하수과장 이상호, 하수담당 김정수 ○ 2015. 5. : 3차분 공사 준공 - 관련자 : 하수과장 이상호, 하수담당 김정수 ○ 2015. 6. : 4차분 공사 착공 - 관련자 : 하수과장 이상호, 하수담당 김정수 ○ 2016. 4. : 4차분 공사 준공 - 관련자 : 하수과장 권장주, 하수담당 김명봉

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	하수과	② 담당자 (연락처)	시설8급 백무황 하수과장 권장주 (270-3537)
③정책사업명	용해2지구∼백련펌프장 하수관거 정비사업(2017-09)
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2014~2020년
⑥주요내용	○ 추진목적 : 용해2지구 일원의 배수유역에서 발생되는 우수를 신속히 배제하여 침수방지 및 쾌적한 도시환경 조성 ○ 위 치 : 목포시 용해2지구~백련펌프장(압해대교 아래) ○ 사 업 량 : 하수관거 정비 L=1.58km ○ 사 업 비 : 18,550백만원(국비 12,985, 지방비 5,565) ○ 사업기간 : 2014년 ~ 2020년 ○ 주요 추진사항 - 2011. 10 : 지방재정투융자 심사 (전남도) - 2014. 3. : 기본 및 실시설계용역 착수 - 2014. 10. : 전략환경영향평가용역 착수 - 2014. 11. : 도시관리계획 변경결정 용역 착수 - 2015. 1. : 도시관리계획 변경 결정을 위한 입안 요청(도시계획과) - 2015. 2. : 설계자문(전남도) - 2015. 4. : 건설기술심의(전남도) - 2015. 9. : 도시계획시설사업 실시계획 인가고시 - 2016. 1. : 토지 및 지장물 보상 추진 - 2016. 10. : 공사 착공 ○ 사업추진계획 - 2017. 1. ~ 2020. 12. : 공사 추진

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-09	담당부서 작성자	(상하수도사업단/하수과) (백무황/270-3537)
정 책 명	용해2지구∼백련펌프장 하수관거 정비사업
사업개요	○ 추진배경 - 용해2지구 일원의 배수유역에서 발생되는 우수를 신속히 배제 하여 침수방지 및 쾌적한 도시환경 조성 ○ 추진기간 : 2014년 ~ 2020년 ○ 총사업비 : 18,550백만원(국비 12,985, 지방비 5,565) ○ 주요내용 - 하수관거 정비 L=1.58km
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 2013. 10. : 기본 및 실시설계용역 계획보고 - 관련자 : 시장 정종득, 부시장 윤진보, 상하수도사업단장 김문옥 하수과장 손상돈, 하수담당 이상호 ○ 2014. 3. : 기본 및 실시설계용역 착수 - 관련자 : 하수과장 손상돈, 하수담당 김정수 ○ 2014. 11. : 도시관리계획 변경결정 용역 착수 - 관련자 : 상하수도사업단장 김치중, 하수과장 이상호, 하수담당 김정수 ○ 2015. 2∼4. : 설계자문 및 건설기술심의(전남도) - 관련자 : 하수과장 이상호, 하수담당 김정수 ○ 2015. 9. : 도시계획시설사업 실시계획인가고시 - 관련자 : 하수과장 이상호, 하수담당 김명봉 ○ 2016. 10. : 공사 착공 - 관련자 : 하수과장 권장주, 하수담당 김명봉

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	하수과	②담당자 (연락처)	시설8급 백무황 하수과장 권장주 (270-3537)
③정책사업명	상동 초기우수처리시설 설치사업(2017-10)
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2010년~2018년
⑥주요내용	○ 사업개요 - 목 적 : 초기우수의 적정처리로 공공수역 수질오염 예방과 버스터미널 앞 저지대 상습 침수문제 해소 - 위 치 : 목포시 상동 버스터미널 앞 - 사 업 비 : 15,609백만원(국비 10,926, 시비 4,683) - 사업기간 : 2010년 ~ 2018년 - 규모(사업량) : 저류조 V=10,000㎥, 차집시설 1식, 우수 암거개량 125m, 조경시설물 철거 및 복구 ○ 사업추진현황 - ‘09. 4. 30 : 전라남도 지방 재정투ㆍ융자 심사 - ‘10. 1. 28. : 기본 및 실시설계 착수 - ‘12. 2. 27. : 전라남도 지방건설기술심의 - ‘13. 4. 15. : 기본 및 실시설계 준공 - ‘13. 4. 23. : 1단계 공사 착공 - ‘16. 1. 22. : 초기우수저류조V=10,000㎥, 기계실 1식 공사 준공(1단계) - ‘16. 3. 30. : 2단계 공사 착공 ○ 사업추진계획 - ‘17. 1. : 2단계 1차분 공사준공 - ‘17. 3. ~ : 2단계 2차분 공사착공 및 잔여공사 추진

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-10	담당부서 작성자	(상하수도사업단/하수과) (백무황/270-3537)
정 책 명	상동 초기우수처리시설 설치사업
사업개요	○ 추진배경 - 초기우수의 적정처리로 공공수역 수질오염 예방과 버스터미널 앞 저지대 상습 침수문제 해소 ○ 추진기간 : 2010년 ~ 2018년 ○ 총사업비 : 15,609백만원(국비 10,926, 시비 4,683) ○ 주요내용 - 저류조 V=10,000㎥, 차집시설 1식, 우수암거개량 125m, 조경시설물 철거 및 복구
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 2010. 1. : 기본 및 실시설계용역 착수 - 관련자 : 하수과장 손상돈, 하수담당 이상호 ○ 2013. 4. : 1단계 공사착공 - 관련자 : 하수과장 손상돈, 하수담당 김정수 ○ 2016. 1. : 1단계 공사준공 - 관련자 : 하수과장 권장주, 하수담당 김명봉 ○ 2016. 3. : 2단계 공사착공 - 관련자 : 하수과장 권장주, 하수담당 김명봉 ○ 2016. 10. : 2단계 우수암거 설치공사 완료 - 관련자 : 하수과장 권장주, 하수담당 김명봉

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	하수과	②담당자 (전화번호)	시설7급 정성훈 하수과장 권장주 (270-8627)
③정책사업명	북항공공하수처리시설 고도처리 설치사업(2017-11)
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2012~2018년
⑥주요내용	○ 사업개요 - 목 적 : 북항 하수종말처리시설의 영양염류를 고도처리하여 방류수 수질기준 준수로 공공수역 수질 개선 - 위 치 : 북항하수처리시설 내 - 사업비 : 10,601백만원(국비 5,301, 도비 225, 시비 5,075) - 사업기간 : 2012년 ~ 2018년 - 규모(사업량) : 고도처리 Q=35,000㎥/일 ○ 사업추진현황 - ‘10. 5. 6. : 지방재정 투․융자 심사 완료 - ‘12. 5. 25. : 기본 및 실시설계용역 착수 - ‘14. 2. 25. : 공법 2차평가 완료 - ‘14. 6. 10 : 목포시 건설기술심의 - ‘14. 9. 16 : 설계자문(전남도) 및 재원협의(영산강청) - ‘14. 12. 8 : 총사업비 변경 승인(7,944백만원→10,601백만원) - ‘14. 12. 16 : 실시설계 용역 준공 - ‘14. 12. 18 : 공공하수도 설치(변경) 인가 - ‘15. 2. 2 : 전라남도 계약심사 - ‘15. 4. 3 : 목포시 계약심의위원회 심의 - ‘15. 4. 13 : 목포시 일상감사 - ‘15. 7. 21 : 공사계약 의뢰 - ‘15. 11. 20 : 총괄분 및 1차분 착공 - ‘16. 4. 29 : 2차분 착공 - ‘16. 6. 14 : 전기 및 계측제어공사(총괄분 및 1차분) 착공 - ‘17. 3. 23 : 2차분 공사 준공 - ‘17. 3. 27 : 3차분 공사 착공

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-11	담당부서 작성자	(상하수도사업단 / 하수과) (정성훈/061-270-8627)
정 책 명	북항공공하수처리시설 고도처리 설치사업
사업개요	○ 추진배경 - 북항 하수종말처리시설의 영양염류를 고도처리하여 방류수 수질기준 준수로 공공수역 수질개선 ○ 추진기간 : 2012 ~ 2018년 ○ 총사업비 : 10,601백만원 ○ 주요내용 : 고도처리 Q=35,000㎥/일
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 12. 3. 13 : 고도처리 추진계획 보고 - 관련자 : 하수과 담당자 백무황, 책임관 황용규, 과장 조용선 ○ 12. 5. 25 : 기본 및 실시설계용역 착수 - 관련자 : 하수과 담당자 백무황, 책임관 황용규, 과장 조용선 ○ 14. 6. 10 : 목포시 건설기술심의 - 관련자 : 하수과 담당자 백무황, 책임관 황용규, 과장 조용선 ○ 14. 9. 16 : 설계자문(전라남도) 및 재원협의(영산강청) - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김정수, 과장 손상돈 ○ 14. 12. 16 : 기본 및 실시설계용역 준공 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김정수, 과장 손상돈 ○ 14. 12. 18 : 공공하수도 설치(변경) 인가 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김정수, 과장 이상호 ○ 15. 2. 2 : 전라남도 계약심사 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김정수, 과장 이상호 ○ 15. 4. 3 : 목포시 계약심사위원회 심의 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김정수, 과장 이상호 ○ 15. 4. 13 : 목포시 일상감사 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김정수, 과장 이상호 ○ 15. 4. 20 : 목포시 일상감사(전기 및 계측제어) - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김정수, 과장 이상호 ○ 15. 11. 20 : 총괄분 및 1차분 공사 착공 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김명봉, 과장 이상호 ○ 16. 4. 29 : 2차분 공사 착공 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김명봉, 과장 권장주 ○ 16. 4. 29 : 전기 및 계측제어공사(총괄분 및 1차분) 착공 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김명봉, 과장 권장주 ○ 16. 5. 15 : 1차분 공사 준공 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김명봉, 과장 권장주 ○ 16. 6. 14 : 전기 및 계측제어공사(총괄분 및 1차분) 착공 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김명봉, 과장 권장주 ○ 17. 3. 23 : 2차분 공사 준공 - 관련자 : 하수과 담당자 정성훈, 책임관 김명봉, 과장 권장주 ○ 17. 3. 27 : 3차분 공사 착공 - 관련자 : 하수과 담당자 정성훈, 책임관 김명봉, 과장 권장주

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	하수과	②담당자 (전화번호)	시설7급 정성훈 하수과장 권장주 (270-8627)
③정책사업명	남악신도시 하수처리시설 증설사업(2017-12)
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2013~2018년
⑥주요내용	○ 사업개요 - 목 적 : 남악신도시의 활성화로 유입인구의 지속증가에 따른 하수처리량 증가로 하수처리시설 증설 - 위 치 : 목포시 옥암동 1376번지 일원 - 사업비 : 26,547백만원(목포시 11,609, 전남개발공사 14,938) - 사업기간 : 2013년 ~ 2017년 - 규모(사업량) : 시설용량 10,000㎥/일 증설 ○ 사업추진현황 - ‘13. 2. 26 : 하수처리장 증설사업 계획보고 - ‘13. 4. 15 : 하수처리장(2단계) 증설에 따른 협약 - ‘13. 5. 9 : 기본 및 실시설계 용역착수 - ‘13. 8. 1 : 도 투·융자 심사 조건부 승인 - ‘13. 8. 30 : 10,000㎥/일 증설 실무협의 결정 (무안군, 전남개발공사) - ‘14. 7. 28 : 지반조사용역 완료 - ‘14. 12. 15 : 설계 경제성(VE) 검토 - ‘15. 1. 29 : 전라남도 건설기술심의 - ‘15. 3. 26 : 기본 및 실시설계용역 준공 - ‘15. 5. 26 : 조달청 원가심사 - ‘15. 6. 15 : 일상감사 - ‘15. 7. 14 : 공공하수도설치(변경) 인가 - ‘15. 9. 22 : 목포시 계약심의위원회 심의 - ‘15. 12. 9 : 총괄분 및 1차분 착공 - ‘16. 4. 29 : 2차분 착공 - ‘16. 6. 21 : 전기 및 계측제어공사(총괄분 및 1차분) 착공 - ‘16. 10. 4 : 1차분 준공 - ‘17. 3. 15 : 3차분 착공

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-12	담당부서 작성자	(상하수도사업단 / 하수과) (정성훈/061-270-8627)
정 책 명	남악신도시 하수처리시설 증설사업
사업개요	○ 추진배경 - 남악신도시 활성화로 유입인구의 지속증가에 따른 하수처리량 증가로 하수처리시설 증설 ○ 추진기간 : 2013 ~ 2018년 ○ 총사업비 : 26,547백만원 ○ 주요내용 : 시설용량 10,000㎥/일 증설
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 13. 2. 26 : 하수처리장 증설사업 계획보고 - 관련자 : 하수과 담당자 백무황, 책임관 황용규, 과장 조용선 ○ 13. 4. 15 : 하수처리장(2단계) 증설에 따른 협약 - 관련자 : 하수과 담당자 백무황, 책임관 황용규, 과장 조용선 ○ 13. 5. 9 : 기본 및 실시설계 용역착수 - 관련자 : 하수과 담당자 백무황, 책임관 황용규, 과장 조용선 ○ 13. 8. 1 : 도 투·융자 심사 조건부 승인 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 이상호, 과장 손상돈 ○ 13. 8. 30 : 10,000㎥/일 증설 실무협의 결정(무안군, 전남개발공사) - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 이상호, 과장 손상돈 ○ 14. 7. 28 : 지반조사용역 완료 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김정수, 과장 손상돈 ○ 14. 12. 15 : 설계 경제성(VE) 검토 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김정수, 과장 이상호 ○ 15. 1. 29 : 전라남도 건설기술심의 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김정수, 과장 이상호 ○ 15. 3. 26 : 기본 및 실시설계용역 준공 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김정수, 과장 이상호 ○ 15. 5. 26 : 조달청 원가심사 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김정수, 과장 이상호 ○ 15. 6. 15 : 일상감사 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김정수, 과장 이상호 ○ 15. 7. 14 : 공공하수도설치(변경) 인가 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김정수, 과장 이상호 ○ 15. 9. 22 : 목포시 계약심의위원회 심의 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김명봉, 과장 이상호 ○ 15. 12. 9 : 총괄분 및 1차분 착공 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김명봉, 과장 이상호 ○ 16. 4. 29 : 2차분 착공 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김명봉, 과장 권장주 ○ 16. 6. 21 : 전기 및 계측제어공사(총괄분 및 1차분) 착공 - 관련자 : 하수과 담당자 강혜선, 책임관 김명봉, 과장 권장주 ○ 16. 10. 4 : 1차분 준공 - 관련자 : 하수과 담당자 정성훈, 책임관 김명봉, 과장 권장주 ○ 17. 3. 15 : 3차분 착공 - 관련자 : 하수과 담당자 정성훈, 책임관 김명봉, 과장 권장주

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	하수과	② 담당자 (연락처)	시설8급 백무황 하수과장 권장주 (270-3537)
③정책사업명	하수도정비 중점관리지역 정비사업(2017-13)
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2014~2020년
⑥주요내용	○ 추진목적 : 최근 침수피해가 발생하여 하수도정비 중점관리 지역으로 지정한 지역에 하수도시설 확충 등 정비를 추진하여 도시침수 예방 ○ 위 치 : 용당1·2동, 상동일원 ○ 사 업 량 : 관로정비(입암천) L=1.85km, 빗물펌프장 2개소등 ○ 사 업 비 : 35,016백만원(국비 24,511, 지방비 10,505) ○ 사업기간 : 2014년 ~ 2020년 ○ 주요 추진사항 - 2013. 2. : 하수도정비 중점관리지역 지정 고시 - 2014. 9. 25 : 기본 및 실시설계 착수 - 2015. 3. 23 : 실시설계 용역 중간보고(시장) - 2016. 1. 13 : 시의회 도시건설위원회 보고 - 2016. 3. 28 : 기본 및 실시설계 용역 최종보고 - 2016. 4. 19 : 전라남도 건설기술심의 - 2016. 5. 9. : 재원협의 요청〔市(5. 9) → 道( 5. 10) → 영산강청(5. 13)→환경공단〕 - 2016. 9. 11. : 일상감사 완료 - 2016. 10. 24. : 계약심의(목포시) - 2016. 10. 31. : 조달청 원가심사 및 계약의뢰 ○ 사업추진계획 - 2017. 1. ~ 2020. 12. : 공사 추진

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-13	담당부서 작성자	(상하수도사업단/하수과) (백무황/270-3537)
정 책 명	하수도정비 중점관리지역 정비사업
사업개요	○ 추진배경 - 최근 침수피해가 발생하여 하수도정비 중점관리 지역으로 지정한 지역에 하수도시설 확충 등 정비를 추진하여 도시침수 예방 ○ 추진기간 : 2014년 ~ 2020년 ○ 총사업비 : 35,016백만원(국비 24,511, 지방비 10,505) ○ 주요내용 - 관로정비(입암천) L=1.85km, 빗물펌프장 2개소, 제어관리시스템 1식
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 2013. 2. : 하수도정비중점관리지역 지정 고시 - 관련자 : 시장 정종득, 부시장 윤진보, 상하수도사업단장 김찬익 하수과장 조용선, 하수담당 황용규 ○ 2014. 9. : 기본 및 실시설계용역 착수 - 관련자 : 하수과장 손상돈, 하수담당 김정수 ○ 2016. 3. : 기본 및 실시설계용역 최종보고 - 관련자 : 하수과장 권장주, 하수담당 김명봉 ○ 2016. 4. ~ 7. : 설계자문 및 건설기술심의(전남도) - 관련자 : 하수과장 권장주, 하수담당 김명봉 ○ 2016. 9. : 재원협의(영산강유역환경청) 완료 - 관련자 : 하수과장 권장주, 하수담당 김명봉 ○ 2016. 10. : 조달청 원가심사 및 계약이뢰 - 관련자 : 하수과장 권장주, 하수담당 김명봉

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	하수과	②담당자 (연락처)	시설6급 강혜선 하수과장 권장주 (270-8667)
③정책사업명	백련배수펌프장 신설공사(2017-14)
④선정기준	1억원이상 예산 사업	⑤사업기간	2014. 6 ~ 2017. 11
⑥주요내용	○ 추진배경 - 삼향동, 용해동, 연산동 지역의 지반이 평균 해수면보다 낮고 소하천 및 하수관거 정비가 완료되지 않아 태풍 및 집중호우로 인해 침수발생 - 재해위험개선지구로 지정된 백련지구의 침수피해 해소를 위해 배수펌프장 신설 필요 ○ 추진기간 : 2013. 5. ～ 2017. 11. ○ 총사업비 : 250억원(국비 126, 시비 124) ○ 주요내용 - 배수펌프장 신설(Q=2,115㎥/분), 유수지 V=58,600㎥ ○ 추진상황 - 2004. 8. : 재해위험지구 지정 - 2012. 12. : 기본 및 실시설계용역 착수 - 2014. 1. : 사전설계검토(소방방재청) - 2014. 3. : 지방건설기술심의(전라남도) - 2014. 4. : 공공디자인 심의(전라남도) - 2014. 5. : 계약심사(전라남도) - 2014. 6. : 공사계약 체결 및 1차분 착공 - 2016. 2. : 1차분 준공, 건설사업관리용역 착공 - 2016. 3. : 2차분 착공

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2017-14

담당부서

작성자

(상하수도사업단 / 하수과)

(강혜선 /270-8667)

정 책 명

백련배수펌프장 신설공사

사업개요

및

추진경과

○ 추진배경

- 삼향동, 용해동, 연산동 지역의 지반이 평균 해수면보다 낮고

소하천 및 하수관거정비가 완료되지 않아 태풍 및 집중호우로

인해 침수발생

- 재해위험지구로 지정된 백련지구의 침수피해 해소를 위해

배수펌프장 신설 필요

○ 추진기간 : 2013. 5. ~ 2018. 6.

○ 총사업비 : 200억원(국비 101.3, 시비 98.7)

○ 주요내용

- 배수펌프장 신설(Q=2,115㎥/분), 유수지 V=58,600㎥

○ 추진경과

- 2004.  8. : 재해위험지구 지정

- 2012. 12. : 기본 및 실시설계용역 착수

- 2014.  1. : 사전설계검토(소방방재청)

- 2014.  3. : 지방건설기술심의(전라남도)

- 2014.  4. : 공공디자인 심의(전라남도)

- 2014.  5. : 계약심사(전라남도)

- 2014.  6. : 공사계약 체결 및 1차분 착공

- 2016.  2. : 1차분 준공, 건설사업관리용역 착공

- 2016.  3. : 2차분 착공 및 1차분 준공

- 2016.  6. : 3, 4차분 착공

- 2017.  3. : 5차분 착공

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 하수과 시설8급  이인정(성명)

- 최종 결재자 : 목포시장        정종득(성명)

○ 사업 관련자

구 분	성 명	직 급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
시장	정종득		‘12.12.26.～‘14.6.31.
〃	박홍률		‘14.7.1.～현재
부시장	주동식	부이사관	‘11.1.1.∼’13.7.18.
〃	윤진보	〃	‘13.7.19.∼‘15.7.19.
〃	이재철	〃	‘15.7.20.～현재
상하수도 사업단장	박소영	〃	‘12.12.26.∼’13.1.8.
〃	김찬익	행정서기관	‘13.1.8.∼’13.7.29.
〃	김문옥	〃	‘13.7.29.～‘14.8.5.
〃	김치중	〃	‘14.8.6.～‘16.1.14.
〃	김찬익	〃	‘16.1.15.～현재
하수과장	조용선	시설사무관	‘12.12.26.～’13.7.29.	하수과 업무 전반
〃	손상돈	환경사무관	‘13.7.29.～’14.8.22.	〃
〃	이상호	시설사무관	‘14.8.23.～’16.1.14.	〃
〃	권장주	시설사무관	‘16.1.15.～현재	〃
침수방지 책임관	조동준	공업6급	‘12.12.26.～’13.1.21.	침수방지계 업무전반
〃	김용근	〃	‘13.1.21.～‘14.8.6.	〃
〃	조동준	〃	‘14.8.7.～‘15.8.12.	〃
〃	강봉도	〃	‘15.8.13.～현재	〃
담당	이인정	시설8급	‘12.12.26～’13.1.21	배수펌프장 신설
〃	윤재웅	시설7급	‘13.1.21～’16.1.20	〃
〃	정경만	시설9급	‘16.1.21～‘17.1.30	〃
〃	강혜선	시설6급	‘17.1.31～현재	〃

(※ 사업추진 기간 동안 담당자 및 책임자가 변경된 경우 기간별 이력도 기재)

다른기관 또는

민간인 관련자

○ 설계자

- ㈜도화엔지니어링

- ㈜신오엔지니어링

○ 시공자

- 해오름종합건설㈜

○ 감리자

- ㈜선진엔지니어링, ㈜우빈기술공사

추진실적

- 기본 및 실시설계용역 집행계획 보고

- 기본 및 실시설계용역 착수계

- 시설공사 발주계획 검토보고

- 건설사업관리방식 검토보고

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

남해환경관리과

②담당자

(전화번호)

공업7급 김준희(4185)   남해환경관리과장 문명식

③정책사업명

남해하수처리장 악취방지 사업(2017-15)

④선정기준

10억원 이상의 예산이 투입

되는 사업

⑤사업기간

2016.01.01 ~   2018.12.31

⑥주요내용

□ 사업의 목적

ㅇ하수처리장 기술 및 악취진단 결과 시설의 개량, 효율화, 악취 저감하여 유해가스에 의한 안전사고 예방하고 주변 주민들의 악취 민원 해소

ㅇ효율적인 악취방취사업 추진으로 하수 가스에 의한 시설설비의 노후화 예방 및 혐오시설에 대한 의식 개선

□ 사업개요

ㅇ사업비 : 2,248백만원(국비 50%, 도비 5%, 시비 45%)

ㅇ사업기간 : ‘16. 1. ~ ’18. 12.

ㅇ사업내용 : 탈취기 교체 및 밀폐형 덮게 설치, 악취발생 시설 교체 등

□ 추진사항

ㅇ2015.  3. : 환경부 국비신청

ㅇ2015.  9. : 정부 예산안 확정(2,248백만원)

ㅇ2016.  1. : 남해하수처리장 악취방지 사업 실시설계 용역

ㅇ2016.  2. : 국비 교부결정-10억원(국 5억/도 0.5억 / 시 4.5억)

ㅇ2016.  2. : 2017년도 예산신청(12.48억)

ㅇ2016.  8. : 실시설계 설계자문 완료(전라남도)

ㅇ2016.  9. : 환경부 재원협의 및 전라남도 계약심사 완료

ㅇ2016. 10. : 2016년 1차분 사업 착공

ㅇ2016. 12. : 2017년도 사업비 확보(12.4억)

ㅇ2017.  1. : 2016년 1차분 사업 준공

ㅇ2017.  3. : 2017년 2차분 사업 계약의뢰

□ 추진계획

ㅇ2017. 4. ~ 11. : 2017년 2차분 사업 착공 및 준공

□ 연차별 예산 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2016년도	2017년도	2018년도
총 계	2,248	1,000	1,240	8
국 비	1,124	500	620	4
도 비	112.4	50	62	0.4
시 비	1,011.6	450	558	3.6

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-15	담당부서 작성자	(상하수도사업단 / 남해환경관리과) (김준희 / 4185)
정 책 명	남해하수처리장 악취방지 사업
사업개요	○ 추진배경 - 유해가스에 의한 안전사고 예방과 주변 주민들의 악취 민원 해소 ○ 추진기간 : ‘16. 1. ~ ’18. 12. ○ 총사업비 : 2,248백만원(국비 50%, 도비 5%, 시비 45%) ○ 사 업 량 - 탈취기 교체 및 밀폐형 덮게 설치, 악취발생 시설 교체 등
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 2015. 3. 10 : 환경부 악취방지 사업 국비신청 - 관련자 : 남해환경관리과 실무관 김성기, 책임관 김용근, 과장 문동배 ○ 2015. 9. 30 : 정부 예산안 확정(2,248백만원) - 관련자 : 남해환경관리과 실무관 김준희, 책임관 김용근, 과장 문동배 ○ 2016. 1. 11. : 실시설계 용역착수 - 관련자 : 남해환경관리과 실무관 김준희, 책임관 김용근, 과장 문동배 ○ 2016. 2. 26 : 2016년도 사업비 국․도비 교부결정 - 관련자 : 남해환경관리과 실무관 김준희, 책임관 김용근, 과장 문동배 ○ 2016. 2. 19 : 2017년도 예산신청 - 관련자 : 남해환경관리과 실무관 김준희, 책임관 김용근, 과장 문동배 ○ 2016. 7. 11 : 환경부 재원협의 및 전라남도 설계자문 의뢰 - 관련자 : 남해환경관리과 실무관 김준희, 책임관 김용근, 과장 문동배 ○ 2016. 8. 18 : 전라남도 실시설계 용역 설계자문 완료 - 관련자 : 남해환경관리과 실무관 김준희, 책임관 김용근, 과장 문동배 ○ 2016. 9. 6 : 환경부 재원 협의 완료 - 관련자 : 남해환경관리과 실무관 김준희, 책임관 김용근, 과장 문동배

추진경과 및 사업 관련자	○ 2016. 9. 28 : 전라남도 계약심사 완료 - 관련자 : 남해환경관리과 실무관 김준희, 책임관 김용근, 과장 문동배 ○ 2016. 9. 30 : 2016년 1차분 사업 계약의뢰 - 관련자 : 남해환경관리과 실무관 김준희, 책임관 김용근, 과장 문동배 ○ 2016. 10. 31 : 2016년 1차분 사업 착공 - 관련자 : 남해환경관리과 실무관 김준희, 책임관 김용근, 과장 문동배 ○ 2017. 1. 18 : 2016년 1차분 사업 준공 - 관련자 : 남해환경관리과 실무관 김준희, 책임관 김용근, 과장 문동배 ○ 2017. 3. 7 : 2017년 2차분 사업 계약의뢰 - 관련자 : 남해환경관리과 실무관 김준희, 책임관 김동윤, 과장 문명식

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도시재생과	②담당자 (연락처)	녹지6급 김영범 도시재생과장 서태빈 (061-270-3686)
③정책사업명	삼학도 복원화사업 공원조성공사 (2017-16)
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입 되는 사업	⑤사업기간	2004~2021
⑥주요내용	❐ 사업개요 ○ 목 적 : 삼학도를 친환경 생태공원으로 조성 시민 휴게공간 제공 및 서․남해안권 해양관광벨트 구축 ○ 위 치 : 산정동 대․중․소삼학도 일원 ○ 사 업 비 : 1,399억원 ○ 사업기간 : 2004. 12. ~ 2021. 12. ○ 사 업 량 : 공원 A=574,850㎡, 수로 2.2㎞, 교량 10개 등 ❐ 사업추진현황 ○ 2004. 12 : 삼학도 복원화사업 공원조성공사 착수 ○ 2011. 12 : 호안수로 2.1㎞, 산책로 4.2㎞, 교량9개소, 취배수갑문 3개소, 배수로 3.7㎞, 파크골프장 조성 등 ○ ‘12. 9. : 구)한국제분공장 철거 완료 ○ ‘13. 7. : 중앙공원 조성, 구)한국제분 철거부지 산형태복원 ○ ‘14. 10. : 공원 내 지장물 이설(가로수, 가로등) ○ ‘14. 12. : 중앙공원 예정부지 내 도로 철거 및 성토 완료 ○ ‘15. 4. : 중앙광장 우수관, 경계석 설치 및 대삼학도 절개지 사면보호공, 중앙공원 가로등 설치 완료 ○ ‘15. 8. : 난영공원 산책로 조성 완료 ○ ‘16. 4. : 중앙공원 생태연못 조성완료 및 수목식재 추진 ○ ‘17. 3. : 삼학도 중앙공원 조성사업 완료

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-16	담당부서 작성자	(도시발전사업단/ 도시재생과) (김영범/061-270-3686)
정 책 명	삼학도 복원화사업 공원조성공사
사업개요	○ 추진배경 - 삼학도를 친환경 생태공원으로 조성 시민휴게공간 제공 및 서․남해안권 해양관광벨트 구축 ○ 추진기간 : 2004.12. ~ 2021.12. ○ 총사업비 : 139,921백만원 ○ 주요내용 - 공원조성 A=574,850㎡, 수로 2.2㎞, 교량 10개 등
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘00. 4. : 공원변경 결정 및 지적고시(전남도고시 제2000-41호) - 관련자 : 국책지원과 과장 명성인, 책임관 박동길, 실무관 주석재 ○ ‘00. 5. : 삼학도공원 조성계획 변경결정 - 관련자 : 국책지원과 과장 명성인, 책임관 박동길, 실무관 주석재 ○ ‘00. 8. : 남해안 관광벨트개발사업 사업계획 승인 - 관련자 : 국책지원과 과장 명성인, 책임관 박동길, 실무관 주석재 ○ ‘01. 12. : 실시설계 완료 - 관련자 : 국책지원과 과장 명성인, 책임관 박동길, 실무관 주석재 ○ ‘01. 12. : 연안정비사업 실시계획 승인(해수부고시 2001-112호) - 관련자 : 국책지원과 과장 명성인, 책임관 박동길, 실무관 주석재 ○ ‘04. 12. : 삼학도 복원화사업 공원조성공사(토목) 착공 - 관련자 : 원도심개발사업단 과장 박남채, 책임관 김충, 실무관 오길환 ○ ´04.12 ~ ´06. 6 : 토목 1차 공사 완료(수로 742m, 배수갑문 1개소, 교량 5개소) - 관련자 : 원도심개발사업단 과장 박남채, 책임관 김충, 실무관 오길환 ○ ´06. 6 ~ ´08. 4 : 토목 2차 공사 완료(호안수로 540m, 교량 1개소) ※ ‘07. 3. : 1차 공사 완료구간 시민 개방 - 관련자 : 원도심개발사업단 과장 박남채, 책임관 김충, 실무관 오길환 ○ ´09. 2. : 공원조성계획 변경 및 지형도면고시 - 관련자 : 원도심사업과 과장 박옥주, 책임관 권장주, 실무관 송창헌 ○ ´10. 3. : 호안수로 1,458m 전면통수 및 교량4개소, 산책로4.4㎞ 개방 - 관련자 : 원도심사업과 과장 박옥주, 책임관 권장주, 실무관 송창헌 ○ ´10. 5. : 토목공사 3․4차분 준공 - 관련자 : 원도심사업과 과장 박옥주, 책임관 권장주, 실무관 송창헌 ○ ‘11. 3. : 토목 5차분 착공 - 관련자 : 원도심사업과 과장 김준철, 책임관 김명봉, 실무관 이주현 ○ ‘11. 12. : 배수갑문 1개소, 파크골프장 조성, 철도횡단구간 호안수로 연결 - 관련자 : 원도심사업과 과장 김준철, 책임관 김명봉, 실무관 이주현 ○ ‘12. 4. : 구)한국제분 공장 철거공사 착공 - 관련자 : 원도심사업과 과장 김준철, 책임관 김명봉, 실무관 이주현 ○ ‘12. 8. : 한국제분 사일로 14기 철거(1차 : 8.1일(8기), 2차 : 8.10일(6기)) - 관련자 : 원도심사업과 과장 김준철, 책임관 김명봉, 실무관 이주현 ○ ‘12. 9. : 구)한국제분 공장 철거공사 완료, 중앙공원 조경공사 착공 - 관련자 : 원도심사업과 과장 김준철, 책임관 김명봉, 실무관 이주현 ○ ‘12. 10. : 대삼학도 절개지 산형태 복원 등 활용계획 방안 검토보고 - 관련자 : 원도심사업과 과장 김준철, 책임관 김명봉, 실무관 이주현 ○ ‘12. 12. : 산형태 복원구간 측량 및 복원공사 착공 - 관련자 : 원도심사업과 과장 김준철 책임관 김명봉, 실무관 진헌민 ○ ‘13. 7. : 중앙공원, 한국제분 철거부지 산형태 복원 등 완료 - 관련자 : 원도심사업과 과장 윤인영, 책임관 최재혁, 실무관 김신주 ○ ‘13. 12. : 목포 삼학도선(철도) 폐지 - 관련자 : 원도심사업과 과장 윤인영, 책임관 최재혁, 실무관 김신주 ○ ‘14. 5. : 삼학도 공원내 철도 선로 철거 완료(380m) - 관련자 : 원도심사업과 과장 윤인영, 책임관 김진현, 실무관 김신주 ○ ‘14. 10. : 공원 내 지장물 이설(가로수, 가로등) - 관련자 : 원도심사업과 과장 박옥주, 책임관 김진현, 실무관 이인정 ○ ‘14. 12. : 중앙공원 예정부지 내 도로 철거 및 성토 완료 - 관련자 : 원도심사업과 과장 박옥주, 책임관 김진현, 실무관 이인정 ○ ‘15. 4. : 중앙광장 우수관, 경계석 설치 및 대삼학도 절개지 사면보호공 완료 - 관련자 : 도시재생과 과장 윤남주, 책임관 김진현, 실무관 이인정 ○ ‘15. 8. : 난영공원 산책로 조성 완료 - 관련자 : 도시재생과 과장 윤남주, 책임관 김진현, 실무관 이인정 ○ ‘15. 10. : 중앙공원 생태연못 조성완료 - 관련자 : 도시재생과 과장 배석인, 책임관 김방선, 실무관 이인정 ○ ‘16. 4. : 중앙공원 산형태복원 수목식재 추진 - 관련자 : 도시재생과 과장 배석인, 책임관 유윤수, 실무관 이석태 ○ ‘16. 10. : 난영공원 사면부 수목식재 및 대공연장 조성 - 관련자 : 도시재생과 과장 배석인, 책임관 김신주, 실무관 김영범 ○ ‘17. 3. : 중앙공원 조성공사 완료 - 관련자 : 도시재생과 과장 서태빈, 책임관 김신주, 실무관 김영범

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도시재생과	②담당자 (연락처)	시설8급 김선웅 도시재생과장 서태빈 (061-270-3649)
③정책사업명	도심관통 도로개설(2017-17)
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입 되는 사업	⑤사업기간	2008년~2018년
⑥주요내용	○ 추진배경 : 원도심 중심상가와 연계되는 구)중앙시장～목여고 교차로간 도심관통도로를 개설하여 접근성 향상 및 도심순환 교통체계 구축 ○ 사업개요 - 사 업 명 : 도심관통 도로개설 - 사업위치 : 구)중앙공설시장~7호광장간 - 사업내용 : 도로개설 L=555m, B=20m - 사업기간 : 2008~2018 - 사 업 비 : 36,180백만원

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-17	담당부서 작성자	(도시발전사업단/ 도시재생과) (김선웅/061-270-3649)
정 책 명	도심관통 도로개설
사업개요	○ 추진배경 - 원도심 중심상가와 연계되는 구)중앙시장～목여고 교차로간 도심관통도로를 개설하여 접근성 향상 및 도심순환 교통체계 구축 ○ 추진기간 : 2008 ~2018 ○ 총사업비 : 36,180백만원 ○ 주요내용 : 도로개설 L=555m, B=20m
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘05. 10. 28. : 지방재정투융자 심사(자체) - 관련자 : 원도심개발사업단 과장 추영동, 책임관 이상호, 실무관 오병주 ○ ‘06. 04. 18. : 용역과제 사전심의 - 관련자 : 원도심개발사업단 과장 추영동, 책임관 이상호, 실무관 오병주 ○ ‘07. 03. 23. : 도시관리계획 변경 및 실시설계용역 추진 - 관련자 : 원도심개발사업단 과장 최창호, 책임관 황용규, 실무관 오병주 ○ ‘07. 11. 27. : 도시관리계획시설 결정(변경) 지형도면 고시 - 관련자 : 원도심개발사업단 과장 최창호, 책임관 황용규, 실무관 오병주 ○ ‘08. 05. 27. : 실시계획인가 사전 공람공고(한복거리~백제약국) - 관련자 : 원도심사업과 과장 박경곤, 책임관 박금재, 실무관 서신우 ○ ‘08. 09. : 도시관리계획 시설사업(도로) 실시계획인가 고시 ※ 도로개설 L=555m, 중 1단계 L=165m(1․2구간) - 관련자 : 원도심사업과 과장 박옥주, 책임관 박금재, 실무관 서신우 ○ ‘09. 12. : 보상계획 공고 및 열람(1단계 1차 구간 : L=89m, B=20m) - 관련자 : 원도심사업과 과장 박옥주, 책임관 윤병종, 실무관 민경종 ○ ‘10. 01~12 : 한복거리구간(1차구간) 보상 및 지장물 철거 - 관련자 : 원도심사업과 과장 윤인영, 책임관 김웅민, 실무관 윤정호 ○ ‘10. 12. : 도시관리계획시설사업(도로) 실시계획인가(변경)고시 ※ 사업기간 연장 : ‘10. 12. 31. → ‘14. 12.31. - 관련자 : 원도심사업과 과장 윤인영, 책임관 김웅민, 실무관 윤정호 ○ ‘13. 7. ~ 12월 : 2차구간(L=76m) 65억원(보상49, 공사16)중 보상비 39억원(백제약국 10억원 제외) 3회 분할지급(13년 8억원 보상) - 관련자 : 원도심사업과 과장 윤인영, 책임관 박남규, 실무관 김진희 ○ ‘14. 01. : 2구간 16필지 분할보상금 2차분 지급 - 관련자 : 원도심사업과 과장 윤인영, 책임관 박남규, 실무관 정대균 ○ ‘14. 12. : 국비 특별교부세 확보(10억) - 관련자 : 원도심사업과 과장 윤인영, 책임관 김재성 실무관 김형중 ○ ‘15. 02. : 2구간 분할보상금 3차분 지급완료(백제약국 제외) - 관련자 : 도시재생과 과장 윤남주, 책임관 김진현, 실무관 이인정 ○ ‘15. 09. : 2구간 지장물 철거 완료(백제약국 제외) - 관련자 : 도시재생과 과장 윤남주, 책임관 김진현, 실무관 이인정 ○ ‘15. 11. : 2구간 지장물(백제약국) 철거 완료 - 관련자 : 도시재생과 과장 배석인, 책임관 김방선, 실무관 이인정 ○ ‘16. 04. : 1~2구간 도로개설공사 추진 - 관련자 : 도시재생과 과장 배석인, 책임관 유윤수, 실무관 이석태 ○ ‘16. 05. : 1~2구간 도로개설공사 착공 - 관련자 : 도시재생과 과장 배석인, 책임관 유윤수, 실무관 이석태 ○ ‘16. 11. : 1~2구간 도로개설공사 준공 - 관련자 : 도시재생과 과장 배석인, 책임관 김신주, 실무관 김선웅 ○ ‘17. 1. : 3구간 도로개설공사 실시설계용역 착수 - 관련자 : 도시재생과 과장 서태빈, 책임관 김신주, 실무관 김선웅

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도시재생과	②담당자 (전화번호)	도시재생과장 서태빈 시설8급 김선웅 (061-270- 3649)
③정책사업명	목포 서산․온금 재정비촉진지구 재정비촉진계획 변경 수립용역 (2017-18)
④선정기준	주요 시정 현안에 관한 사항	⑤사업기간	2016. 1. 14. ~ 2017. 1. 12.
⑥주요내용	○ 과업목적 - 2012년 결정 고시된「목포 서산․온금재정비촉진계획」에 대하여 그동안 변화된 대외여건과 지역정서 등을 반영하고, 계획운용상 나타난 일부 불합리한 요소들을 관계법령·지침에 적합하도록 정비하여, - 노후 및 불량주택이 밀집된 서산ㆍ온금지구를 유달산의 풍광과 다도해의 전망이 어우러진 친환경 주거공간 조성을 위한 종합기본계획을 변경 수립 ○ 용역개요 - 용 역 명 : 목포 서산․온금 재정비촉진지구 재정비촉진계획 변경 수립용역 - 과업위치 : 서산․온금동 일원 - 과업범위 : 388,463㎡(서산․온금 재정비촉진지구 내) - 과업내용 : 촉진계획 변경, 교통성 검토, 경관상세계획, 교육영향평가 등 - 과업기간 : 2016. 1. 14. ~ 2017. 1. 12. (일시정지 : 2016.12.21.) - 용 역 비 : 307백만원

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-18	담당부서 작성자	(도시개발사업단 / 도시재생과) (김선웅 / 061-270-3649)
정 책 명	목포 서산․온금 재정비촉진지구 재정비촉진계획 변경 수립용역
사업개요	○ 추진목적 - 2012년 결정 고시된「목포 서산․온금재정비촉진계획」에 대하여 그동안 변화된 대외여건과 지역정서 등을 반영하고, 계획운용상 나타난 일부 불합리한 요소들을 관계법령·지침에 적합하도록 정비 ○ 추진기간 : 2016. 1. 14 ~ 2017. 1. 12(일시정지 : 2016.12.21.) ○ 총사업비 : 307백만원 ○ 주요내용 - 촉진계획 변경, 교통성 검토, 경관상세계획, 교육영향평가 등
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 2015. 11. 4. : 전라남도 계약심사 - 관련자 : 전라남도 회계과 주무관 조준, 계약심사담당 정현인, 과장 유영걸 ○ 2015. 11. 10. : 목포시 일상감사 - 관련자 : 감사실 실무관 박재홍, 계장 황용규, 과장 한순덕 ○ 2015. 11. 11. : 용역 추진계획 보고 - 관련자 : 도시재생과 실무관 김선웅, 계장 김방선, 과장 배석인, 도시개발사업단장 심인섭, 부시장 이재철, 시장 박홍률 ○ 2015. 12. 8. : 사업수행능력평가 자제평가위원회 심의 - 관련자 : 위원장 도시개발사업단장 심인섭, 위원 도시계획과장 나상원, 건설과장 김준, 도시개발과장 박금재 ○ 2016. 1. 14. : 용역 착수 - 관련자 : 도시재생과 실무관 김선웅, 계장 김방선, 과장 배석인 ○ 2016. 8. : 재정비촉진계획 변경 수립용역 중간보고회 - 관련자 : 도시재생과 실무관 김선웅, 계장 유윤수, 과장 배석인 도시개발사업단장 심인섭, 시장 박홍률 ○ 2016. 9. : 2, 3구역(정비구역) 해제(안) 공람공고 및 통장단 설명회 - 관련자 : 도시재생과 실무관 김선웅, 계장 유윤수, 과장 배석인 ○ 2016. 10. : 재정비촉진계획 변경(안) 공람공고 및 주민설명회 개최 - 관련자 : 도시재생과 실무관 김선웅, 계장 김신주, 과장 배석인 도시개발사업단장 심인섭 ○ 2016. 11. : 정비구역 해제(안) 및 촉진계획 변경(안) 시의회 의견청취 - 관련자 : 도시재생과 실무관 김선웅, 계장 김신주, 과장 배석인 도시개발사업단장 심인섭 ○ 2016. 12. : 재정비촉진계획 변경(안) 주민 공청회 개최 - 관련자 : 도시재생과 실무관 김선웅, 계장 김신주, 과장 배석인 ○ 2016. 12. : 행정절차 이행을 위한 용역 일시정지 - 관련자 : 도시재생과 실무관 김선웅, 계장 김신주, 과장 배석인 ○ 2017. 1. : 정비구역 해제(안) 시 도시계획위원회 심의 및 재정비촉진계획 변경(안) 시 도시건축공동위원회 자문 - 관련자 : 도시재생과 실무관 김선웅, 계장 김신주, 과장 배석인 ○ 2017. 2. : 목포 서산·온금 재정비촉진지구 지정(변경) 및 재정비촉진계획(변경)(안) 결정 신청(전라남도) - 관련자 : 도시재생과 실무관 김선웅, 계장 김신주, 과장 서태빈 도시발전사업단장 김창옥

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도시재생과	②담당자 (전화번호)	시설7급 김신철 도시재생과장 서태빈 (061-270-3684)
③정책사업명	도시재생 선도지역 도시재생사업(2017-19)
④선정기준	10억원 이상 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2014. 1 ~ 2017. 12
⑥주요내용	○ 2013.12. 시행된 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」에 의거 도시쇠퇴로 재생이 시급하고, 주변으로 파급효과가 큰지역을 선정, 경제활력 회복과 일자리 창출을 위한 기반을 조성하는 사업 ○ 대 상 지 : 목원동 일원(『트윈스타』 주변 / 600,000㎡) ○ 사 업 비 : 200억원(국비 100, 시비 100) ○ 사업기간 : 2014년 ~ 2017년(4년) ○ 사업내용 • 테마거리 조성 • 기존 골목길 정비(골목길 정비, CCTV 설치 등) • 지붕 경관사업(노후 주택 지붕경관 개선) • 공가 활용 게스트 하우스 및 커뮤니티 시설 설치 • 기반시설 정비(도로 1개소, 공원 1개소, 주차장 3개소 등) • 주민역량강화 사업(도시재생대학, 마을학교 등)

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-19	담당부서 작성자	(도시개발사업단 / 도시재생과) (김신철/061-270-3684)
정 책 명	목포시 도시재생 선도지역 도시재생사업
사업개요	○ 추진배경 - 2013.12. 시행된 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」에 의거 도시쇠퇴로 재생이 시급하고, 주변으로 파급효과가 큰지역을 선정, 경제활력 회복과 일자리 창출을 위한 기반을 조성하는 사업 ○ 추진기간 : 2014 ~ 2017 ○ 총사업비 : 201.8억원(국비 100.9, 시비 100.9) ○ 주요내용 • 테마거리 조성 • 기존 골목길 정비(골목길 정비, CCTV 설치 등) • 지붕 경관사업(노후 주택 지붕경관 개선) • 공가 활용 게스트 하우스 및 커뮤니티 시설 설치 • 기반시설 정비(도로 2개소, 공원 1개소, 주차장 3개소 등) • 주민역량강화 사업(도시재생대학, 마을학교 등)
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 2014. 3. 14 : 도시재생 선도지역 신청(안) 제출 - 관련자 : 원도심사업과 담당자 박치현, 책임관 김진현, 과장 윤인영 ○ 2014. 9. 12 : 도시재생 총괄코디네이터 선임 - 관련자 : 원도심사업과 담당자 조형근, 책임관 김진현, 과장 박옥주 ○ 2014. 10. 1 : 도시재생 활성화계획수립 용역 착수 - 관련자 : 원도심사업과 담당자 조형근, 책임관 김진현, 과장 박옥주 ○ 2014. 10. 23 : 목포시 도시재생위원회 위원 위촉 - 관련자 : 원도심사업과 담당자 조형근, 책임관 김진현, 과장 박옥주, 도시개발사업단장 송명완, 부시장 윤진보, 시장 박홍률 ○ 2014. 10. 27 : 제1기 도시재생대학 개강 - 관련자 : 원도심사업과 담당자 조형근, 책임관 김진현, 과장 박옥주 ○ 2014. 11. 12 : 도시재생 활성화계획(안) 도시재생위원회 심의 - 관련자 : 원도심사업과 담당자 조형근, 책임관 김진현, 과장 박옥주 ○ 2014. 11. 20 : 목포시 도시재생 근린재생형 활성화계획 승인요청 - 관련자 : 원도심사업과 담당자 조형근, 책임관 김진현, 과장 박옥주, 도시개발사업단장 송명완, 부시장 윤진보, 시장 박홍률 ○ 2014. 12. 29 : 도시재생 활성화 및 지원에 관한 조례 공포 - 관련자 : 원도심사업과 담당자 조형근, 책임관 김진현, 과장 박옥주 ○ 2015. 3. 5 : 목포시 도시재생지원센터 개소식 - 관련자 : 도시재생과 담당자 조형근, 책임관 김진현, 과장 윤남주 ○ 2015. 5. 4 : 2015년 주민 제안․공모사업 공고 - 관련자 : 도시재생과 담당자 조형근, 책임관 김진현, 과장 윤남주 ○ 2015. 5. 6 : 제2기 도시재생대학 수료 - 관련자 : 도시재생과 담당자 조형근, 책임관 김진현, 과장 윤남주 ○ 2015. 7. 30 : 2015년 제1회 도시재생위원회 심의 - 관련자 : 도시재생과 담당자 조형근, 책임관 김진현, 과장 윤남주, 도시개발사업단장 심인섭, 부시장 이재철 ○ 2015. 8. 31 : 2015년 제2회 도시재생위원회 승인 - 관련자 : 도시재생과 담당자 조형근, 책임관 김진현, 과장 배석인, 도시개발사업단장 심인섭, 부시장 이재철 ○ 2015. 9. 8 : 총괄 및 분야별 코디네이터 위촉(4명) - 관련자 : 도시재생과 담당자 조형근, 책임관 김진현, 과장 배석인, 도시개발사업단장 심인섭, 부시장 이재철, 시장 박홍률 ○ 2015. 9. 18 : 도시재생지원센터 센터장 임용 - 관련자 : 도시재생과 담당자 조형근, 책임관 김진현, 과장 배석인, 도시개발사업단장 심인섭, 부시장 이재철, 시장 박홍률 ○ 2015. 10. 2 : 커뮤니티센터 리모델링 용역 착수 - 관련자 : 도시재생과 담당자 이석태, 책임관 김진현, 과장 배석인 ○ 2015. 10. 8 : 도시재생 활성화계획수립 용역 준공 - 관련자 : 도시재생과 담당자 조형근, 책임관 김진현, 과장 배석인 ○ 2015. 11. 30 : 제3기 도시재생대학 수료 - 관련자 : 도시재생과 담당자 장현미, 책임관 김진현, 과장 배석인 ○ 2015. 12. 4 ~ 5 : 2015 목원음식문화축제 개최 - 관련자 : 도시재생과 담당자 이석태, 책임관 김진현, 과장 배석인 ○ 2016. 1. 12 ~ : 도시재생 서포터즈 모집 및 운영(47명) - 관련자 : 도시재생과 담당자 장현미, 책임관 김진현, 과장 배석인 ○ 2016. 2. 25 : 도시재생 선도지역(관광루트 등)사업 기본 및 실시설계용역 착수 - 관련자 : 도시재생과 담당자 김신철, 책임관 오병주, 과장 배석인 ○ 2016. 3. 4 : (가칭)만인계 웰컴센터 조성 설계용역 발주 - 관련자 : 도시재생과 담당자 장현미, 책임관 오병주, 과장 배석인, 단장 심인섭 ○ 2016. 3. 15 : 마인계터 예술주차장 조성공사 착공 - 관련자 : 도시재생과 담당자 김신철, 책임관 오병주, 과장 배석인 ○ 2016. 4. 7 : (가칭)목원 어울림회관 조성공사(6분야) 착공 - 관련자 : 도시재생과 담당자 김도관, 책임관 오병주, 과장 배석인, 단장 심인섭, 부시장 이재철 ○ 2016. 4. 15 : 마을학교(게스트하우스 마을학교 육성) 수료(27명) - 관련자 : 도시재생과 담당자 김도관, 책임관 오병주, 과장 배석인 ○ 2016. 5. 21 ~ 7.28 : 마을학교(남행열차 포차 운영자 육성) 운영(수료 11명) - 관련자 : 도시재생과 담당자 김도관, 책임관 오병주, 과장 배석인 ○ 2016. 5. 31 : 도시재생 아이디어 우수작 선정 및 시상(14건) - 관련자 : 도시재생과 담당자 김덕훈, 책임관 오병주, 과장 배석인 ○ 2016. 6. 2 ~ 7. 23 : 골목길 해설서 육성과정 마을학교 운영(수료 29명) - 관련자 : 도시재생과 담당자 김신철, 책임관 오병주, 과장 배석인 ○ 2016. 6. 30 : 도시재생위원회 심의(제안공모 아이디어) - 관련자 : 도시재생과 담당자 김덕훈, 책임관 오병주, 과장 배석인 ○ 2016. 7. 14 ~ 8. 11 : 주택개량지원사업 마을학교 운영(수료 21명) - 관련자 : 도시재생과 담당자 김대용, 책임관 오병주, 과장 배석인 ○ 2016. 7. 25 : 관광루트 테마거리 조성 기본 및 실시설계용역 준공 - 관련자 : 도시재생과 담당자 김신철, 책임관 오병주, 과장 배석인 ○ 2016. 8. 23 ~ 9. 24 : 제4기 도시재생대학 운영(수료 22명) - 관련자 : 도시재생과 담당자 김덕훈, 책임관 오병주, 과장 배석인 ○ 2016. 9. 6 : 목원 어울림회관 리모델링 준공 - 관련자 : 도시재생과 담당자 김대용, 책임관 오병주, 과장 배석인 ○ 2016. 10. 10 : 소로 3-58호선 도로개설 착공(유달예술타운 아래) - 관련자 : 도시재생과 담당자 김신철, 책임관 오병주, 과장 배석인 ○ 2016. 10. 10 : 관광루트 만인계터거리 조성공사 착공 - 관련자 : 도시재생과 담당자 김신철, 책임관 오병주, 과장 배석인 ○ 2016. 10. 13 : 관광루트 목마르뜨거리 조성공사 착공 - 관련자 : 도시재생과 담당자 김신철, 책임관 오병주, 과장 배석인 ○ 2016. 10. 18 : 중앙식료시장 특화장터 조성 실시설계용역 준공 - 관련자 : 도시재생과 담당자 김도관, 책임관 오병주, 과장 배석인 ○ 2016. 10. 20 : 주택개량지원사업 마을기업 선정(6개소) - 관련자 : 도시재생과 담당자 김대용, 책임관 오병주, 과장 배석인 ○ 2016. 10. 24 : 경관관리사업 용역 최종보고회 및 색채디자인 선정(주황색) - 관련자 : 도시재생과 담당자 김대용, 책임관 오병주, 과장 배석인 ○ 2016. 10. 28 ~ 29 : 2016년 먹․통축제 개최 - 관련자 : 도시재생과 담당자 김도관, 책임관 오병주, 과장 배석인 ○ 2016. 10. 28 ~ : 남행열차 포차 개장(먹․통축제 개막과 병행) - 관련자 : 도시재생과 담당자 김도관, 책임관 오병주, 과장 배석인 ○ 2016. 10. 28 : CCTV 설치 실시설계용역 준공 - 관련자 : 도시재생과 담당자 김신철, 책임관 오병주, 과장 배석인 ○ 2016. 10. 28 ~ 12. 31 : 차없는거리 프리마켓 운영 지원(매대 17대) - 관련자 : 도시재생과 담당자 김덕훈, 책임관 오병주, 과장 배석인 ○ 2016. 11. 31 : 목원 어울림회관 전시․제작설치 완료 - 관련자 : 도시재생과 담당자 김도관, 책임관 오병주, 과장 배석인 ○ 2016. 12. 07 : 주택개량사업 1차분 발주(34동) - 관련자 : 도시재생과 담당자 김대용, 책임관 오병주, 과장 배석인 ○ 2016. 12. 14 : 남교시영 주차장 조성공사 착공 - 관련자 : 도시재생과 담당자 이석태, 책임관 오병주, 과장 배석인 ○ 2016. 12. 17 ~ 31 : 크리스마스트리문화축제 지원 - 관련자 : 도시재생과 담당자 김덕훈, 책임관 오병주, 과장 배석인 ○ 2016. 12. 26 : 소공원 조성공사 준공(북교빌라 앞) - 관련자 : 도시재생과 담당자 이석태, 책임관 오병주, 과장 배석인 ○ 2017. 4. 4 : 이매방 조형벽화 조성완료(구름다리 아래) - 관련자 : 도시재생과 담당자 김신철, 책임관 오병주, 과장 서태빈 ○ 2017. 4. 14 : 차범석 조형벽화 조성완료(구름다리 아래) - 관련자 : 도시재생과 담당자 김신철, 책임관 오병주, 과장 서태빈

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도시재생과	②담당자 (전화번호)	시설7급 김신철 도시재생과장 서태빈 (061-270-3684)
③정책사업명	도시재생 전략계획 및 선창권 도시재생 활성화 계획 수립(2017-20)
④선정기준	1억원 이상 용역	⑤사업기간	2016. 3 ~ 2017. 3
⑥주요내용	□ 추진배경 및 목적 ○ 2018년 수협의 북항권 이전에 따른 선창권 공동화 현상의 대책마련을 위해 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」에 의거 도시재생 일반지역으로 선정, 경제활력 회복과 일자리 창출을 위한 기반 조성 □ 사업개요 ○ 용역범위 - 전략계획 : 목포시 전역 - 선창권 활성화계획 : 선창 일원(면적 600,000㎡) ○ 용역비 : 429백만원 ○ 용역기간 : 2016. 3. 3 ~ 2017. 3. 2(12개월) ○ 주요내용 • 목포시 도시재생 전략계획 1식 • 선창권 도시재생 활성화계획 1식 • 주민역량강화 1식 ○ 용역사 : (주)대한콘설탄트, 디자인 연구소 두다

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-20	담당부서 작성자	(도시개발사업단 / 도시재생과) (김신철/061-270-3684)
정 책 명	도시재생 전략계획 및 선창권 도시재생 활성화 계획 수립
사업개요	○ 추진배경 - 2018년 수협의 북항권 이전에 따른 선창권 공동화 현상의 대책마련을 위해 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」에 의거 도시재생 일반지역으로 선정, 경제활력 회복과 일자리창출을 위한 기반 조성 ○ 추진기간 : 2016 ~ 2017 ○ 용 역 비 : 429백만원 ○ 주요내용 • 도시재생 전략계획 1식 • 선창권 도시재생 활성화계획 1식 • 주민역량강화 1식
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 2015. 12. 24 : 일상감사 및 계약심사 - 관련자 : 도시재생과 담당자 김신철, 책임관 김진현, 과장 배석인 ○ 2016. 1. 7 : 용역 추진계획 검토보고 - 관련자 : 도시재생과 담당자 김신철, 책임관 김진현, 과장 배석인 단장 심인섭, 부시장 이재철, 시장 박홍률 ○ 2016. 1. 8 : 입찰공고 - 관련자 : 도시재생과 담당자 김신철, 책임관 김진현, 과장 배석인 ○ 2016. 1. 13 : 제안서 평가위원 공개모집 - 관련자 : 도시재생과 담당자 김신철, 책임관 김진현, 과장 배석인 ○ 2016. 2. 5 : 정성적 평가 및 우선협상대상자 선정 - 관련자 : 도시재생과 담당자 김신철, 책임관 오병주, 과장 배석인, 단장 심인섭 ○ 2016. 2. 22 : 계약체결 - 관련자 : 도시재생과 담당자 김신철, 책임관 오병주, 과장 배석인 ○ 2016. 3. 3 : 용역착수 - 관련자 : 도시재생과 담당자 김신철, 책임관 오병주, 과장 배석인 ○ 2016. 3. 25 : 용역 착수보고회 - 관련자 : 도시재생과 담당자 김신철, 책임관 오병주, 과장 배석인 단장 심인섭 ○ 2016. 4. 25 : 주민설명회 개최 - 관련자 : 도시재생과 담당자 김신철, 책임관 오병주, 과장 배석인 단장 심인섭 ○ 2016. 10. 22 ~ 12. 10 : 선창권 제1기 도시재생대학 운영(54명 수료) - 관련자 : 도시재생과 담당자 김신철, 책임관 오병주, 과장 배석인 ○ 2017. 1. 12 : 용역중간보고회 개최(시청 상황실) - 관련자 : 도시재생과 담당자 김신철, 책임관 오병주, 과장 배석인 단장 심인섭 ○ 2017. 3. 23 : 용역최종보고회 개최(시청 상황실) - 관련자 : 도시재생과 담당자 김신철, 책임관 오병주, 과장 서태빈 단장 김창옥

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도시재생과	②담당자 (전화번호)	시설8급 김덕철 도시재생과장 서태빈 (061-270-8744)
③정책사업명	가톨릭성지 활용 관광자원화 시설 조성 (2017-21)
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입 되는 사업	⑤사업기간	2009. 11. ~ 2017. 12.
⑥주요내용	□ 사업목적 ∙ 가톨릭 성지 내 레지오 마리애 나눔봉사기념관 건립을 통해 역사적·종교적·문화적 가치를 유지하고, 원도심 지역 경제 활성화 및 지역관광 자원화 기여 □ 사업 현황 ∙ 규 모 : 대지면적 29,729.97㎡, 연면적 14,987.31㎡, 지하1/6층 ∙ 용 도 : 레지오마리애 나눔봉사기념관, 가톨릭역사문화관, 가톨릭미술관, 대성당 및 부대시설, ∙ 사업비 : 577억원(천주교 356, 국비 25.5, 도비 10.2, 시비 185.3) ∙ 사업내용 - 천주교 : 성당 및 부속시설, 성직자동, 나눔봉사기념관, 전망데크 - 목포시 : 기반시설(도로개설 3개소) □ 추진사항 ∙ '09. 11. : 가톨릭성지 조성사업 협약체결(시 + 광주대교구) ∙ '10. 5. : 도시계획 변경(도로, 주차장, 광장 등)결정고시 ∙ '11. 9. : 기념대성당 건축 인허가 완료 ∙ '13. 5. : 도로(중로 3-6) 공사비 특별교부세 교부(15억) ∙ '14. 12. : 나눔봉사기념관 국고보조금 교부 ∙ '15. 10. : 중로3-6호선 개설 완료(35억) ∙ '15. 12. : 사업부지 토목공사 완료(부지정지) ∙ '16. 4. : 나눔봉사기념관 공사계약 및 공사착공 ∙ '17. 10. : 나눔봉사기념관 준공 예정 ∙ '18. 12 : 가톨릭성지 조성사업 준공 예정

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-21	담당부서 작성자	(도시개발사업단/도시재생과) (정인선/061-270-8744)
정 책 명	가톨릭성지 활용 관광자원화 시설 조성
사업개요	○ 추진배경 - 호남지역 첫 선교지 의미를 복원하고 성지순례의 메카로 발전시키기 위한 성지조성으로 천주교 신자 방문 명소 및 관광객 유치 기여 ○ 사업기간 : 2009. 11 ~ 2017. 12. ○ 사 업 비 : 577억원(천주교 356, 국비 25.5, 도비 10.2, 시비 185.3) ○ 사업규모 : 대지면적 29,729㎡, 연면적 14,987.31㎡
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ∙ '09. 11. : 가톨릭성지 조성사업 협약체결(시 + 광주대교구) - 관련자 : 원도심사업과 7급 고경희, 계장 서태빈, 과장 박동길 ∙ '10. 5. : 도시계획 변경(도로, 주차장, 광장 등)결정고시 - 관련자 : 원도심사업과 7급 이현주, 계장 서태빈, 과장 박옥주 ∙ '11. 9. : 기념대성당 건축 인허가 완료 - 관련자 : 원도심사업과 7급 이현주, 계장 서태빈, 과장 박옥주 ∙ '13. 5. : 도로(중로 3-6) 공사비 특별교부세 교부(15억) - 관련자 : 원도심사업과 7급 김상문, 계장 김수광, 과장 윤인영 ∙ '14. 12. : 나눔봉사기념관 국고보조금 교부 - 관련자 : 원도심사업과 8급 조성록, 계장 김수광, 과장 박옥주 ∙ '15. 10. : 중로3-6호선 개설 완료(35억) - 관련자 : 도시재생과 7급 김상문, 계장 조영민, 과장 배석인 ∙ '15. 12. : 사업부지 토목공사 완료(부지정지) - 관련자 : 원도시재생과 7급 김상문, 계장 조영민, 과장 배석인 ∙ '16. 4. : 나눔봉사기념관 공사계약 및 공사착공 - 관련자 : 도시재생과 7급 정인선, 계장 조영민, 과장 배석인 ∙ '17. 10. : 나눔봉사기념관 준공 예정 - 관련자 : 도시재생과 8급 김덕철, 계장 조영민, 과장 서태빈

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도시개발과	②담당자 (전화번호)	시설7급 서신우 도시개발과장 김형석 (061-270-3434)
③정책사업명	임성지구 도시개발사업 (2017-22)
④선정기준	주요 시정 현안에 관한 사항	⑤사업기간	2013년~2020년
⑥주요내용	□ 추진배경 ○ 남악신도시 마스터플랜에서 제시된 남악신도시 개발의 2단계 사업으로 목포(임성)～보성간 남해안철도 고속화사업에 따른 임성리 역세권 개발과 친환경 문화도시 지향의 21세기형 신도시 개발 □ 사업개요 ○ 위 치 : 목포시 석현동, 옥암동 일원 ○ 규 모 : 1,979,000㎡(60만평) ○ 계획인구 : 2만명(7,920세대) ○ 시행방식 : 혼용방식(환지 및 수용) ○ 사 업 비 : 2,335억원 (공사비1,100/보상비414/부담금442/용역비 등 기타379) □ 추진사항 ○ ‘00. 3. : 남악신도시 마스터플랜 확정(전라남도) ○ ‘08. 11. ~ ‘13. 11. : 개발행위허가 제한구역 지정고시 ○ ‘13. 10. : 도시개발구역지정 고시 ○ ‘15. 10. : 개발계획 수립 승인 및 고시 ○ ‘16. 3. : 민간사업자 공모 공고 ○ ‘16. 7. : 우선협상대상자 선정 ○ ‘17. 3. : 시의회 사업협약체결 보증금 반환 동의안 제출 및 심사의결, 우선협상대상자 선정 취소 ○ ‘17. 4. 11. : 목포시·LH 임성지구 기본협약 체결

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-22	담당부서 작성자	(도시개발사업단 / 도시개발과) (서신우/061-270-3434)
정 책 명	임성지구 도시개발사업
사업개요	○ 위 치 : 목포시 석현동, 옥암동 일원 ○ 규 모 : 1,979,000㎡(60만평) ○ 계획인구 : 2만명(7,920세대) ○ 시행방식 : 혼용방식(환지 및 수용) ○ 사업기간 : 2013 ~ 2020년 ○ 사 업 비 : 2,335억원 (공사비1,100/보상비414/부담금442/용역비 등 기타379)
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘13. 10. 24 : 도시개발구역지정 고시 - 관련자 : 도시개발과 담당자 이주현, 책임관 나상원, 과장 박옥주 단장 김치중, 부시장 주동식, 시장 정종득 ○ ‘15. 10. 22 : 개발계획 수립 승인 및 고시 - 관련자 : 도시개발과 담당자 김세휘, 책임관 오용현, 과장 박금재 단장 심인섭, 부시장 이재철, 시장 박홍률 ○ ‘16. 7. 27 : 민간사업자 우선협상대상자 선정 - 관련자 : 도시개발과 담당자 김기복, 책임관 김병국, 과장 김형석 단장 심인섭, 부시장 이재철, 시장 박홍률 ○ ‘17. 3. 20 : 시의회 사업협약체결 보증금 반환 동의안 심사의결 - 관련자 : 도시개발과 담당자 서신우, 책임관 김병국, 과장 김형석 단장 김창옥, 부시장 이인곤, 시장 박홍률 ○ ‘17. 3. 28 : 우선협상대상자 선정 취소 - 관련자 : 도시개발과 담당자 서신우, 책임관 김병국, 과장 김형석 단장 김창옥, 부시장 이인곤, 시장 박홍률 ○ ‘17. 4. 11 : 목포시․ LH 임성지구 기본협약 체결 - 관련자 : 도시개발과 담당자 서신우, 책임관 김병국, 과장 김형석 단장 김창옥, 부시장 이인곤, 시장 박홍률

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	공원녹지과	②담당자 (전화번호)	녹지7급 장복천 공원녹지과장 김진호 (061-270-3514)
③정책사업명	녹색 쌈지공원 조성 (2017-23)
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입 되는 사업	⑤사업기간	2016.~ 2017.
⑥주요내용	□ 사업의 목적 ○생활권 주변의 자투리 공간을 활용하여 숲 공간으로 조성 하여 숲과 더불어 행복한 녹색도시 목포 조성과 숲 네트 워크를 통한 숲의 녹색서비스 강화 및 녹색공간의 질적 향상을 극대화 하기 위함. □ 사업개요 ○ 위 치 : 목포시 상동 1080외 ○ 규 모 : 도민의 숲 조성 등 23건(2.5ha) ○ 형 태 : 도시숲, 가로화단, 쌈지숲 조성 등 ○ 사 업 비 : 1,000백만원(광특 500, 시비 500) □ 추진사항 ○ 2016. 2. ~ 3. : 현장조사 및 실시설계 완료 ○ 2016. 3. ~ 4. : 공사 착공 및 발주 ○ 2016. 4. ~ 5. : 하당 경관녹지조성 등 9개소 준공 ○ 2016. 6. ~ 9. : 7호광장 교통섬 조성 등 5개소 준공 ○ 2016.10. ~ 12. : 한국아델리움 주변 꽃길숲 조성 8개소 준공 ○ 2016. 11.~ 12. : 전남 경북 도민의 숲 조성공사 착공 □ 추진계획 ○ 2017. 6. : 전남 경북 도민의 숲 조성 준공

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-23	담당부서 작성자	(도시발전사업단 / 공원녹지과) (녹지7급 장복천 / 061-270-3514)
정 책 명	녹색 쌈지공원 조성
사업개요	○ 추진배경 - 생활권 주변의 자투리 공간을 활용하여 숲 공간으로 조성 하여 숲과 더불어 행복한 녹색도시 목포 조성과 숲 네트 워크를 통한 숲의 녹색서비스 강화 및 녹색공간의 질적 향상을 극대화 하기 위함. ○ 추진기간 : 2016 ~ 2017 ○ 총사업비 : 1,000백만원(지특 500, 시비 500) ○ 사 업 량 : 도민의 숲 조성 등 23개소(2.5ha)
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘16. 1. 27. : 2016년 도시녹하 사업 계획보고 - 관련자 : 공원녹지과 실무관 장복천, 책임관 이길용, 과장 김진호 ○ ‘16. 2. 12 . : 현장조사 및 실시설계 - 관련자 : 공원녹지과 실무관 장복천, 책임관 이길용, 과장 김진호 ○ ‘16. 2. 24. : 하당 연결녹지 외 1개소 입찰 - 관련자 : 공원녹지과 실무관 장복천, 책임관 이길용, 과장 김진호 ○ ‘16. 3. 24. : 옥암수변 사색의 숲 조성 등 공사준공 - 관련자 : 공원녹지과 실무관 장복천, 책임관 이길용, 과장 김진호 ○ ‘16. 5. 1. : 용당 가로변 경관숲 조성 등 8개사업 준공 - 관련자 : 공원녹지과 실무관 장복천, 책임관 이길용, 과장 김진호 ○ ‘16. 9. 22. : 7호광장 교통섬 조성공사 등 5개사업 준공 - 관련자 : 공원녹지과 실무관 장복천, 책임관 이길용, 과장 김진호 ○ ‘16. 11. 22. : 한국아델리움 주변 꽃길숲 조성 등 8개사업 준공 - 관련자 : 공원녹지과 실무관 장복천, 책임관 이길용, 과장 김진호 ○ ‘16. 12. 12. : 전남 경북 도민의 숲 조성공사 착공 - 관련자 : 공원녹지과 실무관 장복천, 책임관 이길용, 과장 김진호

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	공원녹지과	②담당자 (전화번호)	녹지7급 전욱형 공원녹지과장 김진호 (061-270-8344)
③정책사업명	입암산 ~ 용라산 산맥연결(생태통로) 사업 (2017-24)
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입 되는 사업	⑤사업기간	2015.~ 2017.
⑥주요내용	□ 사업의 목적 ○입암산과 용라산 사이 백년로 단절구간 산맥연결사업 추진으로 단절된 산림생태축 연결, 부족한 등산 여가공간 확충, 트레킹길 기반구축 등 활력있는 사시 산림 문화공간 창출 □ 사업개요 ○ 위 치 : 목포시 상동 1080, 용해동 970(백년로 상단) ○ 규 모 : 산맥연결 1식 (L=100m, B=35m) ○ 형 태 : 생태통로 조성후 상부 수목 식재 ○ 사 업 비 : 3,600백만원(광특 1,800, 시비 1,800) □ 추진사항 ○ 2015. 6. 19 : 지방재정 투자심사(적정) ○ 2015. 7. 14 : 실시설계 용역 착수 ○ 2015. 11. 25 : 실시설계 중간 보고회 개최 ○ 2016. 9. 21 : 도 계약심사 사전 심의 ○ 2016. 10. 17 : 타 기관 협의(한전, KT, 도시가스 등) ○ 2016. 12. 2 : 공사 계약 의뢰 ○ 2017. 1. 17 : 공사 착공 □ 추진계획 ○ 2018. 1월 : 공사 준공 예정

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-24	담당부서 작성자	(도시발전사업단 / 공원녹지과) (전욱형 / 061-270-8344)
정 책 명	입암산 ~ 용라산 산맥연결(생태통로) 사업
사업개요	○ 추진배경 - 도로개설로 인한 단절된 산림의 생태적 복원과 지역주민들의 산리문화 여가환경 확충과 도시경관 개선에 기여 ○ 추진기간 : 2015 ~ 2017 ○ 총사업비 : 3,600백만원(지특 1,800, 시비 1,800) ○ 사 업 량 : 생태다리 연결 1식(L=100m, B=35m)
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘15. 6. 19. : 지방재정 투융자심사 완료 - 관련자 : 공원녹지과 실무관 김영범, 책임관 안동석, 과장 김진호 ○ ‘15. 7. 14 . : 실시설계 용역 착수 - 관련자 : 공원녹지과 실무관 김영범, 책임관 안동석, 과장 김진호 ○ ‘15. 9. 9. : 실시설계 착수 보고회 개최 - 관련자 : 공원녹지과 실무관 김영범, 책임관 안동석, 과장 김진호 ○ ‘15. 11. 25. : 실시설계 중간 보고회 개최 - 관련자 : 공원녹지과 실무관 김영범, 책임관 안동석, 과장 김진호 ○ ‘16. 9. 21. : 도 계약심사 완료 - 관련자 : 공원녹지과 실무관 전욱형, 책임관 최양선, 과장 김진호 ○ ‘16. 11. 24. : 실시설계 용역 준공 - 관련자 : 공원녹지과 실무관 전욱형, 책임관 최양선, 과장 김진호 ○ ‘16. 12. 1. : 발주계획 보고 - 관련자 : 공원녹지과 실무관 전욱형, 책임관 최양선, 과장 김진호 ○ ‘17. 1. 17. : 공사 착공 - 관련자 : 공원녹지과 실무관 전욱형, 책임관 최양선, 과장 김진호

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	기획예산과	②담당자 (전화번호)	행정7급 최영종 기획예산과장 김천환 (061-270-8504)
③정책사업명	목포비전 ‘2030 중장기 종합발전계획’ 수립 용역 (2017-25)
④선정기준	1억원 이상 용역 사업	⑤사업기간	2017. 4. ~ 2017. 12.
⑥주요내용	□ 목 적 ○ 급변하는 미래환경에 능동적으로 대처할 선제적․실용적인 정책개발체제를 확립하고 ○ 중․장기적 마스터플랜 제시로 시정발전의 구심점 구축 □ 사업개요 ○ 수립기간 : 2017. 4월 ~ 12월(9개월) ○ 수행방법 : 전문학술 연구업체 또는 국책 전문용역기관에 용역의뢰 ○ 소요예산 : 100백만원 □ 추진내용 ○ 시간적범위 : 기준년도 ‘16년(12.31.) 목표연도 2030년 - 단기사업전략 : ‘17~’20 - 중기전략구상 : ‘21~’25 - 장기비전계획 : ‘26~’30 ○ 공간적범위 : 목포시 및 인근 시․군 포함 (목포, 무안, 신안, 영암, 해남) ○ 내용적범위 - 관광, 문화, 산업, 환경, 재생 등 지역잠재력 조사․분석 목포 비전 - 정부 투자 정책사업을 전망한 미래 먹거리산업 로드맵 작성

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-25	담당부서 작성자	(기획관리국 / 기획예산과) (최영종 / 061-270-8504)
정 책 명	목포비전 ‘2030 중장기 종합발전계획’ 수립 용역
사업개요	○ 추진목적 : 급변하는 미래환경에 능동적으로 대처할 선제적․ 실용적인 정책개발체제를 확립하고, 중․장기적 마스터플랜 제시로 시정발전의 구심점 구축 ○ 추진기간 : 2017. 4월 ~ 12월(9개월) ○ 방 법 : 전문학술 연구업체 또는 국책 전문용역기관에 용역의뢰 ○ 소요예산 : 100백만원
추진경과 및 사업 관련자	□ 추진경과 및 사업관련자 현황 ○ 2017. 4. : 계획수립 - 관련자 : 기획예산과 실무관 최영종, 담당 박승철, 과장 김천환 기획관리국장 김치중, 부시장 이인곤, 시장 박홍률 ○ 2017. 4. 26. : 계약심사 및 일상감사 의뢰 - 관련자 : 기획예산과 실무관 최영종, 담당 박승철, 과장 김천환 ○ 2017. 5. 1. : 계약심사 및 일상감사 결과 수신 - 관련자 : 감사실 실무관 박철우, 담당 김정수, 실장 김황용 ○ 2017. 5. 2. : 계약의뢰 - 관련자 : 기획예산과 실무관 최영종, 담당 박승철, 과장 김천환

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	회 계 과	②담당자 (전화번호)	시설7급 천승환 회계과장 정병술 (270-8554)
③정책사업명	대성동 주민센터 신축(2017-26)
④선정기준	10억원 이상 예산투입	⑤사업기간	2017. 5. ~ 2018. 11.
⑥주요내용	■ 사업개요 • 목 적 : 건물 노후화 및 협소에 따른 신축(자치위원회 건의) • 사업비 : 2,050,000천원(토지보상, 설계용역, 건축비 포함) • 기 간 : 착공일로부터 6개월 ■ 추진일정 • 전라남도 지방재정 투자 심사 승인(‛17. 5) • 시청사 추가 부지 매입(‛17. 8) • 설계용역 발주 (‛17. 09) • 기본 및 실시설계 주민설명회 개최 (‛18. 03) • 인허가 협의 및 공사 착공 (‛18. 05) • 개청식 및 준공식 (‛18. 11) ※ 기존 주민센터 규모(1990년 건립) - 지상3층/연면적 471.91㎡

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-26	담당부서 작성자	(기획관리국 / 회계과) (천승환/270-8554)
정 책 명	대성동 주민센터 신축
사업개요	○ 추진배경 - 건물 노후화 및 협소에 따른 신축(자치위원회 건의) ○ 추진기간 : 2017. 5 ~ 2018. 11 ○ 총사업비 : 2,050백만원 ○ 주요내용 - 지상2층, 연면적 900㎡ 신축
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘17. 5 : 전라남도 투자심사 - 관련자 : 전라남도 기획계산과 실무관 이종현 전라남도 자치행정과 실무관 김선주

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	관광과	②담당자 (전화번호)	시설7급 김현곤 관광과장 조건형 (061-270-8216)
③정책사업명	목포 해안힐링랜드 조성사업 (2017-27)
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입 되는 사업	⑤사업기간	2016 ~ 2017
⑥주요내용	□ 사업의 목적 ○ 전남 서남권 해양 및 육상교통의 중심도시 위상에 맞는 관광인프라 구축 □ 사업개요 ○ 위 치 : 목포시 달동 고하도 일원 ○ 규 모 : 총 4.75㎞ ∙해변 기암괴석과 자연절경 전망용 데크로 3.0㎞ ∙해안가 자연숲 탐방로 1.5㎞, 연결진입로 0.25㎞ ○ 사업기간 : 2016년 ～ 2017년 ○ 사 업 비 : 3,500백만원(국비 2,450, 시비 1,050) □ 추진사항 ○ ‘16. 10 : 투자심사 및 용역과제 사전심의 완료 ○ ‘16. 11 : 일상감사 및 계약심사 완료 ○ ‘16. 12 : 실시설계 용역 계약 ○ ‘17. 1 ~ : 실시설계 용역 추진 중 □ 추진계획 ○ ’17. 5 : 실시설계 용역 완료 ○ ’17. 6 ~ 12 : 공사 착공 및 준공

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-27	담당부서 작성자	(관광경제수산국/관광과) (김현곤/061-270-8216)
정 책 명	목포 해안힐링랜드 조성사업
사업개요	○ 추진배경 ∙전남 서남권 해양 및 육상교통의 중심도시 위상에 맞는 관광인프라 구축 ○ 추진기간 : 2016년 ～ 2017년 ○ 사 업 비 : 3,500백만원(국비 2,450, 시비 1,050) ○ 규 모 : 총 4.75㎞ ∙해변 기암괴석과 자연절경 전망용 데크로 3.0㎞ ∙해안가 자연숲 탐방로 1.5㎞, 연결진입로 0.25㎞
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘16. 10 : 투자심사 및 용역과제 사전심의 완료 ∙관련자 : 관광과 과장 조건형, 책임관 구 준, 책임관 김광호 ○ ‘16. 11 : 일상감사 및 계약심사 완료 ∙관련자 : 관광과 과장 조건형, 책임관 구 준, 책임관 김광호 ○ ‘16. 12 : 실시설계 용역 계약 ∙관련자 : 관광과 과장 조건형, 책임관 구 준, 책임관 김광호 ○ ‘17. 1 ~ : 실시설계 용역 추진 중 ∙관련자 : 관광과 과장 조건형, 책임관 김광호, 실무관 김현곤

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	해양항만과	②담당자 (전화번호)	시설7급 윤재웅 해양항만과장 이영권 (061-270-8328)
③정책사업명	제3차 도서종합개발사업 (2017-28)
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2008~2017
⑥주요내용	❐ 사업개요 ○ 목 적 : 도서지역의 정주기반 시설을 확충하여 생산활동 지원 및 도서민들의 삶의 질 향상 도모 ○ 위 치 : 목포시 유달동(율도, 달리도, 외달도) ○ 사업기간 : 2008 ～ 2017 ○ 사업내용 : 복지회관, 도로개설 및 확포장, 선착장 등 25건 ○ 사 업 비 : 8,514백만원(국비 5,694, 도비 1,060, 시비 1,060) ❐ 사업추진현황 ○ 2008. 12. : 달리1구 복지회관 증축공사 완료 ○ 2008. 12. : 외달도 해안데크 설치공사 완료 ○ 2009. 12. : 외달도 해안산책로 개설공사 완료 ○ 2009. 12. : 도서별 유형화 종합계획 수립용역 완료 ○ 2010. 12. : 달리1구~2구 연결도로 개설공사 완료 ○ 2010. 12. : 달리도 해안도로 개설공사 완료 ○ 2011. 12. : 율도1구, 2구 부잔교 설치 완료 ○ 2011. 12. : 달리도 마을안길 공사 완료 ○ 2011. 12. : 외달도 교회 ~ 물양장간 도로개설 완료 ○ 2012. 12. : 율도 당넘 해안도로 개설 완료 ○ 2012. 12. : 율도 큰들앞 옹벽 설치 완료 ○ 2012. 12. : 율도 금수동~떡바위간 도로개설 완료 ○ 2012. 12. : 율도 SK텔레콤 ~버던입구 도로개설 완료

⑥주요내용	○ 2012. 12. : 달리도 해안도로 피해복구 완료 ○ 2013. 12. : 율도1구~큰뜰간 도로 확포장 완료 ○ 2013. 12. : 달리도 77호선~토치끝 도로개설 완료 ○ 2014. 12. : 달리도 동명마을~배양장 도로개설 완료 ○ 2014. 12. : 달리도 노두마을 안길포장 완료 ○ 2015. 12. : 율도1구 물양장 조성 완료 ○ 2016. 9. : 외달도 물양장 진입도로 완료 ○ 2017. 4. : 달리도 달리분교~혼불마을 도로개설 추진 ○ 2017. 4. : 율도 황세기~홍골저수지 도로개설 추진 ○ 2017. 4. : 율도 고분도~모래톱 도로개설 추진 ○ 2017. 4. : 달리도 감창골 농업시설정비 추진 ○ 2017. 4. : 달리2구 선착장 정비 추진

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-28	담당부서 작성자	(관광경제수산국 / 해양항만과) (윤재웅/061-270-8328)
정 책 명	제3차 도서종합개발사업
사업개요	○ 추진배경 - 도서지역의 정주기반 시설을 확충하여 생산활동 지원 및 도서민들의 삶의 질 향상 도모 ○ 추진기간 : 2008.1. ~ 2017. 12. ○ 총사업비 : 8,514백만원(국비 5,694, 도비 1,060, 시비 1,060) ○ 주요내용 - 복지회관, 도로개설 및 확포장, 선착장 등 26건
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 2008. 8. : 외달도 해안데크 설치공사 완료 - 관련자 : 해양수산과 과장 정효진, 책임관 유상보, 실무관 정성훈 ○ 2009. 1. : 달리1구 복지회관 증축공사 완료 - 관련자 : 해양수산과 과장 정효진, 책임관 유상보, 실무관 정성훈 ○ 2009. 12. : 외달도 해안산책로 조성공사 완료 - 관련자 : 해양수산과 과장 정효진, 책임관 유상보, 실무관 정성훈 ○ 2010. 12. : 도서별 유형화 종합계획 수립용역 완료 - 관련자 : 해양수산과 과장 정효진, 책임관 이근직, 실무관 김방선 ○ 2010. 9. : 달리도 마을안길 확포장 공사 완료 - 관련자 : 해양수산과 과장 정효진, 책임관 이근직, 실무관 김방선 ○ 2011. 11. : 달리도 해안도로 개설공사 완료 - 관련자 : 해양수산과 과장 정효진, 책임관 이근직, 실무관 김방선 ○ 2012. 8. : 달리도 해안도로 보완공사 완료 - 관련자 : 해양수산과 과장 정효진, 책임관 이근직, 실무관 김세휘 ○ 2012. 12. : 율도 해수욕장 기반시설 설치공사 완료 - 관련자 : 해양수산과 과장 정효진, 책임관 이근직, 실무관 김세휘

⑥주요내용

○ 2012. 12. : 율도1구, 2구 부잔교 설치 완료

- 관련자 : 해양수산과  과장 정효진, 책임관 이근직, 실무관 김세휘

○ 2013.  2. : 율도 큰들앞 옹벽 설치 완료

- 관련자 : 해양수산과  과장 정효진, 책임관 이근직, 실무관 김세휘

○ 2013.  9. : 율도 금수동~떡바위간 도로개설 완료

- 관련자 : 해양수산과  과장 정효진, 책임관 권장주, 실무관 정봉채

○ 2013.  7. : 달리도 해안도로 피해복구 완료

- 관련자 : 해양수산과  과장 정효진, 책임관 권장주, 실무관 정봉채

○ 2013. 12. : 달리도 77호선~토치끝 도로개설 완료

- 관련자 : 해양수산과  과장 정효진, 책임관 권장주, 실무관 정봉채

○ 2014.  1. : 율도 SK텔레콤 ~버던입구 도로개설 완료

- 관련자 : 해양수산과  과장 정효진, 책임관 권장주, 실무관 정성훈

○ 2014.  4. : 외달도 교회 ~ 물양장간 도로개설 완료

- 관련자 : 해양수산과  과장 정효진, 책임관 권장주, 실무관 정성훈

○ 2014.  6. : 율도1구~큰뜰간 도로 확포장 완료

- 관련자 : 해양수산과  과장 정효진, 책임관 권장주, 실무관 정성훈

○ 2014. 12. : 달리도 노두마을 안길포장 완료

- 관련자 : 해양수산과  과장 정효진, 책임관 문상규, 실무관 정성훈

○ 2015.  4. : 달리도 동명마을~배양장 도로개설 완료

- 관련자 : 해양수산과  과장 정효진, 책임관 문상규, 실무관 강기한

○ 2015. 10. : 율도1구 물양장 조성 완료

- 관련자 : 해양수산과  과장 정효진, 책임관 문상규, 실무관 강기한

○ 2016.  9. : 외달도 물양장 진입도로 완료

- 관련자 : 해양수산과  과장 이영권, 책임관 문상규, 실무관 윤재웅

○ 2017.  4. : 달리도 달리분교~혼불마을 도로개설 추진

- 관련자 : 해양항만과  과장 이영권, 책임관 문상규, 실무관 박창현

○ 2017.  4. : 율도 황세기~홍골저수지 도로개설 추진

- 관련자 : 해양항만과  과장 이영권, 책임관 문상규, 실무관 윤재웅

○ 2017.  4. : 율도 고분도~모래톱 도로개설 추진

- 관련자 : 해양항만과  과장 이영권, 책임관 문상규, 실무관 윤재웅

○ 2017.  4. : 달리도 감창골 농업시설정비 추진

- 관련자 : 해양항만과  과장 이영권, 책임관 문상규, 실무관 윤재웅

○ 2017.  4. : 달리2구 선착장 정비 추진

- 관련자 : 해양항만과  과장 이영권, 책임관 문상규, 실무관 윤재웅

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	해양항만과	②담당자 (전화번호)	시설7급 윤재웅 해양항만과장 이영권 (061-270-8328)
③정책사업명	제2차 연안정비사업 (2017-29)
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입되는 사업	⑤사업기간	2010~2019
⑥주요내용	❐ 사업개요 ○ 목 적 : 해안침식 및 자연재해로부터 훼손된 연안을 안전하게 복원하여 친환경 연안조성 ○ 위 치 : 목포시 유달동(율도, 달리도, 외달도) ○ 사업기간 : 2013 ～ 2019 ○ 사업내용 : 삽진지구 등 5개 지구 호안정비 ○ 사 업 비 : 3,510백만원(국비 2,457, 시비 1,053) ❐ 사업추진현황 ○ 2011. 12. : 삽진지구 연안정비사업 착공 ○ 2013. 7. : 삽진지구 연안정비사업 완료 ○ 2013. 9. : 대반지구 연안정비사업 착공 ○ 2014. 1. : 대반지구 연안정비사업 완료 ○ 2016. 9. : 외달도지구 연안정비사업 착공 ○ 2017. 4. : 외달도지구 연안정비사업 추진

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-29	담당부서 작성자	(관광경제수산국 / 해양항만과) (윤재웅/061-270-8328)
정 책 명	제2차 연안정비사업
사업개요	○ 추진배경 - 해안침식 및 자연재해로부터 훼손된 연안을 안전하게 복원하여 친환경 연안조성 ○ 추진기간 : 2010.1. ~ 2019. 12. ○ 총사업비 : 3,510백만원(국비 2,457, 시비 1,053) ○ 주요내용 - 삽진지구 등 5개 지구 호안정비
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 2011. 12. : 삽진지구 연안정비사업 착공 - 관련자 : 해양수산과 과장 정효진, 책임관 이근직, 실무관 김방선 ○ 2013. 7. : 삽진지구 연안정비사업 완료 - 관련자 : 해양수산과 과장 정효진, 책임관 권장주, 실무관 정봉채 ○ 2013. 9. : 대반지구 연안정비사업 착공 - 관련자 : 해양수산과 과장 정효진, 책임관 권장주, 실무관 정봉채 ○ 2014. 1. : 대반지구 연안정비사업 완료 - 관련자 : 해양수산과 과장 정효진, 책임관 권장주, 실무관 정봉채 ○ 2016. 9. : 외달도지구 연안정비사업 착공 - 관련자 : 해양수산과 과장 이영권, 책임관 문상규, 실무관 윤재웅 ○ 2017. 4. : 외달도지구 연안정비사업 추진 - 관련자 : 해양항만과 과장 이영권, 책임관 문상규, 실무관 윤재웅

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

수산진흥과

②담당자

(전화번호)

해양수산6급 이근직

수산진흥과장  정효진

(061-270-8229)

③정책사업명

수산물 유통구조개선(수산식품산업 육성) (2017-30)

④선정기준

10억원 이상의 예산이 투입되는 사업

⑤사업기간

2014. 1.~2018. 12

⑥주요내용

○ 사업목적

- 수산물 유통의 규모화, 표준화 등 One-Stop 지원을 통해    물류비 및 어업경비 절감

○ 위    치 : 전남 목포시 고하대로 597번길 118번지 일원

○ 규    모 : 부지 101,951㎡, 건물연면적 14,265㎡

○ 내    용 : 위판장(선어, 새우젓), 가공시설, 냉동ㆍ냉장,

제빙ㆍ저빙, 판매장, 보급창고 등

○ 사 업 비                                (단위 :  천원)

구분	계	국비(50%)	지방비 (20%)	자담(30%)	비고
계	35,612,000	17,806,000	7,122,400	10,683,600
공사비	32,065,000	16,032,500	6,413,000	9,619,500
부대경비	3,547,000	1,773,500	709,400	1,064,100

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-30	담당부서 작성자	(관광경제수산국/수산진흥과) (이근직/061-270-8229)
정 책 명	수산물 유통구조개선(수산식품산업 육성)
사업개요	○ 추진배경 - 목포 내항에 위치한 어항기능이 국가계획에 의해 북항으로 이전하게 됨에 따라 수산물의 생산ㆍ가공ㆍ유통ㆍ물류기능을 종합적으로 지원하는 수산종합지원단지 조성 ○ 추진기간 : 2014. 1. ~ 2018. 12. ○ 총사업비 : 35,612백만원 ○ 주요내용 : 위판장(선어, 새우젓), 가공시설, 냉동ㆍ냉장, 제빙ㆍ저빙, 판매장, 보급창고 등
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 2011. 12. : 기본계획 및 타당성조사 연구용역 - 관련자 : 목포수협장, KMI 주문배 ○ 2014. 01. : 신규사업 예산 확정(3개년 사업) - 관련자 : 해양수산과장 정효진, 담당 이근직 - 관련자 : 전라남도 수산가공유통과 김성수 수산경영담당 황통성, 주무관 조우현 - 관련자 : 해양수산부 수산정책실 유통정책과 김주성 ○ 2014. 10. 01. : 조달청 맞춤형서비스(일괄대행)협약 - 관련자 : 목포수협장, 조달청(이풍욱) ○ 2014. 12 : 2014년 사업 보조금교부결정 및 송금 - 관련자 : 해양수산과장 정효진, 담당 이근직 ○ 2015. 02. 26. : 기본 및 실시설계 용역계약 - 관련자 : 목포수협장, 조달청(이풍욱), (주)범건축 ○ 2015. 03. 18. ~ 11. 18. : 교통영향평가, 개선대책 용역 - 관련자 : 목포수협장, 조달청(이풍욱), (주)원우기술개발 ○ 2015. 03. 25. : 기본 및 실시설계 용역착수(240일) - 관련자 : (주)범건축 ○ 2015. 06. 18. : 계획설계도서 적정성 검토(조달청) - 관련자 : 목포수협장, 조달청(이풍욱), (주)범건축 ○ 2015. 08. 25. : 중간설계 검토(공사비 218억원 증) - 관련자 : 해양수산과장 정효진, 담당 이근직 - 관련자 : 목포수협장, (주)범건축 ○ 2015. 08. 28 : 총사업비 조정방안 협의(조달청) - 관련자 : 해양수산과장 정효진, 담당 이근직 - 관련자 : 목포수협장, 조달청(이풍욱), (주)범건축 ○ 2015. 10. 14. : 사업규모 재조정(39,979백만원, 19,764㎡) - 관련자 : 목포수협장, (주)범건축 ○ 2015. 11. 09. : 중간설계 적정성 검토 합동토론회 - 관련자 : 해양수산과장 정효진, 담당 이근직 - 관련자 : 목포수협장, 조달청장, (주)범건축 ○ 2015. 12. 04. : 총사업비 등 사업계획 조정협의 - 관련자 : 해양수산과장 정효진, 담당 이근직 - 관련자 : 해양수산부 수산정책실, 유통정책과 김주성 기획재정부 예산실 사회예산심의관 총사업비관리과 - 관련자 : 목포수협장 ○ 2015. 12 : 2015년 사업 보조금교부결정 및 송금 - 관련자 : 해양수산과장 정효진, 담당 이근직 ○ 2016. 01. 29. : 총사업비 및 사업계획 확정 - 관련자 : 해양수산과장 정효진, 담당 이근직 - 관련자 : 해양수산부 수산정책실, 유통정책과 강태구 기획재정부 예산실 사회예산심의관 총사업비관리과 - 관련자 : 목포수협장 ○ 2016. 2∼8월 : 기본설계 완료보고 및 총사업비 조정 협의 진행 - 관련자 : 해양수산과장 정효진, 담당 이근직 - 관련자 : 해양수산부 수산정책실, 유통정책과 강태구 기획재정부 예산실 사회예산심의관 총사업비관리과 - 관련자 : 목포수협장 ○ 2016. 03. 22. : 조달청 관급자재 심의(조달청) - 관련자 : 해양수산과장 정효진, 담당 이근직 - 관련자 : 목포수협장, 조달청(이풍욱) ○ 2016. 03. 31. : 비관리청항만공사 시행허가 승인 - 관련자 : 목포지빙해양수산청장 ○ 2016. 04. 22. : 건축심의(목포시청) - 관련자 : 건축행정과장 서태빈, 담당 윤주명 ○ 2016. 08. 23. : 실시설계 1차 적정성검토 합동토론회 - 관련자 : 해양수산과장 정효진, 담당 이근직 - 관련자 : 목포수협장, 조달청(이풍욱 외) ○ 2016. 09. 05. : 실시설계 2차 적성성검토 합동토론회 - 관련자 : 해양수산과장 정효진, 담당 이근직 - 관련자 : 목포수협장, 조달청(이풍욱 외) ○ 2016. 09. 05. : 중간설계 총사업비 조정심의 - 관련자 : 해양수산과장 정효진, 담당 이근직 - 관련자 : 해양수산부 수산정책실, 유통정책과 강태구 기획재정부 예산실 사회예산심의관 총사업비관리과 - 관련자 : 목포수협장 ○ 2016. 10. 19 : 실시설계 총사업비 조정심의 - 관련자 : 해양수산과장 정효진, 담당 이근직 - 관련자 : 해양수산부 수산정책실, 유통정책과 강태구 기획재정부 예산실 사회예산심의관 총사업비관리과 - 관련자 : 목포수협장 ○ 2016. 12 : 공사, 감리용역 계약 - 관련자 : 목포수협장, 조달청장 ○ 2016. 12 : 선급금 지급(2,000백만원) - 관련자 : 목포수협장 ○ 2016. 12 : 2016년 사업 보조금교부결정 및 송금 - 관련자 : 해양수산과장 이영권, 담당 이근직

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서

자원순환과

②담당자

(전화번호)

공업6급 제갈명

자원순환과장 김덕용    (061-270-8585)

③정책사업명

목포권 광역위생매립장 순환이용 정비사업  (2017-31)

④선정기준

10억원 이상의 예산이 투입

되는 사업

⑤사업기간

2016 ~ 2021

⑥주요내용

□ 사업목적

○ 생활폐기물 매립시설의 사용연한이 도래하고 있으나 신규 매립시설 확보가 어려우므로, 사용중인 매립시설의 일부 폐기물을 굴착 후 재사용함으로써 매립시설의 사용기간을 연장하기 위함.

□ 사업개요

○ 위    치 : 목포시 대양로 241-41 일원(목포시 위생매립장내)

○ 사 업 량 : 굴착 600,000㎥, 선별 750,000㎥, 조성 50,690㎡

○ 사 업 비 : 40,820백만원(국비 19,146, 시비 21,674)

□ 주요 추진상황

○ 2014. 2. : 타당성조사 및 기본계획 용역완료

○ 2017. 4. : 설계용역 집행계획 및 PQ제출안내 공고

□ 추진계획

○ 2017. 5 ~ 2018.  2 : 용역 착수 및 완료(10개월)

○ 2018. 7 ~ 2021. 12 : 공사 착공 및 준공(3년6개월)

□ 연차별 투자 계획                       (단위: 백만원)

재원별	계	2016년	2017년	2018년	2019년	2020이후
계	40,820	1,000	7,934	9,882	9,882	12,122
국 비	19,146	500	3,729	4,644	4,644	5,629
시 비	21,674	500	4,205	5,238	5,238	6,493

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-31	담당부서 작성자	(관광경제수산국/자원순환과) (제갈명 / 061-270-8585)
정 책 명	목포권 광역위생매립장 순환이용 정비사업
사업개요	○ 사업목적 : 생활폐기물 매립시설의 사용연한이 도래하고 있으나 신규 매립시설 확보가 어려우므로, 사용중인 매립시설의 일부 폐기물을 굴착 후 재사용함으로써 매립시설의 사용기간을 연장하기 위함. ○ 사업기간 : 2016년 ~ 2021년 ○ 위 치 : 목포시 대양로 241-41 일원(목포시 위생매립장내) ○ 사 업 량 : 굴착 600,000㎥, 선별 750,000㎥, 조성 50,690㎡ ○ 사 업 비 : 40,820백만원(국비 19,146, 시비 21,674)
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘13.3.11 : 타당성조사 및 기본계획 용역시행 계획수립 - 관련자 : 자원순환과 담당자 장진영, 담당 염송주, 과장 박석형 ○ ‘14.2.13 : 타당성조사 및 기본계획 용역완료 - 관련자 : 자원순환과 담당자 이태양, 담당 강순집, 과장 공태주 ○ ‘15.4.10 : ’16년 국고보조사업 신청 - 관련자 : 자원순환과 담당자 이태양, 담당 류희열, 과장 문명식 ○ ‘15.8.24 : 중기지방재정계획 반영(2016~2020) - 관련자 : 자원순환과 담당자 이태양, 담당 류희열, 과장 문명식 ○ ‘15.10.16 : 용역과제 사전심사 - 관련자 : 자원순환과 담당자 이태양, 담당 류희열, 과장 문명식 ○ ‘15.12.7 : 설계비 국비 확보(국비 5억) - 관련자 : 자원순환과 담당자 제갈명, 담당 류희열, 과장 문명식 ○ ‘16.3.2 : 지방재정투자사업 심사 - 관련자 : 자원순환과 담당자 제갈명, 담당 염송주, 과장 문명식 ○ ‘16.3.3 : ’17년 국고보조사업 신청 - 관련자 : 자원순환과 담당자 제갈명, 담당 염송주, 과장 문명식 ○ ‘16.7.29 : 설계비 시비 확보(시비 5억) - 관련자 : 자원순환과 담당자 제갈명, 담당 염송주, 과장 문명식 ○ ‘16.9.20 : 대형공사 입찰방법 심의 - 관련자 : 자원순환과 담당자 제갈명, 담당 박동구, 과장 문명식 ○ ‘17.1.13 : 설계용역 계약심사 - 관련자 : 자원순환과 담당자 제갈명, 담당 박동구, 과장 문명식 ○ ‘17.3.17 : 설계용역 PQ심의 - 관련자 : 자원순환과 담당자 제갈명, 담당 박동구, 과장 김덕용 ○ ‘17.3.31 : 설계용역 계약심의 - 관련자 : 자원순환과 담당자 제갈명, 담당 박동구, 과장 김덕용 ○ ‘17.4.10 : 설계용역 일상감사 - 관련자 : 자원순환과 담당자 제갈명, 담당 박동구, 과장 김덕용 ○ ‘17.4.17 : 설계용역 계약의뢰 - 관련자 : 자원순환과 담당자 제갈명, 담당 박동구, 과장 김덕용 ○ ‘17.4.19 : 설계용역 집행계획 및 PQ제출안내 공고 - 관련자 : 자원순환과 담당자 제갈명, 담당 박동구, 과장 김덕용

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도시계획과	②담당자 (전화번호)	시설7급 이주현 도시계획과장 나상원 (270-3445)
③정책사업명	동명동 송도마을 취약지 정비사업 (2017-32)
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입 되는 사업	⑤사업기간	2016. 2. ~ 2019. 12.
⑥주요내용	□ 추진목적 ○ 동명동 송도마을 도시 취약지역은 노후 건축물, 재해 위험 등 안전 문제, 소방도로·상하수도 등 인프라 부족, 사회적 약자가 밀집된 주거환경이 매우 취약한 지역*으로 최소한의 생활여건 개선 필요 □ 사업개요 ○ 위 치 : 동명동 162번지 일원(동명동 77계단주변, 송도마을) ○ 사 업 량 : 14,547㎡(126가구), 5개분야 29개사업 - 안전확보시설 : 옹벽정비, 보안등, 방범용 cctv, 마을안길 노면정비 등 - 생활․위생 인프라 구축 : 노후 상하수도 정비, 재래식화장실 개선 등 - 일자리문화․복지휴먼케어 : 게스트하우스, 마을공방, 마을안내센터 등 - 주택정비 지원 : 빈집정비, 슬레이트 주택정비, 집수리 등 - 주민역량 강화 : 경로당 리모델링, 워크숍, 교육, 선진지 견학 등 ○ 사 업 비 : 4,301백만원(국비 3,287/ 지방비 1,014) □ 추진사항 ○ 2015. 10 : 사업대상지 현지 실태조사 및 주민설명회 개최 ○ 2016. 2 : 2016년도 새뜰마을사업 선정 ○ 2016. 5 : 새뜰마을사업 현장컨설팅(지역발전위, 국토부, LH, 전문가) ○ 2017. 2 : 마스터플랜 수립 및 실시설계용역 착수 ○ 2017. 3 : 주민설명회 □ 추진계획 ○ 2017. 6 : 마스터 플랜(기본계획) 확정 및 국토부 승인 ○ 2017. 7 : 새뜰마을사업 착수 ○ 2019. 12 : 새뜰마을사업 완료

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-32	담당부서 작성자	(안전도시건설국/도시계획과) (이주현/061-270-3445)
정 책 명	동명동 송도마을 취약지 정비사업
사업개요	○ 추진배경 - 목포의 대표적인 달동네인 송도마을은 취약계층이 밀집한 지역으로 취약지역의 삶의 질 충족을 위한 지역발전위원회 주관 ‘16년도 새뜰마을 (취약지역 생활여건 개선) 공모사업에 선정되어 추진 하는 사업임 ○ 추진기간 : 2016. 2. ~ 2019. 12. ○ 총사업비 : 4,301백만원 ○ 주요내용 - 안전확보 : 마을 북·서·남 위험 옹벽 및 절개지 정비, 안전 난간 설치, CCTV 및 보안등 설치 - 생활·위생 인프라 개선 : 노후 상·하수관로 정비 등 - 일자리, 문화·복지 휴먼케어 : 게스트하우스 리모델링 운영, 송도 미로골목 프로젝트, 마을해설가 육성·운영 등 - 주택 정비 : 빈집 정비, 슬레이트 주택정비, 집수리 - 주민역량 강화 : 주민 참여, 갈등 조정, 교육·홍보 등
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ 16. 2. 3 : 16년도 새뜰마을사업 대상지 선정 - 관련자 : 도시계획과장 나상원, 도시계획담당 오호영, ○ 16. 7.18 : 새뜰마을사업 현장컨설팅 - 관련자 : 도시계획과장 나상원, 도시계획담당 오호영 ○ 17. 2.28 : 마스터플랜 수립 및 실시설계용역 착수 - 관련자 : 도시계획과장 나상원, 개발담당 박형훈 ○ 17. 3.20 : 새뜰마을사업 주민설명회 - 관련자 : 도시계획과장 나상원, 개발담당 박형훈

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	건설과	②담당자 (연락처)	시설8급 이인정 건설과장 이상호 (061-270-3484)
③정책사업명	가톨릭성지 주변 도로개설 (2017-33)
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입 되는 사업	⑤사업기간	2017년~2019년
⑥주요내용	○ 추진배경 : 원도심 도로망 구축으로 교통난을 해소하고 도로를 개설하여 접근성 향상은 물론 도심순환 교통체계 구축 ○ 사업개요 - 사 업 명 : 가톨릭성지 주변 도로개설 - 사업위치 : 산정동 74-190번지 일원 - 사업내용 : 도로개설 L=520m, B=8~12m - 사업기간 : 2017~2019 - 사 업 비 : 4,900백만원

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-33	담당부서 작성자	(안전도시건설국/ 건설과) (이인정/061-270-3484)
정 책 명	가톨릭성지 주변 도로개설
사업개요	○ 추진배경 - 원도심 도로망 구축으로 교통난을 해소하고 도로를 개설하여 접근성 향상은 물론 도심순환 교통체계 구축 ○ 추진기간 : 2017 ~2019 ○ 총사업비 : 4,900백만원 ○ 주요내용 - 도로개설 L=520m, B=8~12m
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘16. 10. : 용역과제 사전심의 - 관련자 : 건설과 과장 이상호, 책임관 이충완, 실무관 이인정 ○ ‘17. 01. : 실시설계용역 완료 - 관련자 : 건설과 과장 이상호, 책임관 이충완, 실무관 이인정 ○ ‘17. 04. : 실시계획인가고시 - 관련자 : 건설과 과장 이상호, 책임관 이충완, 실무관 이인정

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	남해환경관리과	②담당자 (전화번호)	공업6급 김근택 남해환경관리과장 문명식 (061-270-4200)
③정책사업명	남악하수처리장 연계처리 하수관로 설치사업 (2017-34)
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입 되는 사업	⑤사업기간	2017.04.17 ~ 2017.07.16
⑥주요내용	□ 사업의 목적 ㅇ남악신도시 하수발생량 증가에 따른 기존 연계처리용 펌프용량이 한계치에 도달하여 신규 하수관로를 설치하여 하수처리장 운영관리에 만전을 기 하고자 함. □ 사업개요 ㅇ사업비 : 1,179백만원(전남개발공사 56.27%, 시비 43.73%) ㅇ사업기간 : ‘17. 4. ~ ’17. 7. ㅇ사업내용 ․ 토목공사(주철관 ∅250×1,850m) 1식 ․ 기계공사(협잡물처리기외 5종) 1식 ․ 건축공사 1식 등

<기재항목>

① 사업부서 : 사업을 수행하는 부서명을 기재

② 담당자 : 사업 담당자 및 사업부서장을 직급(직위)과함께 기재

③ 정책 사업명 : 추진하는 정책사업명을 기재

④ 선정기준 : 정책실명제 중점관리 대상사업으로 선정한 해당 기준을 기재

⑤ 사업기간 : 사업의 시작 및 종료 시점 기재

⑥ 주요내용 : 사업의 목적 또는 추진배경, 추진계획 및 주요 추진 상황(예산포함) 등 사업 전반에 대해서 구체적으로 기재

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-34	담당부서 작성자	(상하수도사업단/남해환경관리과) (김근택 / 061-270-4200)
정 책 명	남악하수처리장 연계처리 하수관로 설치사업
사업개요	○ 추진배경 - 남악신도시 하수발생량 증가에 따른 기존 연계처리용 펌프용량이 한계치에 도달하여 신규 하수관로를 설치하여 하수처리장 운영관리에 만전을 기 하고자 함. ○ 추진기간 : 2017. 4. 17 ~ 2017. 7. 16 ○ 총사업비 : 1,179백만원 ○ 사 업 량 : ․ 토목공사(주철관 ∅250×1,850m) 1식 ․ 기계공사(협잡물처리기외 5종) 1식 ․ 건축공사 1식 등
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘15. 12 : 실시설계 용역완료 - 관련자 : 남해환경관리과 실무관 손창섭, 책임관 권승현, 과장 문동배 ○ ‘16. 8 : 건설기술심의위원회 심사 완료 - 관련자 : 남해환경관리과 실무관 손창섭, 책임관 권승현, 과장 문동배 ○ ‘16. 9 : 도로관리심의 실시 완료 - 관련자 : 남해환경관리과 실무관 손창섭, 책임관 권승현, 과장 문동배 ○ ‘16. 10 : 전라남도 계약심의 완료 - 관련자 : 남해환경관리과 책임관 김근택, 책임관 권승현, 과장 문동배 ○ ‘16. 11 : 도로굴착 이중터파기에 대한 공정회의 실시(3회) - 관련자 : 남해환경관리과 책임관 김근택, 책임관 권승현, 과장 문동배 ○ ‘17. 2 : 도로굴착 이중터파기에 대한 공정회의 실시(2회) - 관련자 : 남해환경관리과 책임관 김근택, 책임관 곽복현, 과장 문명식 ○ ‘17. 3 : 공사 계약 의뢰 - 상하수도행정과 - 관련자 : 남해환경관리과 책임관 김근택, 책임관 곽복현, 과장 문명식 ○ ‘17. 4 : 공사 착공 - 관련자 : 남해환경관리과 책임관 김근택, 책임관 곽복현, 과장 문명식

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	공원녹지과	②담당자 (전화번호)	녹지7급 정장범 공원녹지과장 김진호 (061-270-3433)
③정책사업명	고하도 육지면 목화단지 조성사업 (2017-35)
④선정기준	10억원 이상의 예산이 투입 되는 사업	⑤사업기간	2017.~ 2021.
⑥주요내용	□ 사업의 목적 ○국내 최초의 육지면 목화발상지 역사적 가치를 살리고 친환경 향토산업으로 육성하여 주민의 일자리 창출과 지역경제 활성화에 기여하는 명품 브랜드 관광상품 개발 □ 사업개요 ○ 위 치 : 목포시 달동 1332번지 일원(고하도) ○ 규 모 : 목화단지 120,953㎡ ○ 사업내용 : 목화밭, 체험전시관, 기능성 식품 및 상품 개발 ○ 사 업 비 : 189억원(국비 5,500, 도비 70, 시비 13,313) □ 추진사항 ○ 2016. 04. 08 : “솜으로 덮인 섬 고하도 여행” 창조지역사업 응모 ○ 2016. 09. 06 : 목화단지 부지(국유지) 확보 28,100㎡ ○ 2016. 09. 09 : 조선업 밀집지역 관광산업육성 국비확보 ○ 2016. 10. 13 : “솜으로 덮인 섬 고하도 여행” 창조지역사업 선정 ○ 2016. 11. 07 : 기본 및 실시설계용역 착수(준공 ‘17. 3. 30) ○ 2016. 12. 22 : 목화 체험전시관 부지(충무분교) 사용허가 ○ 2017. 02. 22 : 고하도 육지면 목화단지 조성(파종)공사 착공 □ 추진계획 ○ 2017. 08. : 고하도 육지면 목화단지 휴게 및 편익시설 설치 ○ 2018. 02. : 고하도 육지면 목화단지 조성 토지보상 ○ 2018. 02. : 목화체험 전시관 실시설계 추진 ○ 2018. 08. : 목화체험 전시관 신축공사 발주(‘19년말 준공) ○ 2019. 02. : 목화 기능성 식품 및 브랜드 상품 개발

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2017-35	담당부서 작성자	(도시발전사업단 / 공원녹지과) (녹지7급 정장범 / 061-270-3633)
정 책 명	고하도 육지면 목화단지 조성사업
사업개요	○ 추진배경 - 국내 최초의 육지면 목화 발상지의 잠재된 역사적 가치를 향토산업으로 육성하여 지역 특화 6차 고부가가치 관광 상품으로 개발함으로써 주민의 일자리 창출과 지역경제 활성화에 기여코자 추진함 ○ 추진기간 : 2016. ~ 2021(6년간) ○ 총사업비 : 189억원(국비 5,500, 도비 70, 시비 13,313) ○ 사업내용 : 목화밭, 체험전시관, 기능성 식품 및 상품 개발
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘16. 4. 08. : “솜으로 덮인 섬 고하도 여행” 창조지역사업 응모 - 관련자 : 관광과 책임관 김광호, 책임관 구 준, 과장 조건형 - 관련자 : 기획예산과 실무관 최연희 책임관 이민희, 과장 이지홍 ○ 2016. 09. 06 : 목화단지 부지(국유지) 확보 28,100㎡ - 관련자 : 공원녹지과 실무관 정장범, 책임관 최현모, 과장 김진호 ○ 2016. 09. 09 : 조선업 밀집지역 관광산업육성 국비확보 - 관련자 : 공원녹지과 실무관 정장범, 책임관 최현모, 과장 김진호 ○ 2016. 11. 07 : 기본 및 실시설계용역 착수(준공 ‘17. 3. 30) - 관련자 : 공원녹지과 실무관 정장범, 책임관 최현모, 과장 김진호 ○ 2016. 12. 22 : 목화 체험전시관 부지(충무분교) 사용허가 - 관련자 : 공원녹지과 실무관 정장범, 책임관 최현모, 과장 김진호 ○ 2017. 02. 22 : 고하도 육지면 목화단지 조성(파종)공사 착공 - 관련자 : 공원녹지과 실무관 정장범, 책임관 김용안, 과장 김진호